준공기한 연기 의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 2023년 시공원(북악산) 보수정비사업

나. 계 약 자 : 우본개발(주) 대표 김진만

다. 계약금액 : 금177,272,000원(금일억칠천칠백이십칠만이천원)

라. 사업기간 : 2023.06.16.~ 08.14.

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

- 당  초 : 2023.06.16. ~ 2023.08.14.

- 변  경 : 2023.06.16. ~ 2023.08.24.

나. 연기 귀책사유 : 종로구청

다. 지체상환금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 공사시행 중 주요 공정 진행시점에 폭염, 우천 등으로 준공에 필요한 절대공기 부족하여 준공기한 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

2023.  8.

도시녹지과장  유 지 용 (인)

종로구(분임)재무관 귀하