준공기한 연기조치 의뢰서

▢ 공사개요

○ 공 사  명: 수유재래시장 시설현대화사업 아케이드 누수보수공사

○ 도  급  자

- 누수보수공사: 건우구조엔지니어링(주)  한순화

○ 도  급  액: 금43,563,060원

○ 계약년월일: 2016. 11. 1.

○ 착공년월일: 2016. 11. 14.

○ 준 공 기 한: 2016. 12. 11.

▢ 준공기한 연기

○ 준공기한

공 사 명	준공기한 연기		비 고
	당 초	변 경
2016년 수유재래시장 시설현대화 아케이드 누수보수공사	2016. 12. 11.	2016. 12. 19.

○ 귀책소재: 강북구청

○ 지체상금 부과여부: 미부과

○ 연기사유: 수유재래시장 공사민원발생결과 누수공사공법을 변경하여 처리하여여 하는바, 발주처 설계변경 요구사항 검토기간이 필요함에 따라 준공 기한을 8일 연장하고자 함

2016. 12.

지역경제과장  정 길 용 (인)

강북구(분임)재무관 귀하