준공기한 연기 조치 의뢰서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 사업개요

가. 공 사 명 : 하늘공원 노후 전망데크 정비공사

나. 사업개요 : 데크철거 및 재설치 1식

다. 계약금액 : 83,787,000원

라. 도 급 자 : 거삼조경(주) 대표 예종서

마. 계 약 일 : 2014. 7. 03.

바. 준공기한 : 2014. 9. 04.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한 : 2014. 9. 30.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 현장 여건에 따른 추가공종 발생으로 절대공기 부족

2014.   8.     .

시설과장  한 성 현 (인)

서울특별시 서부공원녹지사업소 경리관 귀하