준공기한 연기 조치 의뢰서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 사업개요

가. 공 사 명 : 시가 흐르는 공원(시정원)조성사업

나. 사업개요 : 시비12개소, 시전시대 18개소 등

다. 계약금액 : 89,263,900원

라. 도 급 자 : 세계조경  대표 이 희 주

마. 계 약 일 : 2014. 8. 21.

바. 준공기한 : 2014. 9. 23.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한 : 2014. 10.  30.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 지속된 우천과 추석연휴, 주말 등 공사중지로 절대공기 부족

2014.   9.     .

시설과장  한 성 현 (인)

서울특별시 서부공원녹지사업소 경리관 귀하