카 본 코 리 아 주 식 회 사

우편번호 137-833 / 서울특별시 서초구 동광로 10길 27-7, 3층 / ☎(02) 888 - 6685 / FAX (02) 888 - 2521

문서번호 : 2014-12-02

시행일자 : 2014-12-12

수    신 : 서울시 남부수도사업소장

참    조 : 급수운영과장

제    목 : 준공기한 연기 건

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “급수운영과-23705 (2014.11.04.)”호와 관련 작업지시 받은 관악시설물-20번 남현배수지 외 1개소 항내부계단 논슬립타일 설치공사 외 3건의 공사를 동절기 기온저하(영하)로 인하여 배수지작업 및 노후밸브교체작업을 하는데 단수민원 및 하자발생의 우려가 있어 불가피하게 아래와 같이 공사완료기간을 연기요청합니다.

-   아     래  -

작업지시	당 초	변 경	변경사유
관악시설물-20번	2014.11.06.~2014.12.15	2014.11.06.~2015.01.30	동절기
관악시설물-22번	2014.11.18.~2014.12.15	2014.11.18.~2014.12.31	동절기
관악시설물-23번	2014.11.19.~2014.12.20	2014.11.19.~2015.03.31	동절기
관악시설물-25번	2014.11.21.~2014.1.20	2014.11.21.~2015.03.31	동절기

붙임 :	없음 .끝.

카   본   코   리   아   주  식  회  사

대   표   이   사      구     본     영 (인)