준 공 사 유 서(1차)

1. 공사명 : 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)

2. 도급자 : (유)다라니산업건설 대표 최형근

3. 공사개요 : 소규모포장 A=110a, 차로단위복구 A=417a

4. 총공사비 :  3,796,736원(도급비 1,625,285천원, 관급비 2,171,451천원)

5. 공사기간 : 2014. 3. 26 ~ 2015. 2. 28.

6. 금회 준공기간 : 2014. 3. 26 ~ 2014. 8. 31

7. 금회 준공(정산)액 : 633,184천원(도급비 389,690천원, 관급비 243,494천원)

8. 정산 사유

o 작업지시중 복구공사 완료분(작업완료보고 2회)에 따른 정산

9. 정산 물량현황

(단위:a)

공 종		계약물량	전회까지 물량	금회 준공물량	누 계	잔여물량
소규모포장복구	소계	114	66.36	42.93	109.28	4.71
	A-1(10㎡이상)	110	65.35	42.71	108.06	1.94
	A-1(10㎡이하)	2	1.01	0.22	1.22	0.77
	A-2(10㎡이상)	1	0	0	0	1
	A-2(10㎡이하)	1	0	0	0	1
차로단위복구	소계	486	95.54	131.10	226.64	259.36
	평삭후 덧씌우기 (20a기준)	155	95.54	13.99	109.53	45.47
	평삭후 덧씌우기 (50a기준)	195	0	117.11	117.11	77.89
	평삭후 덧씌우기 (20a기준,긴급)	83	0	0	0	83
	평삭후 덧씌우기 (50a기준,긴급)	53	0	0	0	53