공  사  시  방  서

공사명 : 2018년 관내 하수박스 준설공사

2018. 03.

강남구청 치수과

일  반  시  방  서

제1장  총    칙

1. 적 용 범 위

(1) 본 시방서는 강남구『2018년 관내 하수박스 준설공사』에 적용한다. (이하 작업이라 한다)

(2) 도면 및 특별시방서에 기재된 사항은 본 시방서에 우선한다.

(3) 일반시방서, 특별시방서 및 설계도서에 이의가 발생된 때에는 감독원의 지시 또는  협의에 의한다.

2. 용어의 정의

본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음 각호에 정하는 것에 의한다.

(1)□지시□는 우리구의 명에 의해 감독원이 도급자에게 감독원의 소관 업무에 속하는 방침, 기준, 계획 등을 지시에 의거 실시하는 것을 말한다.

(2)□승락□은 도급자의 발의에 의해 도급자가 감독원에게 보고하고 감독원이 이해하는 것을 말한다.

(3)□협의□는 감독원과 도급자가 대등한 입장에서 합의하는 것을 말한다.

3. 법령등의 준수

(1) 도급자는 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령, 조례 규칙등과 우리구와 타기관(공사) 등과 협정을 체결하고 준수하여야 한다.

(가) 근로 기준법

(나) 도로법

(다) 하수도법

(라) 건축법

(마) 도로교통법

(바) 하천법

(사) 환경보전법

(아) 폐기물관리법

(자) 문화재보호법

(차) 건설산업기본법

(2) 본 공사에 종사하는 근로자에 대한 제 법령 등의 운용, 적용은 도급자가 비용을 부담하고 책임진다.

4. 수송절차 및 제출서류

(1) 도급자는 계약체결 즉시 도로사용, 작업중의 도로교통에 대하여 관계부서에서   허가를 받아야 한다(발주자가 할 수도 있다)

(2) 도급자는 계약체결 즉시 아래서류를 제출하여 승낙을 받아 착수한다.

(가) 현장대리인계 및 기술자 명단

(나) 착공계

(다) 공정표

(라) 도급내역서

(마) 시공계획서

(3) 제출한 서류의 내용을 변경할 필요가 있을 경우 즉시 변경계를 제출한다.

(4) 도급자는 일보를 매일 우리구가 지시하는 양식에 기입하여 제출할 것

(5) 작업이 완료된 경우 즉시 아래서류를 제출하여야 한다.

(가) 준공계(작업완료 보고서)

(나) 작업기록 사진(전, 중, 후)

(다) 준공도서(위치도)

(라) 기타 감독원이 지시한 사항

5. 현 장 체 제

(1) 도급자는 작업의 기술 및 경험을 가진 기술자를 상주시켜 소정의 업무에 종사 시켜야 한다.

(2) 도급자는 작업원을 선정하여 질서 정연하게 작업을 시키고 또한 숙련을 요하는 작업에는 상당한 경험을 가진 유경험자를 현장에 배치한다.

(3) 도급자는 적정한 작업의 진척을 할 수 있도록 충분한 작업원을 배치하여야 한다.

(4) 낙찰자(도급자)는 착공일로부터 7일이내에 흡입준설장비(세정차 포함)를 현장에 상주시켜야 한다.

6. 작업시 주민과의 협조

(1) 도급자가 작업시 인근 주민등과 협의를 필요로 할 때, 또는 주민의 민원사항이  있을 경우 즉시 감독원에 보고하고 지시를 받아 성의를 갖고 주민과 협의하되 그 결과를 즉시 보고하여야 한다.

(2) 도급자는 어떠한 경우라도 주민들로부터 작업과 연관해서 보수 등을 받아서는 안 된다

※ 작업원 등의 상기 행위에 대해서는 도급자가 그 책임을 진다.

7. 피해 보상 및 배상

(1) 도급자는 하수도시설물에 손상을 입혔을 때는 즉시 감독원에 보고하고 감독원의 지시에 따라 신속하게 원상 복구한다.

(2) 도급자는 작업함에 있어 주의와 의무를 태만히 하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 그 복구 및 배상에 전 책임을 진다.

8. 공 정 관 리

(1) 도급자는 착공계에 첨부된 공정표에 따라 감독원과 협의하여 실시 공정표를 작성 제출한다.

(2) 공정관리는 실시 공정표에 의거 적정하게 시행한다.

(3) 예정작업 공정과 실적에 차질이 있는 경우 필요한 조치를 강구하여 작업이 진행 되도록 한다.

(4) 매월말 작업실적 보고서를 작성 작업의 진척 상황을 감독원에게 제출하여야 한다

(5) 작업현장 형편상 휴일 또는 야간에 작업을 시행할 필요가 있는 경우 미리 그 작업 내용, 작업시간 등에 대하여 감독원의 승낙을 받는다.

9. 작업기록 사진 제출

(1) 도급자는 작업상황 사진을 촬영 후 감독원에게 제출 승낙을 받는다.

또한 우리구가 필요하다고 인정하여 감독원이 필요 작업상황에 대한 사진 제출을  지시한 경우 그 지시에 따라야 한다.

제 2 장  안 전 관 리

1. 안전설비 설치 및 현장관리

(1) 작업시에는 안전시설을 현장상황에 따라 충분히 설치한 후 시행한다.

(2) 작업중 교통안전을 위해 교통 정리원을 배치하고 제3자도 알 수 있도록 완장을 착용하고 근무토록 한다.

(3) 현장의 정리정돈 및 현장관리에 세심한 주의를 갖고 작업에 임하여야 한다.

2. 작업원의 안전관리

(1) 도급자는 작업전에 항상 세심한 주의를 하여, 체류하는 유독가스, 혹은 산소결핍으로  인한 사고에 대비하여 충분한 사전조사 및 대책을 강구하여 사고예방 및 작업원   안전관리에 만전을 기하여야 한다.

(2) 작업시 하수도시설 및 가스관 부근에서는 절대로 화기를 사용해서는 안 된다.

(3) 작업에 사용하는 기재는 항상 점검하여 완전한 정비를 하여 유사시 대비하여야 한다.

(4) 작업중 사고 발생 시에는 긴급 연락망도에 의거 즉시 감독원 및 유관부서에 보고하는 동시에 신속하게 필요한 조치를 취해야 한다.

제 3 장  준 설 작 업

1. 일 반 사 항

(1) 도급자는 작업 장소를 사전에 감독원에게 연락하여야 한다.

(2) 작업시 관구를 손상하지 않도록 맨홀로라 등을 사용 보호조치를 하여, 하수도시설물 등에 손상이 없도록 유의한다.

(3) 물막이공은 상류부에 물이 넘치지 않는 구조로서 작업을 완전히 확보되는 것이어야 한다.

(4) 도급자는 작업시 현지 주민생활에 불편이 없도록 소음, 진동방지에 적극 노력해야  한다.

(5) 도급자가 감독원의 지시를 어기고 작업을 계속한 경우 및 감독원이 사고방지상 위험하다고 판단한 경우 등에는 작업을 일시 중지시킬 수 있다.

(6) 작업시 도로 등을 오염시킨 경우 작업완료 후 세정 청소한다.

(7) 작업완료 후 신속하게 사용기기 및 준설물을 반출하고 작업장소의 청소를 철저히  한다.

2. 준설작업

(1) 작업시간 : 간선도로 중 교통정체가 예상되는 도로는 가급적 흡입식 준설차로 야간 작업을 하여 교통 체증을 방지한다.

(2) 토사의 유하방지 : 작업시 하류측에 토사를 유출시켜서는 안된다. 만일 유출된 경우 영향구간의 유출토사를 제거한다.

(가) 수분이 다량인 준설토에 대해서는 탈수 등의 조치를 하여 운반도중 흘리지 않도록 한다 (중간집하장 활용)

(나) 운반차량은 토사의 유출, 비산 및 악취발생 등의 우려가 없는 구조의 차량을 사용    해야 한다.

(3) 준설토 처리

(가) 중간집하장으로 반입되는 준설토 및 재활용업체에 반출시 시료를 채취 반복적인 함수비 시험을 실시하여 함수비 평균치를 산출하여 준설량 확인(품질시험소 의뢰)

(나) 중간적치장에서 준설토 반출시 발주처에서 폐기물처리시스템(올바로시스템)에 준설토 반출일자,운반차량번호를 현장 확인후 입력하면 운반업체에서 중간적치장에 있는 자연건조된 준설토를 준설토 처리업체(재활용)로 운반한다.

(다) 준설토 계근량을 처리업체에서 입력하면, 발주처, 운반업체에서는 계근량을 확인후 폐기물처리시스템 입력을 익일까지 완료토록함.

	배 출 자 (발주처)		올바로시스템입력	운 반 자 (운반업체)	지정된 차량으로	처 리 자 (처리업체)		계근량
			반출일자,운반차량번호		처리업체로 운반			입력
	계근량			계근량입력
	입 력 (1일내)			(1일 이내)

(4) 세정수

(가) 작업에 필요한 세정수는 소방서 급수탑 소화전 및 유출지하수 등을 이용한다.

(5) 이상시 조치

(가) 준설작업이 곤란한 상태인 경우 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받아야 한다.

(나) 작업구간의 시설물에 파손 부등 침하, 노후 등 이상을 발견할 때에는 신속하게  감독원에게 보고한다.

(7) 도급자는 준공검사 시 하수도 준설 관망도를 작성 제출한다.

제 4 장  기  타

1. 작업의 완료

- 준설작업에 의하여 발생한 준설토는 우리구와 기 계약된 「2018년 준설토폐기물 처리용역(연간단가)」에서 처리토록 한다.

2. 검       사

(1) 기성검사 및 준공검사에는 도급자 또는 대리인이 반드시 입회해야 한다.

(2) 검사는 도급자가 제출한 일보, 사진, 준공도서, 잔토처리 반출증 및 계근장 등에 의거 시행하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 불완전한 장소가 있을 때에는 재 시행토록 하고, 재시공시 필요한 비용은 모두  도급자의 부담으로 한다.

3. 규정이외의 사항

(1) 계약서, 시방서 및 설계도서 등에 포함되지 않은 사항으로 준설작업의 실시상 당연히 필요한 경우 발주기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

(2) 기타, 명시되지 않은 사항 중 협의를 필요로 하는 경우에는 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받아 처리할 것.