중랑교 하부 공중비계설치공사

교    통    소    통    대    책

2014. 10

	서울특별시 성동도로사업소

1. 공 사 의 개 요

1.1 위치도

(주)동해종합기술공사

(주)동해종합기술공사

중랑교 보수보강공사 교통소통대책(신축이음장치 교체공사)

중랑교 보수보강공사 교통소통대책(신축이음장치 교체공사)

◦ 본 공사는 「중랑교 보수보강공사」를 위한 중랑교 하부 공중비계를  설치하는 공사로 공사구간 및 구체적인 지점은 다음과 같음.

< 위치도 >

1.2 공사의 배경 및 목적

◦ 본 공사는 『중랑교 보수보강공사』중 동부간선도로 상부에 위치한 중랑교 바닥판 하면 단면증대를 위한 공중비계를 설치하는 공사로 차량의 안전한 통행 및 교량의 안전성을 확보하고자 함이다.

1.3 공사의 개요

◦ 본 공사구간은 중랑교 중 동부간선도로(북향) 상부에 위치한 S7 구간으로 세부적인

내용은 다음과 같음.

▣ 공사개요

구 분	내 용
공사명	ㆍ중랑교 하부 공중비계 설치공사
공사시행자	ㆍ서울특별시 성동도로사업소
공사장위치	ㆍ중랑교 S7(동부간선도로(북향) 상부)
공사구간	ㆍ총연장 20m
공사기간	ㆍ2014년 10월 24일 ~ 2014년 11월 02일(기간내 2일)〈설치1일, 철거1일〉

▣ 공사의 내용

구 분	내 용
공사내용	ㆍ중랑교 공중비계설치공사
공사 및 점용시간	ㆍ공중비계설치공사 : 주간공사( 10:00 ~ 17:00 )
점용폭원	ㆍ동부간선도로(북향) (3차로 : 1개 차로씩 순차적 점용)

1.4 교통소통대책에 관한 요약

1.4.1 교통소통대책 요약서

공 사 명	중랑교 하부 공중비계설치공사	공 사 시 행 자	서울특별시 성동도로사업소
담 당 부 서	시설보수과	담 당 자 및 전 화 번 호	임 승 민 (02) 2210-1558
주 소 (우편번호)	서울특별시 성동구 자동차시장길 41
시 공 회 사	㈜고려씨엔씨	담 당 자 및 전 화 번 호	최 선 호 *************
주 소 (우편번호)	서울특별시 서울시 동대문구 장안동 458-1 403호
감 리 회 사	서울시설공단	담 당 자 및 전 화 번 호	황 병 철 *************
주 소 (우편번호)	서울특별시 성동구 청계천로 540 서울시설공단
대 상 도 로	ㆍ동부간선도로(북향)	차 로 수	ㆍ동부간선도로 : 한방향 3차로
점용폭및 점용차로	ㆍ점용폭 : 3.5m ㆍ점용차로 : 1차로 ※ 1차로씩 순차적 점용(총3차로)	점 용 연 장 (m)	ㆍ100m
점용기간	ㆍ공중비계설치공사 : 2일(주간) 설치 1일, 철거 1일	점 용 시 간	ㆍ공중비계설치공사 : 10:00 ~ 17:00
공 사 기 간	ㆍ2014년 10월 24일~2014년 11월 02일 (기간 중 2일)	지 점(구체적)	ㆍ중랑교 하부 동부간선도로(북향)

1.4.2 공사구간 교통량 현황

1) 동부간선도로(북향) 시간대 교통량

◦ 동부간선도로 공사구간의 공사중 교통영향을 분석하기 위하여 조사를 수행하였음.

▣ 첨두시간대 가로교통량(평일)

동부간선 도로(북향)	시 간 대	교통량(대/시)	편도차로수
	아침첨두(08:00~09:00)	3,245	3차로
	점심첨두(12:00~13:00)	3,684	3차로
	저녁첨두(18:00~19:00)	4,809	3차로

▣ 첨두시간대 가로교통량(토요일)

동부간선 도로(북향)	시 간 대	교통량(대/시)	편도차로수
	아침첨두(08:00~09:00)	3,468	3차로
	점심첨두(12:00~13:00)	3,857	3차로
	저녁첨두(18:00~19:00)	4,413	3차로

▣ 첨두시간대 가로교통량(일요일)

동부간선 도로(북향)	시 간 대	교통량(대/시)	편도차로수
	아침첨두(08:00~09:00)	2,522	3차로
	점심첨두(12:00~13:00)	3,664	3차로
	저녁첨두(18:00~19:00)	4,378	3차로

2) 동부간선도로(북향) 시간대별  통행속도

▣ 출처 : 서울도시고속도로 교통관리센터(2014년 09월 동부간선 북향)

시간대별 통행속도	시간/구분	장안교-->중랑교	중랑교-->월릉JC
	10시	75km	76.2km
	11시	77.9km	77.5km
	12시	79.3km	77.7km
	13시	78.3km	76.1km
	14시	77.2km	72.2km
	15시	74.8km	71.1km
	16시	71.1km	61.8km
	17시	60.7km	51.3km

1.4.3 공사구간 도로 현황

◦ 중랑교 하부 공중비계설치공사 구간 및 주변 도로현황은 다음과 같음.

< 공사구간 도로현황 사진 >

현   황   사  진 - 1

현 황 사 진 - 2

공중비계설치

공중비계설치

공중비계설치

도로점용

2. 교통소통대책도

1) 단계별 교통소통 대책도

1단계 ~ 3단계 : 중랑교 하부 공중비계설치공사

도면 참조