[븉임 1]

2015년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	중랑물재생센터 3, 4처리장 보안등 정비									사업 구분			□ 기반구축 ■ 시설보조
사업개요	- 노후된 조명등을 등기구 교체 및 광원을 LED로 교체 - 노후 선로정비
추진근거	센터 전력사용량 절감 및 조명개선으로 안전한 근무환경 조성목적
수행기관	서울특별시(도시안전본부 중랑물재생센터)							위탁기관
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
	보안등 40본			나트륨 250W → LED 50W							3, 4처리장 초종침, 지하관랑 일부
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담							합 계
	16.4			38.3							54.7
기대효과	에너지절약 (TOE)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	38.14					3.87			82%					14.13
별첨자료	사업계획 부속서 1부(양식을 참고하되 사업목적에 맞게 자유롭게 작성하여 제출)
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2015년 4 월 일 서울특별시장 에너지관리공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	중랑물재생센터			부서		물재생과					성 명			강신영
	전화	2211-2564			E-Mail		godzero@seoul.go.kr

[별첨_사업계획 부속서]

중랑물재생센터 3, 4처리장 보안등 정비 사업계획 부속서

1. 추진 개요

ㅇ 목  적 : 노후된 조명설비를 고효율 LED광원으로 개량하여 효율적인
에너지 사용 및 안전한 근무환경 조성
ㅇ 추진배경

- 조명설비 노후로 직원 야간순찰시 안전사고 발생위험 상존

- 저효율 광원사용으로 에너지 사용량 대비 조명효과가 만족스럽지 않음

ㅇ 추진방향 : 고효율인증제품을 구매하여 설치하되 가격대비 성능을

비교하여 적절한 제품 선택하여 구매설치

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ 50W 안정기 내장형 LED램프 구매 (고효율인증, 높은 광효율)

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 중랑물재생센터 3, 4처리장 초종침 구조물상 보안등 124본 및 지하관랑
투광등 36등 중 보안등 40본 개량

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 센터에서 관급자재 구매

ㅇ 전기공사 발주하여 시행하며 사업기간은 계약일로부터 60일

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(TOE/년)
전기(MWh/년)	33.58	5.84	27.74		82.6	3.87	14.13
합계(TOE/년)	46.17	8.03	38.14		82.6	3.87	14.13

＊에너지열량환산기준은 에너지법시행규칙 제5조제1항관련 [별표]참고

※ 에너지절감기대효과 산출 세부내역 첨부

6. 사업비 산출 내역(공사별, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액 등을 구별하여 작성)

품 명	규격	단위	수량	단가(백만원)	금액(백만원)	비고
LED램프	50W	개	40	0.282	11.28
등주암	공원등용	개	40	0.250	10
전기공사		식	1		33.42
계					54.7

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)
54.7	16.4	38.3		38.3

8. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ 야간순찰자를 활용하여 점등불량시 신속히 조치

9. 사업결과 활용 계획

ㅇ 예산을 추가확보하여 확대시행

[븉임 2]

2015년도 지역에너지절약사업 자금교부 신청서

신 청 자 (기 관)		서울특별시 중랑물재생센터					대표자			김동기
사 무 소 소 재 지		서울 성동구 자동차시장3길 64					전화			02-2211-2564
투자예정지		중랑물재생센터 3, 4처리장 초종침 구조물상					전화
담 당 자		소속		물재생과		직책		주무관		성명	강신영
사 업 명		중랑물재생센터 3, 4처리장 보안등 정비
사업기간		2015 년 7 월 ～ 2015 년 9 월
사업목적		- 전력사용량 절감 - 조명개선으로 안전한 근무환경 조성
자금신청 내 역	①보조결정액		②기 수령액		③금회신청액				④잔 액 <①-(②+③)>
	16,400천원		천원		16,400천원				0천원
위와 같이 지역에너지절약사업을 위한 자금교부를 신청합니다. 2015 년 3 월 일 신 청 자 서울특별시장 (서명 또는 인) 산 업 통 상 자 원 부 장 관 귀하
첨부	('15년도) 지역에너지절약사업계획서 또는 지역에너지절약사업 추진현황 1부