문서번호	방재시설부-9825
결재일자	2018.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
협조

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

건설사업관리용역(2차) 발주계획 검토 보고

2018. 7.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

건설사업관리용역(2차) 발주계획 검토 보고

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역」관련 2차 발주계획에 대한 검토 보고임.

※ 근거 : 중랑감 제18-185호(2018. 7.27.)

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독권한 등건설사업관리용역

○ 공사규모 : 총인처리시설 450,000㎥/일

○ 용역기간 : 총괄 2017.06.19. ~ 2019.10.06.

2차  2018.08.01. ~ 2018.05.15.

○ 용역금액 : 총괄 2,134백만원, 2차 790.5백만원

○ 용역업체 : ㈜천일 대표이사 김창욱 외 3

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2017.06.12. : 용역계약

○ 2017.06.19. : 용역착수

○ 2017.06.19. : 용역중지

○ 2017.10.20. : 용역재개

○ 2018.07.31. : 용역준공(1차)

Ⅲ		검 토 내 용

○ 발주계획(2차)

- 용역기간 : 2018.08.01.~2019.05.15

- 용역금액 : 790,500,000원

- 투입개월 : 9.46개월

○ 투입계획(2차)

구 분	등 급	담당업무	투입개월	비 고
책임기술자	특 급	건설사업관리 총괄	9.46
토 목	고 급	토목	9.46
토 목	고 급	토목	4.00	구조물 시작 시점 투입
건 축	중 급	건축	1.61
기 계	특 급	기계	9.46
전기/통신	고 급	전기/통신	9.46
발주금액	790,500천원

○ 검토의견(책임건설사업관리기술자)

- 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(1차) 준공에 따라 건설사업관리용역(2차)을 시행하여 건설사업관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅳ		조 치 의 견

○ 위 검토내용과 같이 책임건설사업관리술자 의견대로 건설사업관리용역(2차) 발주 및 계약을 시행하여 건설사업관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  관련 공문 1부.  끝.