문서번호	방재시설부-4447
결재일자	2018.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
협조	열빛총괄과장
	공원시설과장

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

건설사업관리용역 준공기한 연기 검토 보고

2018. 04.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

건설사업관리용역 준공기한 연기 검토 보고

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역」관련 준공기한에 대한 연기 검토 보고임.

※ 근거 : 중랑감 제18-61호(2018.04.05.)

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독권한 등건설사업관리용역

○ 공사규모 : 총인처리시설 450,000㎥/일

○ 용역기간 : 총괄 2017.06.19. ~ 2019.10.06.

1차  2017.06.19. ~ 2018.04.14.

○ 용역금액 : 총괄 2,134백만원, 1차 600백만원

○ 용역업체 : ㈜천일 대표이사 김창욱 외 3

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2017.06.12. : 용역계약

○ 2017.06.19. : 용역착수

○ 2017.06.19. : 용역중지

○ 2017.10.20. : 용역재개

Ⅲ		검 토 내 용

○ 용역 착수 연기에 따른 용역기간 변경

- 용역 착수 연기 : 2017.06.19. → 10. 20.(123일)

○ 건설사업관리기술자 조기배치 및 투입기간 변경

- 토목 : 현장여건에 따른 기술자 투입기간 조정

- 조경 : 당초 1.5개월 → 변경 2.0개월

- 기계 : 비총인처리시설 우선 설치에 따른 기술자 조기투입

- 전기 : 공사중지에 따른 기술자 투입시기 조정

○ 용역금액 : 변경없음

○ 용역기간

구 분	당 초	변 경	비고
총괄	2017.06.19. ~ 2019.10.06.	2017.06.19. ~ 2019.10.06.	변경없음
1차	2017.06.19. ~ 2018.04.14.	2017.06.19. ~ 2018.07.31.	증) 108일

Ⅳ		조 치 의 견

○ 위 검토내용과 같이 총괄(1회) 및 1차(1회) 용역계약에 대하여 계약금액 변경없이 용역기간을 연장코자 함.

붙임  관련 공문 1부.  끝.