문서번호	방재시설부-10263
결재일자	2018.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
협조

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

준공기한 연기 검토 보고

2018. 08.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

준공기한 연기 검토 보고

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(1차)」관련 준공기한에 대한 연기 검토 보고임.

※ 근거 : 중랑감 제18-193호(2018. 8. 6.)

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(1차)

○ 공사규모 : 총인처리시설 450,000㎥/일

○ 공사기간 : 총괄 2017.09.13. ~ 2019.11.12.

1차  2017.09.13. ~ 2018.08.30.

○ 계약금액 : 총괄 16,339백만원(1차 13,336백만원)

○ 시 공 사 : 엘림토건㈜ 외 2

○ 관 리 단 : ㈜천일 외 3

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2017.09.12. : 공사계약

○ 2017.09.13. : 공사착공

○ 2017.09.13. : 예산배정 지연으로 인한 공사중지

○ 2018.02.09. : 유해․위험방지계획 부적정으로 인한 공사중지

○ 2018.05.11. : 총인처리시설 및 유입펌프장 내 혼합폐기물 발생으로 인한 반출지연

Ⅲ		검 토 내 용

○ 연기사유

구 분	지 연 사 유	지연 일수	비고
공사중지	예산배정 지연으로 인한 공사중지 (2017.09.13 ～ 2017.10.19.)	37일	방재시설부-16073호 (2017.09.13)
공사중지	한국산업안전공단 유해․위험방지계획서 심사결과 부적정으로 인한 공사중지 (2018.02.12 ～ 2018.03.20)	37일	건설안전부-554호 (2018.02.09) 건설안전부-1490호 (2018.03.21)
혼합폐기물 발생	총인처리시설 및 유입펌프장 내 혼합폐기물 발생으로 반출지연 (2018.05.11 ～ 2018.07.01)	52일	중랑감18-97호 (2018.05.11) 운영과-4516호 (2018.07.02)

○ 공사금액 및 기간

구 분		내 용	비 고
도급비	총괄	당초 : 16,339,843천원 변경 : 16,339,843천원	변경없음
	1 차	당초 : 13,336,000천원 변경 : 13,336,000천원	변경없음
공사 기간	총괄	당초 : 2017.09.13. ～ 2019.11.12. 변경 : 2017.09.13. ～ 2019.11.12.	변경없음
	1차	당초 : 2017.09.13. ～ 2018.08.30. 변경 : 2017.09.13. ～ 2018.12.10.	증 102일

○ 귀책사유 및 지체상금 : 발주처, 미부과

Ⅳ		검 토 의 견

<책임건설사업관리기술자>

○ 발주처 및 유관기관의 공사중지 지시 및 예상치 못한 혼합폐기물 발생으로 인한 공기지연은 불가피한 사항으로 공기연장은 타당하다고 판단되어 1차분 공사기간만 102일 연기하여 성공적인 사업을 완수코저 함.

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 책임건설사업관리기술자 보고내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되어 위 검토내용과 같이 공사계약에 대하여 계약금액 변경 없이 준공기한을 연기코자 함.

붙임  관련 공문 각 1부.  끝.