문서번호	시설관리과-829
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
협 조
	주무관

중랑천교 데크파손 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

시 설 부

(시설관리과)

중랑천교 데크파손 조치계획

본부장님 순찰중 적출된 중랑천교 데크파손과 두모교 하부 자전거도로 침하 부분에 대해 현장 조사후 조치계획 보고임

□ 현    황

○ 위    치 : 성동구 금호동 4가 중랑천 합류부

○ 교 량 명 : 중랑천교(준공 : 교량 ‘05년, 상부데크 설치 ‘09년)

○ 교량규모 : RC 슬라브교 연장 159.7m, 폭 3.4m(난간미포함)

□ 파손원인

○ 중랑천교는 콘크리트교량으로 안전에는 이상이 없으나, 협소(3.4m)한 교량을 다양한 이용자가 혼재(자전거, 보행자, 유지관리용 차량 등)사용함으서 바닥에 설치된 목재데크가 상당부분 파손됨

□ 보수계획

○  보수물량 : 데크 84㎡, 침하된 도로 재포장 30㎡(두모교 교각하부)

- 데크 약 250개 교체(개당 3.4×0.12×0.05m)

- 소요예산 : 약 19백만원(‘15.4.월중 보수)

• 목재 재단후 방부제처리 4일, 시공 3일, 침하보수 2일

- 보수시행 : ‘15년 하천시설물 유지보수업체 우선시행후 정산

◆ 중랑천교 목재데크 파손 현황
◆ 두모교 교각 하부 도로 침하 현황

첨 부 : 소요 공사비내역서 1부.  끝.