중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

시민통행 불편해소 및 수변 공원과의 접근성 도모를 위해 노원구 하계동 청구아파트와 월계역 연결하는 보행교량 설치 계획임

□ 사업개요

○ 위    치 : 노원구 하계동 학여울청구아파트 ~ 월계동 월계역 입구 교차로

○ 규     모 : 폭 4.5m, 연장 191m 보행교량(닐센아치교), E/V 2대

○ 공사기간 : '16. 3. ~ '18. 5.(설계기간 : '15. 9. 15~ '16.3.29)

○ 설 계 사 : ㈜경동엔진니어링, ㈜동해종합기술공사

○ 총사업비 : 9,354백만원('16년 예산 : 2,000백만원)

(설계비 130백만원, 시설비 1,670백만원, 감리비 200백만원)

□ 추진경위

○ '15. 3. 5. : 도로구조 개선 및 설치 위치 조정 요청(노원구청→서울시)

- 월계역 입구 교차로 주변 기학적인 도로구조 개선(경원선 철도교 하부)

- 중랑천 횡단 보행교 위치 조정

○ '15. 4. 1. : 우원식 국회의원, 김생환 시의원 면담(도시안전본부)

- 보행교량 조속 설치 요구

○ '15. 4. 2. : 보행교량 설치 간담회 결과 통보 (도시안전본부)

- 마들로 추가 횡단 및 공사 조기 착공 여부 등 검토 후 최적 추진 방안 마련

○ '15. 5.14. : 우원식 국회의원 시장 면담

- 보행교 설치 조속 추진 및 보행안전 위해 마들로 횡단 추가 연장 요청

○ '15. 5.20. : 보행교량 설치 추진 방침 (도시안전본부)

- 마들로 횡단 추가, 추가설계비(2억원) 및 공사비 '16년 예산 편성

○ '15. 9.~ '16. 3. : 실시설계 용역계약 및 착수

○ '15. 9.22. : 주민설명회 개최

- 지역 주민 등 보행교량 조기 착수요구

○ '16.01.21. : 보행교량 설치 주민 민원사항 처리 요청(하천관리과)

- 주민불편 해소 및 시정신뢰도 향상을 위해 조속히 공사 착수 방안 강구 지시

□ 추진계획

○ '16. 3. : 설계용역 준공 및 공사착수

○ '18. 5. : 공사준공

□ 위치도

사진
위 치	노원구 월계동 월계역 ~ 하계동 청구아파트(중랑천)
보행교량 개요도