문서번호	시설과-5746
결재일자	2015.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
협조

중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성사업

준공기한 연기 검토보고

2015. 8

중부공원녹지사업소

(시설과)

중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성사업

준공기한 연기 검토보고

“중랑캠핌숲내 청소년 체험의숲 조성사업”의 공사감독을 수행하고 있는 시설관리공단으로부터 준공기한 연기 요청이 접수되어 검토보고 함

공사개요

❍ 공 사 명 : 중랑캠핑숲내 청소년 체험의숲 조성사업

❍ 공사기간 : ‘15. 4. 20 ~ 8. 17

❍ 도 급 액 : 749,384천원

❍ 도 급 자 : 아이서비스(주) (대표: 김세민)

검토사항

❍ 준공기한 연기요청[(시설관리공단 공사감독3처-7493(‘15.8.12))

- 상징관문, 장비보관 및 운영자 대기실, 체험시설 주변 휀스설치 등 발주처 추가 공사로 준공기한 연기

❍ 준공기한 연기(60일)

- 당초 : 2015. 04. 20 ~ 2015. 08. 17

- 변경 : 2015. 04. 20 ~ 2015. 10. 16

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토결과

❍ 우리사업소에서 추가공사 요청(시설과-5335(2015.7.27.))한 사항에 대한 공기연장 건으로, 상기와 같이 공사기간을 연기하여 공사추진에 철저를 기하고자 함

붙임 : 준공기한 연기요청 공문 1부.  끝.