2-8		중앙정류소 상부공간 태양광 설치

□ 추진부서 : 도시교통본부 교통운영과

※ ’18년 하반기부터 버스정책과로 업무이관 예정

□ 사업개요

○ 사업위치 : 서울시 일대 중앙정류소

□ 설치목표

○ 당    초 : 승차대 35개소 28kW

○ 변    경 : 승차대 9개소 17kW

○ 변경사유 : 당초 설치비용을 태양광 설비 평균 설치비(2,800천원/kW)로 산정하였으나 중앙정류소의 경우 비용이 6,357천원/kW으로 증가 예상

□ ’18년 예산확보 현황

○ 시비 : 84백만원

□ 추진일정

○ ’18. 1.~ 6.	: 설치방식 및 사업위치 선정 검토

○ ’18. 8.	: 사업 시행

○ ’18. 9.~10.	: 모니터링 실시

작성자	교통운영과장: 강진동 ☎ 2133-2450 BRT팀장:전태호 ☎2471 담당:김재정 ☎2474

□ 추진실적 (‘18.6.20.기준)

○ ’18. 1.~4.	: 승차대 구조에 적합한 설치 방식 결정

○ ’18. 5.	: 설치 위치 선정(’18.8.동작대로 중앙버스전용차로 개통 시 병행)

○ ’18. 6.	: 운영 및 유지관리방안 검토

□ 문제점 및 현안사항

○ 중앙정류소 승차대는 서울시 전역에 산재되어 소규모로 운영되고 있어  보편적인 태양광 설비 설치 시보다 투자 대비 효과 미흡

구 분	태양광 발전설비 평균	중앙정류소 승차대
설치비용 단가	2.7백만원/kW	6.4백만원/kW

※ 2.7백만원/kW(’19년 태양광 단가)

□ 투자계획

○ 투자 대비 효과를 감안할 때 비용회수기간이 42년이 소요되는 것으로 예상되는 만큼 금년에 설치할 태양광 설비의 효율성을 모니터링 후 추가 설치여부 판단 필요