- 문화적 기회불균형을 바로잡기 위한 -

지역밀착형「아동·청소년 예술교육센터」조성계획

문 화 본 부

(문화시설과)

지역밀착형「아동·청소년 예술교육센터」조성계획

상대적으로 예술교육 인프라가 부족한 비강남권 지역을 대상으로 지역밀착형「아동·청소년 예술교육센터」를 조성함으로써 강남북간 문화적 기회불평등 해소

1		추 진 개 요

□ 사업 필요성

○ 아동·청소년의 예술적 놀 권리를 실현시킬 전용공간 부족

- 동북권 주민을 대상으로 실시한 설문조사(’16년, 서울시)에 의하면 예술교육을 받지 못하는 가장 큰 이유는 예술교육 시설 부재

‣ 시설이 별로 없어서(62%) > 제공프로그램 부족(16.8%) > 교통 및 접근성 불편(9.5%) 순

○ 공공 예술교육시설 건립 및 프로그램 확충을 통한 예술교육 향유기회 확대 필요

- 시민이 문화예술교육과 관련하여 가장 선호하는 방식은 ‘공공기관 부설기관 프로그램’ 수강 (문체부, 2016 문화향수 실태조사)

‣ 공공기관 부설기관(39.4%) > 사설학원 강습소(12.6%) > 사설단체 부설 문화센터(11.4%) 순

		<표 설명> : 문화예술교육 수요는 ‘공공기관 부설기관 프로그램’을 통한 실현기대가 가장 높음 → 공공의 적극적인 역할 필요 <자료출처> : 문체부 『2016 문화향수 실태조사』

□ 추진근거

○ 권역별 지역예술교육센터 10개소 건립(시장방침 제103호, ‘14.4.)

- 아동·청소년들에게 양질의 예술교육을 지원하고 문화적 기회 불평등을 해소하기 위해 권역별로 지역예술교육센터 10개소 건립 추진

○ 서울시, 강북 우선투자 전략으로 기울어진 운동장 바로잡기 구상 발표(‘18.8.)

- 문화예술 인프라가 부족한 비강남 지역을 대상으로 중소규모의 ‘지역밀착형 예술교육센터’ 5개소 추가 건립

□ 지역밀착형「아동·청소년 예술교육센터」조성방안 마련

[ 기 존 ]	➡	[ 개 선 ]
- 5대 권역별 2개소씩 균등하게 총 10개소 조성		- 권역별 예술교육센터 건립과 병행하여 상대적으로 예술교육 인프라가 부족한 비강남 지역을 대상으로 지역밀착형 예술교육센터 추가 건립
※ 대규모 조성(5년 이상 소요), 신축(100억이상), 기부채납 위주		※ 중소규모 조성 (1~2년 소요), 자치구 소유 유휴시설 리모델링(15~20억)

추진내용		1단계 (2017-2020)	2단계 (2021-2025)	3단계 (2026-2030)	비 고
조성 목표	기존 (권역별)	3개소	4개소	3개소	비강남 지역 위주로 확산
	확산 (밀착형)	2개소	3개소	0개소
	합계	5개소	7개소	3개소

2		2019년도 사업 추진계획

□ 조성(지원) 계획

○ 지원대상 : 비강남권 지역 자치구 2개소

○ 조성규모 : 지역의 유휴시설을 활용하여 중·소규모(연면적 500~ 1,200㎡이내)로 조성

○ 조성방식 : 자치구(공간제공 및 운영), 서울시(리모델링 예산지원)

○ 조성예산 : 총 30억원(1개 자치구당 12~18억원 이내)

- 리모델링비(26억원), 장비 및 집기 구매비(4억원)(※운영비 지원없음)

○ 운영계획 : 학교중심의 예술교육에서 벗어나 지역사회 기반의 예술교육 프로그램 운영으로 평생 문화예술 학습체계 마련

- 권역별 예술교육센터와의 운영 및 프로그램 교류, 공동 홍보방안 마련

- 지역예술인, 예술단체 등 지역자원을 활용한 교육 프로그램 운영 등

★ 유사시설(예술교육센터) 리모델링 사례

서서울예술교육센터(‘16.10.)	구로청소년문화예술센터(‘18.10.)	관악어린이 창작놀이터(‘10.12.)
- 시설현황(가압장 리모델링) □위치: 양천구 남부순환로64길 2(舊김포가압장) □규모: 지상2층(연면적1,190㎡) □소요예산(단위 : 백만원) :리모델링(2,911),운영비(1,162)	- 시설현황(중학교 리모델링) □위치: 구로구 구로중앙로 48 (舊구로중 국제관) □규모: 지상4층(연면적1,967㎡) □소요예산(단위 : 백만원) :리모델링(1,500),운영비(350)	- 시설현황(주민센터 리모델링) □위치: 관악구 은청동10길 3(舊은천동 주민센터) □규모: 지상2층(연면적403㎡) □소요예산(단위 : 백만원) :리모델링(1,000),운영비(316)

□ 운영계획

○ 권역별-지역밀착형 역할분담 및 협력체계 구축을 통한 시너지 효과 제고

구분	권역별 예술교육센터	지역밀착형 예술교육센터
운영주체	서울문화재단	자치구 직접운영
기능 및 역할	▶ 전체 예술교육센터(지역밀착형, 서울창의예술교육센터, 자치구 문화시설 등) 인적/물적 네트워크 구축 및 문예프로그램 특화 및 고도화 ▶ 해당 권역의 아동·청소년 문화예술교육의 교두보 역할 수행	▶ 아동‧청소년 문화예술 동아리 지원 및 학교문화예술교육 공간 연계 ▶ 어린이집, 유치원, 학교 등 이용 활성화를 위한 홍보와 연계사업 추진 ▶ 해당 지역의 아동‧청소년 계층별, 분야별 문화예술교육 수요조사
주요시설 (공간 활용안)	▶ 블랙박스 공연장, 예술분야별 특화시설(음악미디어실 등) <블랙박스 공간 예시>	▶ 프로그램실, 다목적 개방공간(기획 및 대관, 소규모 공연 진행 등) <층별 공간배치 예시>

○ 협력체계 구조

				권역관(서울시)
권역별 네트워크
				전문가 육성 및 교육 콘텐츠 개발 및 공유·유통 기관 및 이용자의 예술교육 수요응답 상호간 공동·협력사업 발굴 행사 및 축제(페스티벌) 등 개최
우수 콘텐츠 및 예술교육강사 DB구축 및 정보공유
	강사 및 프로그램 제공	↙↗			만족도 및 수요 조사결과 공유			특화 프로그램 및 행사(축제) 지원신청			↖↘		각 문화시설 맞춤형 콘텐츠
지역생활 밀작형(자치구)										지역 문화시설(자치구)
지역 아동·청소년 예술교육 커뮤니티 기능 수행 지역 내 요구조사 및 만족도 평가 자치구 기관, 단체와의 협력 *네트워크 구축 *아동‧청소년의 집 근처 문예교육 문화시설 안내						문예교육 콘텐츠 홍보 및 수요조사				문예회관(공연장), 돌봄시설, 청소년수련시설(문화의집), 구립 도서관 등 콘텐츠 만족도 및 *공간대관 정보공유 *집근처 문화시설의 아동청소년 전문 및 특화 문예교육 배달강좌 진행(이용 편의성 향상)
						← →
							연계
						← →
						공간대관 및 수요, 만족도 조사결과 등 정보 공유

□ 지원방법 : 자치구 대상 공모를 통한 지원대상 선정

□ 지원내용

○ 보조금 : 총 30억원(1개 자치구당 12~18억원 내)

- 리모델링비(26억원), 장비 및 집기 구매비(4억원)(※운영비 지원 없음)

- 대응하는 구비 편성은 자치구 재정사정에 따라 자율편성(0~100%) 가능

구분	금액	구분
리모델링비	26억원	공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인 리모델링비 적용
장비 및 집기구매비	4억원	나라장터 홈페이지 발주된 유사용역 금액 적용
계	30억원	※ 총액 한도에서 세부내역은 변경 가능(단, 운영비 편성 불가)

○ 기타지원 : 예술교육 프로그램 공유 및 지원, 운영노하우 제공 등

- 문화예술 프로그램 및 예술가 교사(TA) 지원, 공간구성 자문

- 교육청 및 지역 커뮤니티 등과의 연계 지원

- 자립 운영이 가능하도록 운영방안 자문 및 공동홍보 방안 마련 등

참고자료 : 1,000㎡ 규모의 지역밀착형예술교육센터 조성예시

구분

지역밀착형 예술교육센터 공급면적 예시(안)

구성

수평 배치

수직배치

공급설정

구분		공급면적
전용면적	블랙박스(공연장)	250㎡
	음악실	60㎡
	미디어영상실	200㎡
	운영지원실	60㎡
	세미나실	80㎡
	소계	650㎡
공용면적		350㎡
계		1,000㎡

구분			공급면적
전용면적	운영 및 공연공간 (1층)	블랙박스	250㎡
		운영지원실	60㎡
		계	310㎡
	예술교육공간 (2충)	미디어영상실	200㎡
		음악실	60㎡
		세미나실	80㎡
		계	340㎡
	소계		650㎡
공용면적			350㎡
계			1,000㎡

공간 활용

방안

블랙박스 각종 전시, 공연, 발표공간, 영상관람, 교육프로그램과 같은 용도로 활용

<블랙박스 공간 활용 예시)

층별 배치계획은 예술교육 특성을 고려한 층별 배치 필요

<층별 공간배치 예시)

장비(예시)

블랙박스 : 음향장치, 무대조명장치 등

음악·미술실 : 스피커, 엠프, 카메라 등

미디어영상실 : 녹음, 방송장비 등

조직구성

단독 건물 운영 시 최소 운영조직의 인력을 구성하여 운영

(예 : 센터장, 운영관리, 시설관리 등 최소 5인 구성)

단, 건물 일부에 예술교육센터를 설치한 입주형 시설일 경우 운영부문 실무자 1명을 최소 필수 인원으로 배치