1.	사업명 : 강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사

(중앙부처사업명 :  해당없음)

□ 사업 개요

ㅇ 사업목적 : 상습 침수로 인한 피해발생으로 재해위험지구로 지정된 강서구청 사거리 주변에 대한 침수방지(하수암거 신설)사업을 시행하여 수해를 예방하고 쾌적한 주거환경 조성

ㅇ 사업근거 : 자연재해위험지구 지정(침수위험지구/ “가”등급, 2011년 4월 18일)

ㅇ 사업규모 : 하수암거 신설 2▣3.0m×2.5m, L=2,060m

ㅇ 사업추진주체 : 강서구청

ㅇ 사업추진방식 : 장기계속공사

ㅇ 사업기간 : 2012년 - 2017년(총 6년)

ㅇ 주관부서 : 서울시 강서구 물관리과 (02-2600-6950)

□ ’16년도 성과목표 및 성과지표

ㅇ 성과목표 : 하수암거 2▣3.0×2.5m, L=300m 신설, 공사구간 지장물 이설

ㅇ 성과지표 : 하수암거 2▣3.0×2.5m, L=300m 신설

□ ’15년도 추진실적 및 자체평가 결과

ㅇ 추진실적(성과) : 하수암거 2▣3.0×2.5m, L=342m 신설

ㅇ 자체평가 : 공사구간 열배관, 상수도관, 도시가스관, 통신선로 등 지장물의 이설 추진과 교통량이 많은 간선도로에서 개착공사 시행으로 공사 추진에 애로사항이 많은 상황에서도 정상 추진을 위해 최대한 노력

ㅇ 한계 및 미흡한 점 : 공사구간 지장물 다수 및 간선도로 상 공사로 인해 공사 추진 어려움

□ ’16년도 추진전략 및 중점 추진내용

ㅇ 추진전략 : ‘17년에 사업이 완료되어 침수지역 수해 예방 달성

ㅇ 중점 추진내용 : 2015년 6월 3단계 사업분(최종) 착공하였으며 공사구간 내 주요 지장물 협의가 완료되어 사업이 정상적으로 추진되고 있으며 사업기간(2015.6. ~ 2017.12.) 내 주요 지장물 이설 및 하수암거 신설 추진

2.	사업명 : 그린빗물인프라 시설 구축

(중앙부처사업명 :  해당없음)

□ 사업 개요

ㅇ 사업목적 : 도시내 빗물의 유출수를 침투‧증발산 유도를 통해 표면유출량과 오염부하량을 저감하여 생태기능 회복 등 도시 물순환체계 개선

ㅇ 사업근거 : 건강한 물순환 도시 조성 종합계획 (2013.10.7.)

ㅇ 사업규모 : 띠녹지, 통로화분, 빗물정원 식생수로, 침투도랑 설치 5개소

(2016년 예산 : 1,050백만원)

ㅇ 사업추진주체 : 시 산하기관 ․ 자치구

ㅇ 사업추진방식 : 예산 재배정 사업 시행

ㅇ 사업기간 : 2016. 2 ~ 2016. 12

ㅇ 주관부서 : 서울시 물순환정책과 (02-2133-3761)

□ ’16년도 성과목표 및 성과지표

ㅇ 성과목표 : 그린빗물인프라 조성

ㅇ 성과지표 : 그린빗물인프라 조성 5개소

□ ’15년도 추진실적 및 자체평가 결과

ㅇ 추진실적(성과)

- 침투형 빗물화단 300㎡, 빗물정원 1,500㎡, 통로화분 800㎡

ㅇ 자체평가 : 우수유출량 저감을 통해 비점오염량 감소, 녹색공간 확보 등 경관적 가치향상 및 물순환 구조 개선에 기여

ㅇ 한계 및 미흡한 점 : 공사에 따른 사전절차 지연(경찰청 협의 등)으로 당해 연도에 사업을 완료하지 못하고 다음해로 사고이월 발생 - 예산의 철저한 계획수립이 필요함

□ ’16년도 추진전략 및 중점 추진내용

ㅇ 추진전략 : 시 산하 사업소 및 자치구와의 긴밀한 협의 통하여 대상지를 선정 사업효과 극대화

ㅇ 중점 추진내용

- 현장조사 및 대상지선정 (’16.1~2월), 설계용역(’16.3~6), 공사시행(’16.7~11)

3.	사업명 : 신월빗물저류 배수시설 설치

(중앙부처사업명 : 환경부)

□ 사업 개요

ㅇ 사업목적 : 상습침수지역인 양천구 신월동일대 침수피해 최소화

ㅇ 사업근거 : 자연재해대책법 제12조

ㅇ 사업규모 : 빗물저류배수터널 D=10m L=3.6km, 유도터널 L=1.1km 등

ㅇ 사업추진주체 : 서울특별시

ㅇ 사업추진방식 : 직접시행

ㅇ 사업기간 : 2011년 - 2017년(총 6년)

ㅇ 주관부서 : 서울시 하천관리과 (02-2133-3870)

공사부서 : 서울시 도시기반시설본부 방재시설부 (02-3708-8773)

□ ’16년도 성과목표 및 성과지표

ㅇ 성과목표 : 배수터널 굴착 및 라이닝

ㅇ 성과지표 : 배수터널 굴착 및 라이닝 2.5km

- 배수터널 굴착  L=1.7km, 유도터널 굴착  L=0.8km

□ ’15년도 추진실적 및 자체평가 결과

ㅇ 추진실적(성과) : 수직구 6개소 및 배수터널 850m 굴착

ㅇ 자체평가 : 수직구 6개소 굴착완료로 배수터널 굴착

ㅇ 한계 및 미흡한 점 :

- 실시설계 지연 및 수직구 굴착이‘15.8월에 완료되어 배수터널공사가

‘15년 9월부터 시작하여 배수터널 굴착이 저조함

□ ’16년도 추진전략 및 중점 추진내용

ㅇ 추진전략 : 배수터널 굴착 및 라이닝

ㅇ 중점 추진내용 : 수직구 굴착이 완료되어 5개 수직구에서 동시에 배수터널 굴착작업 시행(총 4.7km중 2.5km)

-‘16. 1 ~ 12 : 배수터널 및 유도터널 굴착

ㅇ 주변 지자체와의 협력방안 : 사업완료후 자치구로 인수 인계

4.	사업명 : 양재근린공원 빗물저류조 설치

(중앙부처사업명 : 국민안전처)

□ 사업 개요

ㅇ 사업목적 : 집중호우시 서초구 양재동 양재근린공원 주변 침수피해 최소화

ㅇ 사업근거 : 자연재해대책법

ㅇ 사업규모 : 빗물저류조 12,850㎥

ㅇ 사업추진주체 : 서울특별시(공사부서 : 서초구)

ㅇ 사업추진방식 : 직접시행

ㅇ 사업기간 : 2013년 - 2016년(총 3년)

ㅇ 주관부서 : 서울시 하천관리과 (02-2133-3870)

공사부서 : 서초구 물관리과   (02-2155-7142)

□ ’16년도 성과목표 및 성과지표

ㅇ 성과목표 : 빗물저류조 설치

ㅇ 성과지표 : 빗물저류조 12,850㎥ 설치

□ ’15년도 추진실적 및 자체평가 결과

ㅇ 추진실적(성과) : 실시설계 완료 및 공사 계약

ㅇ 자체평가 : 근린공원내 빗물저류조를 설치함에 따른 유관부서 심의 등 사전절차 이행으로 실시설계가 장기소요되어 공사착공 지연

ㅇ 한계 및 미흡한 점

- 저류조 활용도를 높이기 위하여 주차장과 병행 추진하였으나 근린공원내 주차장 설치가 불가하였으며 이로 인하여 실시설계가 장기화 되었음

□ ’16년도 추진전략 및 중점 추진내용

ㅇ 추진전략 : 빗물저류조 설치

ㅇ 중점 추진내용

- ‘16. 2 ~ 12 : 빗물저류조 설치공사 추진

ㅇ 주변 지자체와의 협력방안 : 자치구에서 공사 시행

5.	사업명 : 한강로 일대 방재시설 확충공사

(중앙부처사업명 : 국민안전처)

□ 사업 개요

ㅇ 사업목적 : 용산구 한강로 일대 침수피해 최소화

ㅇ 사업근거 : 자연재해대책법 제12조

ㅇ 사업규모 : 유역분할 관거 L=1.26km, 빗물펌프장 신설 등

ㅇ 사업추진주체 : 서울특별시

ㅇ 사업추진방식 : 직접시행

ㅇ 사업기간 : 2013년 - 2017년(총 4년)

ㅇ 주관부서 : 서울시 하천관리과(02-2133-3863)

공사부서 : 용산구 치수과(02-2199-7914)

□ ’16년도 성과목표 및 성과지표

ㅇ 성과목표 : 빗물펌프장 토공사

ㅇ 성과지표 : 빗물펌프장 토공사 완료

□ ’15년도 추진실적 및 자체평가 결과

ㅇ 추진실적(성과) : 빗물펌프장 토출관로(109m) 부설 완료

ㅇ 자체평가 : 펌프장 설치 반대 민원 등으로 사업이 중지되었으나 민원을 해소하여‘15년 8월부터 공사 재개

ㅇ 한계 및 미흡한 점 : 민원해소에 공사착공 지연

□ ’16년도 추진전략 및 중점 추진내용

ㅇ 추진전략 : 빗물펌프장 신설

ㅇ 중점 추진내용

- ‘16. 1 ~ 7 : 빗물펌프장 터파기 등 기초공사 완료

- ‘16. 8 ~ ’17. 7 : 빗물펌프장 구조물 및 펌프 설치 완료

ㅇ 주변 지자체와의 협력방안 : 자치구에서 공사 추진

6.	사업명 : 강동 친환경 도시텃밭 운영

(환경부 : 한강유역환경청)

□ 사업 개요

ㅇ 사업목적 : 화학비료와 합성농약을 사용하지 않는 친환경농법으로 수질개선 기여 및 수질보호의 중요성 공감대 형성

ㅇ 사업근거 : 한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 제22조

-『강동구 친환경 도시농업 활성화 및 지원에 관한 조례』제정 (2010.11.10.)

- 2020친환경 도시농업 운영 종합계획 구청장방침 제5호(2011.1.7.)

- 2014 친환경 도시텃밭 운영계획(구청장 방침 제107호, 2014.2.17.)

ㅇ 사업규모 : 2,100구좌 (1구획 규모 : 일반텃밭 12㎡ / 작은텃밭 7㎡)

ㅇ 사업추진주체 : 강동구청 도시농엄과

ㅇ 사업추진방식 : 예산편성 ⇒ 사업 홍보 ⇒ 참여자 모집 ⇒ 농장운영

ㅇ 사업기간 : 00년부터 ~현재

ㅇ 주관부서 : 강동구청 도시농엄과 (02-3425-6552)

□ ’16년도 성과목표 및 성과지표

ㅇ 성과목표 : 2,100구좌 (1구획 규모 : 일반텃밭 12㎡ / 작은텃밭 7㎡) 운영

ㅇ 성과지표 : 청정산업 선정평가지표에 의거 평가

- 청정산업으로서의 우수성, 사업계획의 합리성, 사업집행 적정성 등

□ ’15년도 추진실적 및 자체평가 결과

ㅇ 추진실적(성과) :  2,100구좌 운영

ㅇ 자체평가 : 우수

ㅇ 한계 및 미흡한 점 : ‘13년 환노위 결산 지적사항관련 대체사업계획 필요

□ ’16년도 추진전략 및 중점 추진내용

ㅇ 추진전략 : 친환경 공공도시텃밭과 텃논 조성, 생태․자원순환․소통의 기회마련

ㅇ 중점 추진내용

ㅇ 친환경농업 실천을 범시민운동으로 전개하여 상수원 수질보전 중요성 홍보,  상수원 수질보호

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		143
사업홍보	2016. 1 ~ 2
참여자 모집	2016. 2 ~ 3
농장운영	2016. 4 ~ 12	143	농지임차료, 종자구입비, 소농기구 및 유기질 비료 등

7.	사업명 : 함께서울 친환경농장 가꾸기

(환경부 : 한강유역환경청)

□ 사업 개요

ㅇ 사업목적 : 화학비료와 합성농약을 사용하지 않는 친환경농법으로 수질개선 기여 및 수질보호의 중요성 공감대 형성

ㅇ 사업근거 : 한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 제22조

- 친환경농장 사업 계획 수립 : 시장방침(제1077호 : 1999.11.16.)

- 한강수계기금 사업 반영 : 2000. 7. 14

ㅇ 사업규모 : 6,300구획(103,950㎡)

ㅇ 사업추진주체 : 서울특별시 도시농엄과

ㅇ 사업추진방식 : 예산편성 ⇒ 사업 홍보 ⇒ 참여자 모집 ⇒ 농장운영

ㅇ 사업기간 : 00년부터 ~현재

ㅇ 주관부서 : 서울특별시 도시농엄과 (02-2133-5398)

□ ’16년도 성과목표 및 성과지표

ㅇ 성과목표 : 분양구획 6,300구획(103,950㎡) 운영

ㅇ 성과지표 : 청정산업 선정평가지표에 의거 평가

- 청정산업으로서의 우수성, 사업계획의 합리성, 사업집행 적정성 등

□ ’15년도 추진실적 및 자체평가 결과

ㅇ 추진실적(성과) :  6,300구획(103,950㎡) 운영

ㅇ 자체평가 : 우수

ㅇ 한계 및 미흡한 점 : ‘13년 환노위 결산 지적사항관련 대체사업계획 필요

□ ’16년도 추진전략 및 중점 추진내용

ㅇ 추진전략 : 친환경 공공도시텃밭과 텃논 조성, 생태․자원순환․소통의 기회마련

ㅇ 중점 추진내용

- 친환경농업 실천을 범시민운동으로 전개하여 상수원 수질보전 중요성 홍보,  상수원 수질보호

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		565
사업홍보	2016. 1 ~ 2
참여자 모집	2016. 2 ~ 3
농장운영	2016. 4 ~ 12	565	농지임차료, 종자구입비, 소농기구 및 유기질 비료 등