지장물 이설요청 현황

(세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사)

2016. 05.

서울시 도시기반시설본부

■ 사 업 개 요

구 분	내 용	비고
사 업 명	세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사
위 치	서울특별시 종로구 청계천로 159일대 (종로~세운초록띠공원~세운상가~청계,대림상가)
사업규모	43,575㎡ (약13,204평), 공원 3,748㎡, 데크보강 및 신설
지역지구	일반상업지역
사업기간	2016.03.24 ~ 2017.06.24
사업개요	▶세운초록띠공원 대지면적: 3,748.3㎡, 건축면적: 555.3㎡ 용도: 제2종 근린생활시설, 관광휴게시설 / 구조: 철근콘크리트조 ▶세운상가 연면적: 1,390㎡ (프로그램셀-11개, 그린셀-2개, 데크-804.8㎡) 용도: 데크(도로시설물), 프로그램셀 구조: 철근콘크리트조 +경량철골조 ▶청계천 연결브릿지 연면적: 77.9㎡ 용도: 연결통로, 전망대 / 구조: 강박스거더교 ▶청계, 대림상가 연면적: 2,351.8㎡ (프로그램셀-20개, 그린셀-4개, 데크-1,392.6㎡) 용도: 데크(도로시설물), 프로그램셀 구조: 철근콘크리트조 +경량철골조 ▶을지로 지하상가 연결통로 연면적: 614.1㎡ 용도: 지하상가 연결통로, 광장 / 구조: 철근콘크리트조

■ 위 치 도

세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사

초록띠공원

세운상가

청계천 연결브릿지

청계,대림상가

■ 지장물이설 현황

- 한전 : 가공배전로 이설

행정구역	지장물 이설요청 사유	지장물종류	지장물 규격	이설 수량	비고
종로구 장사동 112-15도 외	-3층회랑 철골공사 와 지장 -가설건축물 철거 공사와 지장	가공배전로	고압 22,900V	L=17m x 3Line 지중배전로 변경요청
종로구 장사동 112-15도 외	-3층회랑 철골공사 와 지장 -가설건축물 철거 공사와 지장	가공배전로	고압 22,900V	L=17m x 3Line 방호관 설치 요청
중구 산림동 264-25도 외	-가설건축물 철거 공사와 지장	가공인입선	저압인입	L=7m 인입선 철거 요청

- 한전 : 지중배전로 이설

행정구역	지장물 이설요청 사유	지장물종류	지장물 규격	이설 수량	비고
종로구 장사동 112-15도 외	-신설 ESC'L에 지장 -MicroPile시공에 지장	지중배전로	∮175	L=34.24m 이설요청
중구 을지로4가 4-16도 외	-신설 계단시공에 지장	지중배전로	∮175	L=43.1m 이설요청, 맨홀이전
중구 을지로4가 4-8도 외	-을지로 지하상가 연결통로에 지장	지중배전로	∮175	L=137m 이설요청

■ 지장물이설 현황

-  (주)예스코 : 가스관이설

행정구역	지장물 이설요청 사유	지장물종류	지장물 규격	이설 수량	비고
종로구 종로3가 45-4도 외	-화강석 포장, 마이크로파일, 기둥,보 보강공사 에 지장	가스 중압관	∮500 ~150	L=160.6m
중구 을지로4가 4-8도 외	-상부보 보강, 을지로연결통로 공사에 지장	가스 저압관	∮150	L=151.6m

■ 지장물이설 현황

-  LG 유플러스 :  통신관로 이설

행정구역	지장물 이설요청 사유	지장물종류	지장물 규격	이설 수량	비고
중구 을지로 4-23도 외	-을지로지하상가 연결통로에 지장	LG U+ 통신관로		L=66m

■ 지장물이설 현황

-  K T  : 통신관로 이설

행정구역	지장물 이설요청 사유	지장물종류	지장물 규격	이설 수량	비고
종로구 장사동 116-72도 외	-청계천 연결교량 에 지장	KT 통신관로		L=83m
중구 을지로 200-7도 외	-청계천 연결교량 에 지장	KT 통신관로		L=60m
중구 을지로 4-23도 외	-을지로지하상가 연결통로에 지장	KT 통신관로		L=103m
종로구 장사동 38-1공 외	-ESC기초에 지장	KT 통신관로		L=54m
중구 을지로 156-11도 외	-계단기초에 지장	KT 통신관로		L=27m
중구 을지로 142-1 외	-ESC기초에 지장	KT 통신관로		L=30m

■ 지장물이설 현황

-(주)이화텔레콤: SKT / SKB 통신관로 이설

행정구역	지장물 이설요청 사유	지장물종류	지장물 규격	이설 수량	비고
중구 을지로 4-23도 외	-을지로지하상가 연결통로에 지장	SKT 통신관로		L=48m
중구 을지로 4-23도 외	-을지로지하상가 연결통로에 지장	SKB 통신관로		L=48m