설계변경 자문회의 지적사항 조치결과(제11차)

□ 공사명 : 월드컵대교 건설공사                        부서 : 토목부

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	수방대비 계류시설 반영	□유지관리, 사용부서 요구	315,200,000	-112,200	315,087,800
2	항로표지(등부표) 설치	□유지관리, 사용부서 요구	490,000,000	-	490,000,000
3	전구간 육상 구조물 확인보링 변경 시행	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	254,180,000	-	254,180,000
4	D구간 지하 미확인 지장물 관련 변경	④현장여건 상이	64,900,000	-176,579	64,723,421
5	북단 상수도 이설공사 등 변경	□유지관리, 사용부서 요구, ④현장여건 상이	189,860,000	-6,308,490	183,551,510
6	북단IC 난지물재생센터 주변 EGI휀스 설치	□유지관리, 사용부서 요구	48,100,000	-6,119,729	41,980,271
7	북단IC C.D램프 재설계에 대한 공사 반영	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	-267,490,000	-13,251,680	-280,741,680
계			1,094,750,000	-25,968,678	1,068,781,322

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증․감액임

※ 설계변경 유형

① 정책, 계획 등 사업계획 변경  ② 민원해결, 보수,보강 ③ 문화재 및 지장물 이설

④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구 ⑥ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑦ 공법변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 유관기관 사전협의 미흡

자문건명	지적사항	조치결과	요구 증감액(원)	절감액	증감사유		비고
					주요공종	사 유
1.수방대비 계류시설 반영	유속에 의하여 바지선이 밀리지 않도록 정박 방법 등을 다시한번 재검토해보고, 바지선 적재용량을 검토하여 적정대수를 사용할 수 있도록 할 것	KR승인자료 첨부 (구조계산서, 선박결속계획도 등)	315,200,000	(감)112,200	부대공	조달단가적용	첨부#1
	대비견적이 오류가 있는 것으로 판단되니 보완할 것(p69)	확인(일치)					첨부#2
2.항로표지(등부표) 설치	물가자료 표시오류가 있으니 확인 후 수정할 것(p167)	Page 보완	490,000,000	-	부대공	-	첨부#3
3.전구간 육상 구조물 확인보링 변경 시행	설계당시 구조물과 근접된 보오링에 대해서는 설계사와 협의하여 과다 보링이 되지 않도록 적정성 여부를 재검토하여 반영할 것	육상구간 구조물위치의 지반확인결과 연암상단의 차이가 12m 발생하여, 타 주요구조물의 위치에 추가 확인보링이 필요할 것으로 판단되어 실정보고함.	254,180,000	-	토공	-	첨부#4
	당초 실시설계시 시방서대로 육상구간 구조물 위치에 지질조사를 시행하지 않은 이유를 보완할 것	설계사의견 첨부					첨부#5
	기타, 시추공 되메우기는 지하수 오염이 발생되지 않도록 폐공처리기준을 준수하여 처리할 것	준수하여 처리하겠음					-
4.D구간 지하 미확인 지장물 관련 변경	SBH 가설흙막이공사는 1식으로 견적처리 되어 수량․단가 등 검토가 불가하니 세부내역 근거를 보완하고, 비교검토하여 반영할 것(p317)	세부내역(상세산근) 첨부	64,900,000	-	토공	-	첨부#6
	터파기 4m이상 단가에는 들어내기 품이 포함되어 있는 것으로 판단되니, 지하굴착 10%(할증)에 대한 적용여부를 재검토해 볼 것(p296)	조정하여 감액처리		(감)176,579		터파기 추가할증삭제	첨부#7
	기타, 현장여건상 한강하류로서 지상구간에도 노출되지 않은 지하매설물이 있을 수 있으므로, 주의 깊게 시공할 것	주의하여 안전시공 하겠음		-		-	-
5.북단 상수도 이설공사 등 변경	단가비교표상 자재단가는 예산절감 및 경제적인 측면에서 조달청단가를 추가 비교 검토하여 반영할 것(p491~p494) → 압륜, PE관, 조립식암거블럭 등 다수	조정하여 감액처리	189,860,000	(감)1,993,197	상수도공	조달청단가 추가적용	첨부#8
	부단수천공 견적은 상수도사업본부(수도사업소) 시행사례 등을 참고하여 세부내역서를 제출받아 비교검토후 반영 할 것(p497)	상수도사업본부 부단수천공 설계단가 적용		(감)4,315,293		상수도사업본부 설계단가와 견적단가 중 낮은금액 적용	첨부#9
	장비효율을 변경(0.7㎥→0.2㎥)한 구간은 협소구간 확인이 가능한 객관적인 근거자료를 보완할 것	0.7㎥장비 폭이 2.5m로 작업공간(폭 2m) 장비반입불가		-		-	첨부#10
6.북단IC 난지물재생센터 주변 EGI휀스 설치	EGI휀스설치후 강풍에 넘어지지 않도록 보강재 추가설치 등 검토하여 안전하게 시공할 것	검토 후 안전시공 시공하겠음	48,100,000	(감)6,119,729	부대공
7.북단IC C.D램프 재설계에 대한 공사 반영	물푸기, 강관비계, 강관비계다리 수량산출근거를 확인 할 수 없으니 보완할 것(p1236)	Page1391, Page1396 확인	감 267,490,000	-	구조물공	-	첨부#11
	비계 및 비계다리 수량이 도면높이와 상이하니 확인 후 보완할 것(p1396)	보완후 감액		(감)12,989,030		수량오류분 정정	첨부#12
	내역서(p1238), 잔토처리(p1391), 잔토처리 70%(p1398) 내용이 상이하니 재검토하여 조정할 것	조정후 감액		(감)262,650		수량오류분 정정
	기타, 기존 분류하수관 구조물에 피해가지 않는 구조적 안전공법을 적용하여 안전시공이 되도록할 것	안전시공 하겠음		-		-	-

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과