서울특별시 지적재조사사업(‘12 ~ ‘13년) 추진 현황

<서울시 토지관리과/‘14.7.31>

□‘12년 지적재조사 사업 추진 현황

시․도	시군구	사업지구명	구분	‘14년 3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	비고
서울	성북구	종암지구	계획	경계결정위원회 (이의신청) 상정	이의신청 기간 (4.10~6.10)	경계결정위원회 2차 개최	이의신청기간 및 경계결정 통보	이의신청 불복 여부 기간 (14.6.18.~8.17)	지적재조사위원회 개회 (조정금 산정)	완료공고 및 지적공부정리	정상추진
			실적	경계결정위원회 개최 (3.27 개최)	이의신청 처리	이의신청 처리	경계결정위원회개회 (14.6.10.)	조정금대상자 주민설명회개최 통지(14.7.30)
	은평구	산새마을 지구	계획	-	경계결정위원회 [경계결정]	이의신청기간	이의신청기간	경계결정위원회 [경계확정] 지적재조사위원회 [조정금산정]	완료공고 및 공부정리	-	정상추진
			실적	경계결정위원회 상정	`14.04.10 경계결정위원회 개최	이의신청 (5.14~7.12)	이의신청 (5.14~7.12)	경계확정 및 조정금산정 완료공고 및 공부정리
	동작구	상도1지구	계획	-	임시경계점 소유자 입회 계속	임시경계점 소유자 입회 계속	임시 및 조정경계점 소유자입회	지적확정조서작성 경계결정위원회개최 이의신청 접수	이의신청 접수	경계결정위원회개최 경계확정 및 사업완료공고	정상추진
			실적	임시경계점 소유자 입회 (223필 91.4%)	임시경계점 소유자 입회 (225필 92.2%)	임시경계점 소유자 입회 (228필 93.4%)	임시경계점 소유자 입회 (228필 93.4%)	임시경계점 소유자 입회 (229필 93.9%)

□‘13년 지적재조사 사업 추진 현황

시․도	시군구	사업지구명	구분	‘14년 5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
서울	성동구	성수1지구	계획	-	동의서 징구	동의서 징구	동의서 징구 사업지구지정	[경계조정] 재조사측량	경계조정] 재조사측량	[경계결정 위원회 [경계결정]	[이의신청]
			실적	동의서 징구	동의서 징구	동의서 징구
	은평구	산새마을 Ⅱ지구	계획	-	동의서 징구	동의서 징구 사업지구지정	[경계설정] 재조사측량	[경계조정] 재조사측량	경계결정 위원회 [경계결정]	[이의신청]	[이의신청]
			실적	동의서 징구	동의서 징구	동의서 징구