행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사

“지하철 목욕하는 날”추진계획(안)

2019. 2.

보건환경처

“지하철 목욕하는 날”추진계획(안)

◦ 최근 미세먼지로 인한 사회적 관심이 높아지고 있어 쾌적한 지하철 환경조성을 위해 수십년 누적된 역사 및 터널 내부 먼지 제거로 획기적인 지하 공기질 개선 효과를 도모하고

◦ 시설물 고장예방으로 안전운전 강화와 각종 설비수명을 연장하고자 6호선 역사, 터널 청소방법 등을 검토하여 정비점검 및 대청소를 실시코자 함

Ⅰ		관련근거

□ 지하철 미세먼지 관리대책 추진계획(서울시 도시철도과-1306호, 2019. 2. 11)

Ⅱ		청소개요

□ 대상 : 6호선 전 구간 ☞ 시범 실시 후 전 노선 확대 실시

대 상	역 사	역사노반(38개역)			터널(52.6Km)		환기구	전차선 (애 자) 청 소	전동차
	승강장 대합실 계 단	섬식 벽체	승강장노반 배 수 로	PSD	상 선	하 선
물 량	38역	31,020㎡ (30개소)	50,225㎡ (71개소)	2,272개	23.4km	29.2km	271개소	72.5km (16,926개)	29개편성

※ 세부내역 붙임 #1 참조

□ 시 기 : ’19. 3. 31(일요일 01시~월요일 03시, 총 26시간)

※ 6호선 수송인원(일요일) 354,796명, 수송수입 감소분, △209,047천원

Ⅲ		추진방안

□ 추진방향

○ 1일 운행정지로 충분한 정비점검 및 청소시간 확보

○ 6호선 시범실시 후 2개월 간 안전‧공기질 영향평가 → 전 노선 확대

○ 자치구, 코레일, 소방 등 유관기관 연계 추진

○ 철저한 사전 홍보로 시민 불편 최소화(별도 교통대책 수립)

□ 청소방안

○ 역사 노반 및 터널관리

- 승강장 하부 및 벽체 인력 물청소 시행

․ 청소대상 : 승강장 노반 및 벽체, 승강장 안전문, 터널 배수로

․ 참 여 자 : 공사 직원, 청소 전문업체, 소방본부, 시 직원 등

▸ 공사직원 ⇒ 노반 및 승강장 하부 벽체, 승강장 안전문 선로측 먼지제거 및 터널 청소

▸ 청소 자회사 ⇒ 역사 승강장, 승강장 안전문 청소 등

- 터널 청소차량 활용 대청소 실시

구분	물탱크트로리(3대)	고압 살수차(4대)	대형 물탱크차(2대)
사진
작업범위	도상물청소	레일, 도상, 벽체, 천장, 전차선 세척 및 분진 제거	터널 도상 세척
작업속도	2~10km/h	5~10km/h(2.7톤)	5~10km/h(50톤)

- 연결송수관 활용 터널 청소

․ 기존 물탱크 모터카 방식을 터널 내부의 연결 송수관을 활용한 물청소 실시

․ 연결송수관 고압세척방식을 사용하여 배수로 슬러지 및 미세먼지 제거

- 청소방법

시 간	청 소 방 법
24:00 ~ 24:30	· 영업운전 종료 및 단전
24:30 ~ 01:00	· 청소차량 및 장비 이동
01:00 ~ 03:00	· 물청소 시행을 위한 방호 조치(위험요소 저감)
03:00 ~ 08:30	· 청소차량을 이용한 터널 및 벽체 청소 시행
08:30 ~ 09:00	· 장비 이동(기지 또는 유치선)
09:00 ~18:00	· 기술분야(전차선 청소 등) 및 인력 물청소(서울시, 소방서, 자회사 등)
18:00 ~ 19:00	· 정리 및 철수
19:00 ~ 03:00	· 터널 안전점검 및 열차 안전운행 이상유무 확인

※ 청소방법은 분야별 일정 및 중첩부분을 고려하여 조정 가능함(기술계회처 총괄).

○ 역사청소

- 6호선 전 역사 대합실 및 승강장, 계단 물청소 실시

- 계단 → 대합실 → 승강장 순으로 실시(역 사정에 따라 조정)

- 청소장비 조정 배치(물청소 미시행 호선 장비 이용)

○ 전동차청소

구 분	청소방법	청소시간 (편 성 당)	대상편성	비 고
차체 외벽	자동 차체세척기	0.5H (입환시간 포함)	29개 편성	-
대차하부	넝마 등을 이용한 대차 각종 외함 닦기	0.5H (편성당, 입환시간 포함)	29개 편성	10인 1조

- 차체세척기 이전 설치공사 여건에 따라 야외 청소선에서 인력에 의한 청소도 고려

- 청소인력(대차하부 청소) : 전동차 객실청소와 병행실시

- 전동차 청소범위

구 분	장 소	청소범위	비 고
전동차 객실 청소	운전실	- 전면, 측면 유리창 내․외부 닦기 - 의자 및 배전반 등 각종 기기 닦기	편성당 예상시간 1.5H
	객실 내부	- 유리창 및 창틀 닦기 - 내벽(각종 설비) 오염부분 닦기 - 객실 바닥 물걸레에 의한 물청소 - 선반틀, 선반망 먼지 닦기 - 실내 각종 분전함, 환풍기, 송풍기 그릴 닦기
	기타	- 출입문 및 통로문 창틀 닦기 - 기타 불결한 곳 청소 등

□ 소요인력 : 2,548명(역 안내요원 제외)

총인력	승강장 노반 및 터널	역 사	전동차
2,548(명)	2,093	332	123

※ 세부내역 붙임 #2 참조

□ 소요예산 : 760백만원

총예산	승강장 노반 및 터널	역 사	전동차	기타운영비
760(백만원)	593	121	6	40

※ 공사 자체예산 사용 후 ‘19년 추경에 서울시 출자금으로 보전

※ 세부내역 붙임 #3 참조

□ 예산과목 : 영업비용/매출원가/외탁비‧행사비‧소모품비

구 분	사업명	예산과목		예 산 액 (백만원)	담당부서
계				760
총 괄 반	소 계			62	보건환경처
	효과분석		(매)위탁비	20
	행사운영비		(매)행사비	42
역사청소반	소 계			121	역사지원처
	역사청소	(매)위탁비		49
	현수막, 포스터 등	(매)행사비		72
승강장 노반 및 터널 청소반	소 계			567	기술계획처
	승강장 하부	(매)위탁비		57
	전차선 애자			134
	환기구 청소			340
	청소용품	(매)소모품		22
	선로사용료	(매)수수료/기타		14
전동차청소반	소 계			10	차량운영처
	청소용품	(매)소모품		10

※ 기술분야 청소용품, 안전소모품 등 소모품 추가 구매시 예산범위 내에서 변동 가능.

Ⅳ		추진조직구성

□ 추진방법 : “지하철 목욕하는 날” 추진을 위한 임시조직 구성

○ 명    칭 : 지하철 목욕하는 날 추진단

○ 구성기간 : ’19. 2. ~ 별도 명령시까지

○ 조직구성

			“지하철 목욕하는 날” 추진단 (추진단장: 안전관리본부장)
총 괄 반 (보건환경처)			역사청소반 (역사지원처)				노반 및 터널 청소반 (기술계획처)			전동차청소반 (차량운영처)				안전지원반 (안전계획처)
홍 보 실 제2종합관제센터			역사지원처 영업계획처 부대사업처 복합개발처 서비스안전센터				전기처, 정보통신처, 궤도처, 신호처 기계처, 전자처, 토목처, 건축처 장비관리단 승강장안전문관리단			차량계획처 차량정비처 승무시스템처				안전지도처 안전조사처

※ 전담 직원 1명, 나머지 인원 겸무 및 겸직(분야별 2명)

□ 주요임무

○ 총  괄  반

- 준비총괄 및 상황반(현장대책반 포함) 운영

- 언론홍보 및 언론 상황실 운영

- “지하철 목욕하는 날” 청소 효과 분석

- 열차 및 청소차량 운행 통제

○ 역사청소반

- 역사 승강장, 대합실, 계단 청소

- 대체 교통수단 운영

- 목욕하는 날 홍보물 배부 및 플랜카드 부착

- 역사 및 환승통로 고객 안내

- 역사내 상가 및 물품보관함 청소

- 역사내 안내표지판 및 광고 부착물 점검 청소

○  노반 및 터널청소반

- 승강장 안전문 청소

- 애자, 환기구, 노반 및 승강장 하부 벽체, 승강장 안전문 선로측 청소

- 특수청소차량을 활용한 터널 벽체 및 노반 청소

- 분야별 터널 특별안전점검 시행

○ 전동차청소반

- 차체 외벽, 대차하부, 객실청소(운전실, 객실내부, 출입문 등)

- 전동차 기지 유치 및 열차 운행계획 조정

- 전동차 특별안전점검 시행

○ 안전지원반

- 터널청소 안전지도 총괄

- 장애 및 장애율 분석

- 본사 상황실 운영

□ 추진단 공정관리

○ 주간 업무회의

- 일  시 : 매주 금요일 14시

- 장  소 : 안전관리본부장실

- 참석자 : 분야별 반장

- 내  용 : 금주 및 차주 추진 사항 및 점검

○ 임시회의

- 분야별 반장 주관 하에 주 1회 실시

- 분야별 추진사항 및 진도 Check

○ 기타사항

- ‘19.2월 말 : 분야별 추진사항 및 임원 보고

- 분야별 세부 추진사항 수립 : ‘19.2.21까지

□ 향후계획

○ ’19. 1. : 지하철 미세먼지 관리대책 추진계획 수립(서울시장 방침)

○ ’19. 2. : “지하철 목욕하는 날” 세부 추진계획 수립

○ ’19. 3. : 대시민 발표 및 홍보

○ ’19. 3. 31 : 6호선 대청소 시행

Ⅴ		분야별협조사항

구 분	협 조 부 서	추 진 내 용
총 괄	보건환경처	○ “지하철 목욕하는 날” 운영 세부계획 수립 ○ 청소 전후 대비 공기질 측정 분석
	홍 보 실	○ “지하철 목욕하는 날” 운영 홍보 계획 수립
	제2종합관제	○ 열차 및 청소차량 운행 통제
안전지원반	안전계획처	○ 본사 상황실 운영
	안전지도처	○ 터널청소 안전지도 총괄(구간별 안전담당관 교육 등)
	안전조사처	○ 사고 및 장애율 분석(시설물, 차량 고장율 데이터 토대)
역사청소	역사지원처	○ 역사청소 시행계획 수립, 현장 대책본부 설치 지원
	영업계획처	○ 대체 교통수단 검토, 고객분야 인력관리 및 배치 ○ 환승역사 고객안내
	부대사업처	○ 역사 폐쇄에 따른 상가 운영방안 검토, 상가 청소 ○ 광고물 점검 및 청소
	복합개발처	○ 역사 물품보관함 운영방안 검토 및 청소 ○ 전동차 운휴에 따른 음성광고 운영방안 검토
노반 및 터널청소	기술계획처	○ 터널 시설물 안전점검 총괄 ○ 기술분야 인력관리 및 배치(청소 및 안전담당관 등 지정) ○ 시설물 고장율 데이터 통계분석
	궤 도 처	○ 노반 및 터널 청소(총괄) 시행계획 수립
	전 기 처	○ 전차선(애자)청소 시행
	기 계 처	○ 역사 및 터널 환기구 청소
	토 목 처	○ 승강장 하부 청소
	건 축 처	○ 역사내 안내표지판 청소
	장비관리단	○ 특수청소차량 운행 및 청소, 장비 구간 인증(코레일 협의) 등
	승강장안전문관리단	○ 승강장 안전문 청소
전동차 청소	차량계획처	○ 차량분야 인력관리 및 배치
	차량운영처	○ 전동차 외관 및 내부 청소 ○ 전동차 주요 설비(각 종 주요장치 등) 점검 ○ 전동차 고장율 데이터 통계분석
	승무시스템처	○ 열차 운행계획 조정
공 통		○ 시설물․전동차 안전점검 사항 및 추진단 인력구성 협조

따로붙임 : 1. 청소물량대상 세부내역 1부.

2. 소요인력 세부내역 1부.

3. 소요예산 세부내역 1부.  끝.

붙임 1		청소대상 세부내역

구분	청소개소	청소물량	비 고
역사	·계단, 대합실, 승강장(환기구)	38역(271개소)	3,690㎡
역사 노반	· 승강장 노반 및 배수로(165m)	71개소, 71개소	33역×2개소 + 5개소
	· 승강장 섬식(벽체)	30개	섬식 15역×2개소
	· PSD 터널측 창호 · PSD 직하부, 더미부, 고무발판	2,272개(38역) 71개소(160m)	33역×64 + 5역×32
터널	· 벽체, 노반, 천정	52.6Km	23.4Km + 29.2Km
	· 횡갱 및 배수 펌프실	17개, 47개	-
	· 터널 기능실, 계단 등	120개소	-
	· 분기시설물 일체	43틀	-
	· 6호선 전차선(애자)	72.5km (16,926개)	-
	· 역사 및 본선 환기구	271개소	3,690㎡
전동차	· 차체외벽	29개 편성	-
	· 대차하부	29개 편성	-
	· 전동차 객실	29개 편성	-

붙임 2		소요인력 산출내역

□ 총소요인력

구 분	총인력	승강장 노반 및 터널	역 사	전동차
인력(명)	2,548	2,093	332	123

○ 노반 및 터널 청소 인력

구 분	합 계	역 사 (38)	터 널 (40구간)
계	2,093	-	-
터널 측 인력청소 인원	548명	6명×38역=228명	8명×40구간=320명
안전관리(공사직원)	194명 (역장38명포함)	· 2명 × 38역 = 76명 · 역장지원 필요(38명)	2명 × 40구간 = 80명
청소장비 운행인력	25명	· 25명(23명 × 1개 파트 + 지원 2명)
점검정비 인력	516명	· 516명(172명 × 3개 파트)
승강장 하부 청소용역 전차선 애자청소	410명	· 38역 × 6명 =228명 · 72.5km/4km = 18.2×10명 = 182명
환기구청소	400명	· 271개소×1.47명 ≒ 400명

○ 역사청소 인력

구분	계	현 청소인력	인원조정 (주→야)	특수청소반	기타 지원
청소인력(명)	332	102	107	16	107

○ 전동차청소 인력

구 분	계	본사	군자	창동	수서	지축	고덕	도봉	방화	천왕	신내	모란
청소인원(명)	123	20	24	10	7	12	17	12	5	3	3	10

붙임 3		소요예산 세부내역

□ 총소요예산

구분	대 상	소요예산(원)	비 고
계		759,529,970
역사	계	120,665,618
	역사청소	48,665,618
	홍 보 비	72,000,000	- 현수막 51,975천원 - 포스터 12,269천원 - 차단봉 6,840천원 - 안전띠 912천원
노반 및 터널청소	계	567,537,872
	승강장하부 청소	56,747,942
	전차선(애자) 청소	133,413,500
	환기구 청소	340,000,000
	소 모 품	22,376,430
전동차	계	9,326,250
	소 모 품	9,326,250
기타	운 영 비	62,000,000

□ 비품 수요예산

○ 노반 및 터널 청소 : 22백만원

연 번	품 명	규격(기준)	가 격	수량	합 계(원)
1	소 계	-			22,376,430
2	빗자루	개	2,310원	160	369,600
3	삽	개	1,710원	120	205,200
4	방진마스크	개	2,145원	742	1,591,590
5	작업장갑	개	1,570원	742	1,164,940
6	PP 마대	40kg(50장)	9,500원	8	76,000
7	결 속 선	#20(BOX)	16,500원	4	66,000
8	분사노즐	25mm	29,160원	45	1,312,200
9	청소호스	25mm,45m	56,580원	45	2,546,100
10	친환경다목적세정제	18.75l(개)	47,070원	40	1,882,800
11	청소용 폴대	5m내외	55,730원	40	2,229,200
12	걸 레	장(20장)	16,120원	40	644,800
13	헤라(껌제거)	개	1,140원	80	91,200
14	손 전 등	개	72,210원	100	7,221,000
15	헤드랜턴	개	29,500원	100	2,950,000
16	자 석	개	1,290원	20	25,800

○ 전동차 청소 : 10백만원

연번	품 명	규 격	단위	단가	고 덕
					수량	소요금액(원)
총 계						9,326,250
1	다목적세제	18.75ℓ	통	18,500	29	536,500
2	검정비닐봉지 50리터	58*75	장	140	58	8,120
3	의료용살균소독제	1L(손잡이용)	통	7,000	29	203,000
4	가루비누	800g	개	0,170	58	9,860
5	세탁비누	표백비누 230g*4	팩	700	58	40,600
6	고무장갑	말표(10개)	묶음	3,360	140	470,400
7	장갑	면, 400g(10개)	묶음	2,800	240	672,000
8	장갑	반코팅장갑(10개)	묶음	2,500	120	300,000
9	장갑	완전코팅장갑(10개)	묶음	2,250	120	270,000
10	보루(넝마)	면, 백색, 8-10KG	봉	6,900	10	69,000
11	마포걸레	3자(90cm), 밀마포걸레	개	1,800	145	261,000
12	마포짤순이	-	개	3,900	58	226,200
13	빗자루	대비(알루미륨자루8*80cm)	개	2,500	145	362,500
14	쓰레받이	외곽쓰레받이 / 적색	개	7,500	145	1,087,500
15	고무장화	높이 30cm 이상	켤레	6,250	50	312,500
16	운반구 물통	75L, 500*570mm, 청색	개	2,000	145	290,000
17	유리세척제	650ml	개	9,000	58	522,000
18	유리닦이	2단 대형	개	4,630	29	134,270
19	물호스 (릴, 건 일체형)	45m	개	45,900	12	550,800

□ 기타운영비 : 62백만원

○ 청소 전후 공기질 측정비용 : 20백만원

○ 기타 행사운영비 : 42백만원

“지하철 목욕하는 날” 세부 추진사업

연 번	사 업 명	주관부서	협조부서
1	지하철 목욕하는 날 홍보	홍보실
2	청소 전후 효과분석	보건환경처
3	현장 상황반 운영 및 구성	보건환경처	안전계획처
4	열차 및 청소 차량 통제	제2종합관제센터
5	본사 상황실 운영	안전계획처
6	터널 청소 안전 지도	안전지도처
7	사고 및 장애율 분석	안전조사처	기술계획처
8	역사청소 시행계획 수립	역사지원처
9	“지하철 목욕하는날” 대시민 홍보	역사지원처
10	고객분야 인력관리 및 배치	영업계획처
11	역사 및 환승통로 고객 안내	영업계획처
12	대체교통수단 운영	영업계획처
13	상가 청소방안 마련	부대사업처
14	역사 물품보관함 청소 및 전동차 음성광고	복합개발처
15	터널 시설물 안전검검	기술계획처	안전지도처 기술분야
16	기술분야 인력관리 및 배치(안전담당관 포함)	기술계획처
17	노반 및 터널 청소	궤 도 처
18	전차선(애자) 청소	전 기 처
19	환기구 청소	기 계 처
20	승강장 하부청소	토 목 처
21	역사내 안내표지판 및 상가외벽 부착물 청소	건 축 처	영업계획처 부대사업처
22	특수청소차량 운행 및 청소	장비관리단
23	승강장 안전문 청소	승강장안전문관리단
24	차량분야 인력관리 및 배치	차량계획처
25	전동차 객실 내부 및 외관 청소	차량운영처
26	전동차 주요 설비(기계장치 포함) 점검	차량운영처
27	열차 운행계획 조정	승무시스템처

“지하철 목욕하는날”부서별 세부 추진계획

“지하철 목욕하는날”부서별 세부 목표사 업 명(HY울릉도B 18p)

		1-1 0000000(세부사업명) (문의사항 : ㅇㅇㅇㅇ처 ㅇㅇㅇ, ☎ㅇㅇㅇㅇ)		ㅇㅇㅇㅇ처

□ 추진목적 (신명 견고딕 15p)

○ 내용(신명 태고딕 14p)

- (신명 태명조13)

□ 추진목표

○

-

□ 추진방안

○

-

○

-

□ 향후계획

세 부 내 용	추진 일정	2월중순			2월말			3월초			3월중순			3월말			4월
		2/15			2/15~2/28			3/1~3/10			3/11~3/20			3/21~3/31			4/1~
-
-
-

□ 참고사항

○

000처	처장 : 000 ☎ 6311-0001	팀장 : 000 ☎ 0002	담당 : 000 ☎ 0003

-