지하철 937정거장 #1 출입구 및 환기구 설치계획

1. 사전조치사항

No	구 분	내 용	조치시한	비고
1	지장물 이설 유관기관 협의	· 도시가스/한전/통신/통신신계기 /자전거주차대/가로등/CCTV/가로수등	2016. 3	완료 (서울시)
2	실시협약	· 서울시와 조합간 실시협약 체결 - 설계/감리/시공주체 결정 - 사업비/책임주체 결정	2016. 4	미진행
3	기 타	· 주공아파트 동북고 주변 가설휀스 및 방음시설 설치 협조 · 보행자통로 이설 · 기타 공사민원 협조(주민동의서)	2016. 4	미진행
4	지장물 이설	· 도시가스/한전/통신/통신신계기 /자전거주차대/가로등/CCTV/가로수등	2016. 5	미진행

2. 출입구 및 환기구 공사일정

No	구 분	작 업 내 용	공사기간	비고
1	지장물 이설	· 도시가스/한전/통신/통신중계기 /자전거주차대/가로등/CCTV/가로수등	2016. 5 ~ 2016. 10	6개월
2	작업장 휀스설치	· 작업장 가림막 및 보행자통로 설치	2016. 11	1개월
3	토공 및 가시설설치	출입구 및 환기구 토공/가시설	2016. 12 ~ 2017. 4	5개월
4	구조물 설치	출입구 및 환기구 구조물	2017. 5 ~ 2017. 8	4개월
5	복구공	출입구 환기구 공사구간 지반 복구공사	2017. 9 ~ 2017. 10	2개월

3. 공정추진계획