지하철9호선 920공구 지장물 현황도

□ 개착구간 지장물 현황

구 분	TYPE-1	TYPE-2	TYPE-3	비고
현황도면
저촉 지장물	상수도관+도시가스관	상수도관+도시가스관	상수도관+도시가스관

□ 기관별 협의 의견

기관별	기 관 별 의 견	비고
상수도 (수자원공사, 강동수도사업소)	○ 지하철구조물 완료에 따른 지장물 복구시 상수도관과 인접하여 상수도관 시설기준에 부합하는 타구조물의 이격거리 확보 및 상수관 상단부에 타시설(도시가스관) 보호를 위한 신설 구조물(복구시 신설되는 지장물 받침용 구조물)의 설치는 불가 함.
도시가스 (코원에너지)	○ 도시가스관로는 1989년 부설된 상태로 지하철 공사후 되메우기 공정시 도시가스사업법 제30조4의 4항 가스안전영향평가서에 의거 도시가스관보호용 받침구조물을 반드시 시행하여야 하며, ○ 도시가스배관 받침 구조물 시공이 불가할 경우 도시가스배관의 이설은 불가피하며 이설비용은 원인자(롯데건설)가 부담하여 이설공사 요구.
시공사 (롯데건설)	○ 도시가스배관 매설당시(1989년) 「서울특별시 상수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」시행규칙 제12조(다른 시설물의 인접설치 제한)등의 규정에 의거 수도시설 상단에는 수도시설의 유지관리에 지장이 있는 지장이 있는 타 시설물의 설치는 불가한 것으로 규정하고 있는바, ○ 기 부설된 상수도관의 상단에 매설된 도시가스 배관은 관련규정를 위법하여 매설된 상태로 이설 비용은 시설물의 주체(코원에너지)가 부담하는 것이 타당함.