품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 지하철9호선 921공구건설공사                            점검일 : 2015. 8. 11 ~ 8. 12

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 현장 내 개개인에 대하여 책임과 권한을 부여하는 업무분장 내용 중 기계업무 담당자의 업무대행자가 누락되었으니 지정 관리하시기 바람.	시정 검토
5 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서분류 체계에 의거 관리되는 현장 내 생산문서는 색인목록에 보존기한, 보관위치, 보안등급 등을 각각 지정 작성 관리하 시기 바람.	시정 검토
8. 건설공사 수행준비	․ 설계도서․법규․KS규격 등을 포함한 건설공사 수행과 관련된 요구사항이 검토되고 기록의 유지 여부	◦ 현장에 적용되는 설계도서관리대장에 개정(변경)시마다 설계 도서를 배부처의 수신자가 날인하여 설계도서의 적정히 관리 될수 있도록 하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검 증, 식별, 보관, 재고 관리	◦ 기자재수급계획은 2014년 하반기이후 미기재된 월별 계획물량 /실적물량을 지속적으로 작성 관리하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 정거장 개착(무복공) 왼쪽 가시설 띠장 2단 부분에 되메우기시 토사 등은 낙하 또는 부식영향을 주는 배수에 지장이 우려되니 제거요망 ◦ 개착가시설 버팀보 및 지장물 점검 확인용 1단 점검통로 일부 구간의 안전난간 일부 철거구간은 점검자 또는 근로자의 추락 방지 위한 안전대 및 안전줄 설치 필요(토목시공 오세길) ◦ 노선이 급구배로 형성되어져 실드 굴진시 여굴가능성이 예견 되는 바 그라우팅 보강(주입압, 주입속도...) 계획 및 실시가 보다 철저 필요 ◦ 흙막이 가시설은 해체단계(지보재)시 위험성을 가지고, 지보재 형식이 강성이 큰 원형지보재 채용으로 제거시 지점간격이 다소 클것으로 사료되는바 해체단계 시공계획을 사전검토하고 장지간 경사지보재(936정거장) 및 터널근접구조물, 변곡부 발현부위는 변위유발 가능성이 상대적으로 큼으로 계측(경사계, 지표침하, 수위계....)을 통한 거동감시 철저 필요 (토질및기초 한태곤)	시정 검토

※ 본 점검결과는“지하철9호선 921공구건설공사”의 시공자인 ㈜포스코건설와 감리자인 ㈜유신에서 제시한 문서와 구두      답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.