품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사                      점검일 : 2015. 7. 1 ~ 7. 2

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 문서관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 문서분류 체계에 의거 관리되는 생산문서의 색인목록이 전산 양식과 품질관리계획서 양식이 서로 상이하니 적정 양식으로 통일시켜 관리하시기 바라며(문서의 보관위치, 보유기한, 관리 책임자, 보안등급, 보관방법 등이 포함될 수 있도록 보완) 문서총괄담당은 보안점검표를 작성 주기적(월 1회)으로 보안 점검을 실시하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시여부	◦ 기 수립된 2015년도 교육훈련운영계획 중 협력업체 교육(각 공종별 시공계획)은 당해연도 시공계획에 맞도록 공종별로 세분화하여 교육 일정을 수립(보완) 하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 932 정거장 지하 2층 승강장층 벽체(석촌→운동장 방향) 일부 에 누수 있음. 본 벽체는 별도의 추가공사 없이 Paint후 공용 개시 계획이므로, 이후 추가 누수 또는 다른 지점 누수 발생시 얼룩 발생 염려 있고, 대합실층 청소수 처리관을 벽체에 노출 설치토록 계획되어 있음. 따라서 승강장 정면에서 바라볼 시 미관을 해칠 수 있으니 벽체처리 방안을 재검토 요함. ◦ 공구내 Sink Hole의 처리와 관련하여 공간에 토사를 채운 후 10개월 정도 경과 되었으니 지중 공간이 전부 진충되었을 것으로 사료되나 확인하기 위하여 충진 여부를 재점검한 후 결과에 따라 미 충진 부분은 조치하시기 바람. ◦ 933 정거장 1단 벽체 시공 후 시공 이음부에 설치하는 지수판 의 시멘트 페이스트를 제거하고 1,2단 벽체 시공시 접속 기능 을 강화토록 하시기 바람. ◦ 933 정거장 원형기둥 철근 배근시 띠철근 Hook부의 결속을 확실하게 하여 응력전달이 충실토록 조치바람.(철도 임근수) ◦ 지하수위가 높고 연약한 충적층으로 천부지층이 구성되어 쉴드 터널 굴진시 막장 전면 상부 토체 유입 방어가 중요한 바 이의 조건 형성 및 실태를 항상 점검할 수 있는 시공계획서의 사전 수립을 요함. ◦ 완성 벽체면이 습윤한 상태로 목격되는바 우기시 벽면 상태 를 점검하여 누수징후 발견시 그라우팅 재주입 등 처리를 요함 ◦ 기존 Sink Hole 발생 영역 주변 향후 터널 예정부는 강도가 지반 변위 거동에 따라 기존 강도 대비 저하 되었을 것인바 사전 이의 거동을 감지할 수 있는 계측시스템(수위계, 경사계, 침하계 등)계획 및 굴진공법 검토를 요함 ◦ 지하수 유입에 따른 토사 동반유출시 지반체 제거 효과에 따른 지반공동 발생 등 지반공학적 문제를 야기함으로 지하수 유입 시 탁도 및 물량증감 등을 면밀히 체크하고 사항 발생 시 조속 대응하시기 바람 ◦ 정거장 932 바닥면에 우수유입, 저류에 의한 안전사고(감전, 미끄러짐 등)가 발생치 않도록 조속제거 및 유입수 배수 대책 을 강구바람.(토질 및 기초 한태곤)	시정 검토

※ 본 점검결과는“지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사”의 시공자인 삼성물산(주)와 감리자인 ㈜수성엔지니어링에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.