설계변경 본부위원회 자문요청서(토목)

문서번호		요청부서		도시철도 토목부 (토목2과)	요청일			2014년 11월 일
공 사 명	지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사
공사개요	공사규모		총연장 : 1,140m ( 정거장 2개소 : 330m, 본선 : 810m )
	공사기간		2008.06.02. ~ 2014.12.31
	감 리 사		㈜유신 외 4개사
	설 계 사		㈜신성엔지니어링, ㈜삼보기술단
	시 공 사		현대산업개발(주), 경남기업(주), 일성건설(주)
자문 안건명	지하철929정거장과 코엑스몰 광장간 연결출입구 설치 설계변경						요청금액		4,940백만원
자문요청사유	☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형	▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡 ☑ 기타(한국무역협회와 협약 체결)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 한국무역협회와의 『지하철9호선 929정거장과 코엑스몰 광장 간 연결출입구 설치』 협약에 따른 코엑스몰 연결출입구설치 변경 실시설계도서에 의한 설계변경
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 변경된 아셈연결통로는 한국무역협회와 협의하여 위치 및 규모가 결정된 사항으로 규모변경에 대한 원설계자의 특별한 의견은 없으며, 연결통로 내공 단면 확대에 따른 구조물 상세 검토 (수화열, 가설동바리, 철근배근 등) 및 시공 중 안전 확보방안을 설계당시부터 검토, 적용 필요.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 연결출입구 규모변경 : 폭 12m→15.8m (개방감 및 쾌적성 극대화를 위한 확폭 및 중앙기둥 배제) - 아셈광장 활용 극대화 및 장애인의 광장 진입 편의를 위해 E/S, E/V 위치 변경 - 가시설 지지공법 변경 : 당초 H-Pile/토류판 + 버팀보, 어스앙카, 록볼트 무역협회 설계 H-Pile/토류판 + 버팀보, RSW공법 변경 H-Pile/토류벽 + 버팀보, 어스앙카 ▪ 물량 증감내역 - 당초 : 굴착( 8,296m3), 버팀보 설치( 84본), 구체Con’c(1,651m3), 포장공( 3.9a) - 변경 : 굴착(14,130m3), 버팀보 설치(499본), 구체Con’c(3,430m3), 포장공(11.0a) - 증감 : 굴착( 5,834m3), 버팀보 설치(415본), 구체Con’c(1,779m3), 포장공( 7.1a)						▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 1,716 백만원 - 변 경 : 4,940 백만원 - 증 감 : 3,224 백만원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공, 가시설공, 구조물공 포장공, 부대공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. (별도 송부) 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 (별도 송부) 3. 원설계자 검토의견 사본 1부 (별도 송부) 4. 신규공종 단가결정 근거 1부. (별도 송부) 5. 설계내역서 1부. (별도 송부) 6. 설계변경 소위원회 조치결과서 1부.					▪ 공사예정시기 2014. ▪ 소요관급자재 1. - 2. -

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사
계약금액	152,602,564 천원	계약일	2008.05.30	시공사	현대산업개발(주) 경남기업(주) 일성건설(주)
공사기간	2008.06.02. ~ 2014.12.31	낙찰율	-	설계자	㈜신성엔지니어링 ㈜삼보기술단
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키(●), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜유신 외 4개사
공사규모	총연장 : 1,140m - 정거장(2개소) : 330m - 본선 : 810m			※ 작성자 : 유원하 (☎ 02-772-7222)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전			설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	· 토 공 :	굴착 8,296m3		굴착 14,130m3	(증) 5,834m3
	· 가시설 :	H-Pile/토류판+버팀보, E/A, R/B		H-Pile/토류벽 + 버팀보, E/A
		버팀보 84본		버팀보 499본	(증) 415본
	· 구조물 :	구체 Con’C 1,651m3		구체 Con’C 3,430m3	(증) 1,779m3
	· 포장공 :	표층 3.9a		표층 11.0a	(증) 7.1a
	· 부대공 :	-		하수관 이설 118m	(증) 118m
		-		차선도색 2,576m2	(증) 2,576m2
		-		식재공 3,266주	(증) 3,266주
공 사 비	1,716백만원			4,940백만원	3,224백만원
적 용 요 율	해당없음			해당없음
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율 적용 근거	공사계약일반조건 제21조
설계변경 근거	방 침		토목부-23478호(2013.12.17.)
	관련규정		공사계약일반조건 제21조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡 기타(한국무역협회와 협약 체결)
설계변경 내용	한국무역협회와의 『지하철9호선 929정거장과 코엑스몰간 연결출입구 설치』 협약에 따른 코엑스몰 연결출입구설치 변경 실시설계도서에 의한 설계변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련사항

· 설계변경 자문위원회 심의 요청서 세부

코엑스몰 연결출입구 설치에 따른 설계변경 (토목분야)

□ 추진경위

○ 2006. 03. 09.  : 지하철9호선 929정거장과 코엑스몰 간 연결출입구 설치 요청

⇒공사비는 한국무역협회에서 부담 예정(한국무역협회 → 서울시)

○ 2011. 08. 23 . : 코엑스몰 연결출입구 설치 요청(한국무역협회→서울시)

○ 2011. 08.~12   : 코엑스몰 연결출입구 설계(한국무역협회)

○ 2012. 10. 23.  : 코엑스몰 연결출입구 설치 협약(한국무역협회↔서울시)

○ 2013. 03. 06.  : 지하철 9호선 916공구 코엑스몰 연결출입구 설계변경 추진 통보

도시철도토목부-2051호(2013.3.6.)

○ 2013. 04. 15.  : 지하철 9호선 916공구 코엑스몰 연결출입구 설계변경착수 지시

도시철도 토목부-3410호(2013.4.15.)

○ 2013. 05. 29.  : 코엑스몰 연결출입구 설치 협약(변경) 체결(한국무역협회→서울시)

○ 2014. 07. 11.  : 코엑스몰 연결출입구 설계변경 자문 소위원회 개최

□ 설계변경 근거

○ 도시철도토목부-2051호(2013. 03. 06) : 지하철 9호선 916공구 코엑스몰 연결출입구 설계변경 추진 통보

□ 설계변경 현황

○ 지하철9호선 929정거장과 코엑스몰간 연결출입구 설치 설계변경

□ 설계변경 개요

○ 지하철9호선 929정거장과 코엑스몰간 연결출입구 설치에 대한 ㈔한국무역협회와의 협약에 따라 한국무역협회에서 제출한 실시설계도서에 의한 구조물, 가시설, 지장물 이설 등 변경설계 적용

□ 단가산출기준

◦ 신규단가 품적용 : 표준품셈 및 지하철 9호선 적산기준 적용

◦ 자재비 : 2011년 10월 (무역협회 설계가)

◦ 노무비 : 2011년 하반기 (무역협회 설계가)

◦ 신규비목 : 신규단가 (무역협회 설계가)의 100%

◦ 계약물량 : 계약단가 적용

◦ 증가물량 : (신규단가 + 계약단가) x 50%

단, 계약단가가 신규단가보다 높은 경우는 신규단가 적용

□ 설계변경 주요내용

구 분	당초	변경	공사비 계
코엑스몰 연결출입구	∙ 굴착 8,296㎥ ∙ 버팀보설치 84본 ∙ 지반보강공 천공 604m ∙ 구체콘크리트 1,651㎥ ∙ 포장공 3.9a ∙ - ∙ - ∙ -	∙ 굴착 14,130㎥ ∙ 버팀보설치 499본 ∙ 지반보강공 천공 1,079m ∙ 구체콘크리트 3,430㎥ ∙ 포장공 11a ∙ 하수관이설 (흄관설치) 118m ∙ 차선도색 2,576㎡ ∙ 식재공 3,266주	당초 : 1,716백만원 변경 : 4,940백만원 증감 : 증)3,224백만원
			직접공사비
			당초 : 1,078백만원 변경 : 3,470백만원 증감 : 증)2,392백만원
			간접비 및 물가변동액
			당초 : 638백만원 변경 : 1,470백만원 증감 : 증)832백만원

코엑스몰 연결출입구 설치에 따른 설계변경 (토목분야)

평 면 도 (당 초)	평 면 도 (변 경)
20.0m	12.0m
종 단 면 도 (당 초)	종 단 면 도 (변 경)