보 고 서
			담당	팀장
				전결 12/18
문서번호	공사감독2처-15981
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2017.12.18.
공개여부	공개
제 목	직관(300mm) 연장(L=104m) 감소에 대한 검토 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 가산동481-10~327-33번지 외 1개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 4. 25. ~ 2017. 12. 26.

다. 도 급 액 : 721.029,420원

라. 공사개요 : D=80~300mm, L=2,146m, 변실 65개소

마. 도 급 자 : 씨에스이엔지㈜ 대표 한청수

바. 발 주 청 : 남부수도사업소(급수운영과)

2		보고내용

- 당 현장(1, 2구간) 전체구간 중 300mm 직관 수량 감소(L=104m)에 대해 보고 합니다.

1) 직관 감소 현황

- 1구간 가산동547~371-8번지 사거리 횡단구간 기존관 활용으로 30m연장 감소

(기 실정보고 : 공사감독2처-14796)

- 1구간 가산동459-29~459-28번지 사거리 횡단구간 기존관 활용으로 20m연장   감소(기 실정보고 : 공사감독2처-15803)

- 1구간 가산동327-4번지 기존에 개량된 밸브 및 관로 시공 불필요 8m 연장 감소

- 1구간 가산동345-30번지 기존에 개량된 밸브 및 관로 시공 불필요 8m 연장 감소

- 1구간 가산동547-3번지 기존에 개량된 밸브 및 관로 시공 불필요 8m 연장 감소

- 당초 직관 수량에는 이형관(300mm, 밸브 및 곡관 등) 시공 수량에 대한 연장은 제외 되었으나, 밸브 16개소, 이형관 82개소가 시공되었고, 이형관이 직관 수량을 대체하여 30m 직관 수량 감소

2) 검토의견

- 위 와 같이 감소된 직관 수량은 기 개량된 관로 이용 74m와 이형관 시공 수량 30m로 인해 감소 된 것으로 사료 됨.

3		조치의견

- 상기 검토내용을 발주청에 보고하고 그 결과에 따라 설계변경 시 정산하여 반영코자 합니다.   끝.