□ 집행부진 주민지원사업 공정만회대책

연도	지자체	사업명	국고보조금 (천원)	국비집행액(천원) (2014.6월말기준)	추진현황 및 부진사유	공정 만회대책	비고
2012	서울시도봉구	무수골생태치유공원 조성사업	1,195,000	82,164 (6.87%집행)	○추진현황 - ´12.12.31~´13.9.30 : 학술및기본계획수립 - ´13.9.3 : 도시계획시설(공원) 결정 계획수립 - ´13.10. : 도시관리계획(변경) 결정안 열람공고 ○부진사유 - 구의회 의견청취 지연에 따른 도시관리계획 결정 절차 및 사업지연	○´14. 7. : 도시계획입안 및 고시 ○´14. 9~10 : 실시설계용역 ○´14. 11~´15.2 : 공사추진
2013	서울시강북구	인수천 교량설치	400,000	101,699 (25.42%집행)	○추진현황 - ‘13.9～’14.2 : 설계용역 - ‘14.4.9 : 공사발주 - ‘14.5.22~11.1 : 공사추진 ○부진사유 - 설계용역 3회 유찰에 따라 공사 지연	○´14년 내 사업완료 예정
	서울시도봉구	무수골 경관사업	400,000	-	○부진사유 매칭비(구비)) 미확보	○´14. 10. : 구비확보(1억원) ○´14. 11. : 공사추진
	서울시구로구	정선옹주묘역일대 전통문화사업	400,000	21,000 (5.25%집행)	○추진현황 - ´13.10.2 : 국비 교부(4억원) - ´13.10.23 : 명시이월(4억원) - ´14.4.2 : 구비확보(1억원) - ´14.2.4 ~ 6.24 : 설계용역 준공 ○부진사유 - 매칭비(구비) 확보지연으로 공사추진 지연 지연	○´14년 내 사업완료 예정