□ 집행잔액 세부내역

(단위 : 원)

합 계		81,643,560
도 급 비	낙찰차액	30,361,250
	물량정산 잔액	20,164,750
	보험료 등 제경비 정산 잔액	9,214,000
관급비 및 폐기물처리비 정산 잔액		1,085,540
지 체 상 금		20,664,070
선금 반환이자		153,950

※ 2018년 9월 준공검사 시 아스콘 포장품질 불합격으로 재시공

→ 지체상금 부분을 제하고 준공처리(2019년 5월)

○ 당초 공사기간 : 2018. 5. 4. ∼ 2018. 9. 30.

○ 변경 공사기간 : 2018. 5. 4. ∼ 2019. 5. 16. (지체일수 233일)

○ 지체상금 : 177.374,000원(계약금액) × 233일 × 0.05% = 20,664,070원