2호선 전동차(200량) 납품 및 영업운행 계획

※ 전동차 반입 및 납품검수 등 일정에 따라 영업운행 시기 변경가능

연번	편성	납품기한	반입일자	시운전시험	납품검수	영업시운전	영업운행	비 고
1	206	’17.7.31	’17.4.14	’17.5.15~7.23	‛17.8.8	’17.9.29	’17.9.30 (완 료)	군 자
2	207	’17.12.31	’17.8.14	’17.8.24~9.20	‛17.11.6	’17.11.16	’17.11.17	신 정
3	208	〃	’17.10.16	’17.11.1~11.6	’17.11.21	’17.12.1	’17.12.2	〃
4	209	〃	’17.11.9	’17.11.14~11.19	’17.12.4	’17.12.14	’17.12.21	군 자
5	210	〃	’17.11.21	’17.11.29~12.6	’17.12.20	’18.12.30	’18.1.8	신 정
6	211	’18.6.30	’17.12.23	’17.12.24~’18.1.10	’18.1.24	’18.2.3	’18.2.13	〃
7	212	〃	’18.1.15	’18.1.16~1.30	’18.2.13	’18.2.23	’18.3.2	군 자
8	213	〃	’18.2.12	’18.2.13~2.27	’18.3.14	’18.3.24	’18.3.31	신 정
9	239	〃	’18.3.10	’18.3.11~3.25	’18.4.6	’18.4.16	’18.4.23	〃
10	240	〃	’18.4.4	’18.4.5~4.19	’18.5.3	’18.5.14	’18.5.21	군 자
11	241	〃	’18.4.28	’18.4.29~5.13	’18.5.28	’18.6.7	’18.6.14	신 정
12	242	〃	’18.5.28	’18.5.29~6.12	’18.6.27	’18.7.7	’18.7.14	〃
13	285	’18.12.31	’18.6.17	’18.6.18~7.2	’18.7.16	’18.7.26	’18.8.2	군 자
14	286	〃	’18.7.9	’18.7.10~7.24	’18.8.7	’18.8.18	’18.8.25	신 정
15	287	〃	’18.8.4	’18.8.5~8.20	’18.9.3	’18.9.14	’18.9.21	〃
16	288	〃	’18.8.31	’18.9.1~9.15	’18.10.2	’18.10.14	’18.10.21	군 자
17	289	〃	’18.9.26	’18.9.27~10.7	’18.10.22	’18.11.1	’18.11.8	신 정
18	290	〃	’18.10.20	’18.10.21~11.5	’18.11.19	’18.11.30	’18.12.7	군 자
19	291	〃	’18.11.10	’18.11.11~11.25	’18.12.7	’18.12.18	’18.12.26	신 정
20	292	〃	’18.12.1	’18.12.2~12.15	’18.12.28	’18.’19.1.8	’19.1.15	군 자