문서번호	서울특별시차량정비센터-3013
결재일자	2019.3.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	소장
협조
	정비팀장

차량정비센터 내진보강공사 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3

서울특별시차량정비센터

차량정비센터 내진보강공사 추진 계획

우리시 차량정비센터에 대한 내진성능 평가결과 내진 B등급(보수)

으로 평가됨에 따라 차량정비센터에 대한 내진보강공사를 시행,

공공시설물에 대한 안전성 강화에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				목표 및 추진근거

목   표 : 공공청사 “내진 A등급” 성능확보

추진근거

❍ 지진 ․ 화산재해대책법 제16조(기존 건축물의 내진보강 추진 등)

❍ 서울시 지진방재 종합계획(시장방침 제163호(‘16.6.15)

- 목  표 : “지진에 강한 서울 만들기”

- 공공시설물별 내진평가 시행 후 건축물 단계적(‘16~’20)보강 추진

Ⅱ				추진경위

내진성능평가 시행 : 2017.8 ~ 2017.10

소요예산 : 42,510천원

❍ 평과결과 : B등급(붕괴방지 수준)

- 본관 : 벽체 균열 및 바닥 방수층 파손

- 기관반, 하체반 : 조적벽체, 파라펫, 기둥 수직 및 수평균열

- 변전소 : 기둥, 벽체 접합부 수직 및 수평균열

- 경비실 : 파라펫 수평 균열

- 대형정비동 : 조적벽체 수직 및 수평 균열

- 유류창고 : 파라펫 수직 및 수평 균열

- 간이정비공장 : 파라펫 수직 및 수평 균열

- 도장공장 : 파라펫 수평 및 조적벽체 수평 균열

❍ 목표 성능수준(인명안전수준)으로 내진보강 필요

Ⅲ				사업추진 계획

사업개요

❍ 사 업 명 : 차량정비센터 내진보강공사

❍ 대    상 : 본관 및 정비동(9개 동)

❍ 사업기간 : 2019. 3 ~ 2019. 9

❍ 사 업 비 : 500백만원(시설비 465백만원, 감리비 20백만원,

실시설계비 15백만원)

❍ 사업내용 : 건물 9개동 균열부위 보수 및 내부 수장공사

Ⅳ				사업추진 일정

내진보강공사 실시설계 용역 시행

❍ 실시설계용역 타당성 기술심사 : 2019. 3. 20

❍ 실시설계용역 업체 선정 : 2019. 4. 5

❍ 실시설계용역 결과 보고 : 2019. 4. 30

감리용역 시행

❍ 감리용역 기술 타당성 의뢰 및 심사(2019. 5.3)

❍ 감리용역 업체 선정 : 2019. 5. 17

내진보강 공법

❍ 선정공법 : 일반공법

공사 발주계획

❍ 입찰방법 : 일반경쟁입찰(2019. 5.20)

❍ 공사기간 : 착공일로부터 90일

❍ 입찰참가자격

- 건설산업기본법 제9조 규정에 의한 “시설물관리유지업” 등록을 필한           업체로 조달청 입찰참가자격이 등록된 업체

예산과목

❍ 차량정비센터, 특화된정비체계 구축, 요율적인 차량정비, 차량정비센터         시설 유지보수, 시설비(401-01)