문서번호	토목부-8229
결재일자	2017.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
협 조

설계용역 준공기한 연기 보고

(장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 기본 및 실시설계)

2017. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계용역 준공기한 연기 보고

(장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 기본 및 실시설계)

견인차량 보관소 이전 예정부지의 협의 결렬에 따라 현재 견인차량보관소 부지 사용에 따른 변경설계 및 인허가 수행 등을 위하여  준공기한을 연기하고자 검토보고 드림

※ 준공기한 : 당초)2017. 4.30. → 변경)2017. 5.31.(증1개월)

▢ 용역 개요

◦ 용 역 명 : 동부간선도로~장지지하차도간 연결로 설치 기본 및 실시설계

◦ 규    모 : 진입램프 연장 638m, 폭6m(1차로)

진출램프 연장 455m, 폭6m(1차로)

◦ 용역기간 : 2016.5.23. ~ 2017.4.30.

◦ 용역금액 : 제2롯데 교통개선대책에 따라 사업시행자 부담

◦ 용 역 사 : ㈜동일기술공사 외 1개사

▢ 근 거 : 천일(구조)-688호(2017.4.19.) 용역기간 연장 요청

▢ 추진현황

◦ '16.03.22. : 탄천변 동측도로 구조개선사업 추진계획 수립(도로계획과)

◦ '16.05.23. ~ 09.26. : 기본설계

◦ '16.08.10. : 경관 및 디자인심의

◦ '16.10.20. : 기본설계 건설기술심의

◦ '17.01.03. : 환경영향평가서 제출(토목부→서울지방국토관리청)

◦ '17.01.19. : 도시계획시설(도로)결정 및 실시계획인가 고시

◦ '17.02.14. : 좋은 빛 심의(조건부 채택)

◦ '17.02.~3. : 탄천1고가교(동부간선도로 접속부) 안전점검

◦ '17.02.16. : 견인차량보관소 이전 예정부지 협의결렬(서울시 도로계획과↔도로시설과)

◦ '17.03.17. : 현재 견인차량 보관소 활용(안)협의중

(서울시 도로계획과 ↔ 송파구 주차관리과,시설관리공단)

▢ 보고내용

가. 용역기간 변경                                        (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
용역기간	'16.05.23.~'17.04.30.	'16.05.23.~'17.05.31.	증)1개월

나. 준공기한 연기 사유

◦ 견인차량 보관소 이전 예정부지 협의 결렬

→ 견인차량 보관소 이전 예정부지의 도로시설과 제설차량 전진기지 이용에 따른 이전 협의 결렬로(서울시 도로계획과↔도로시설과), 현재 견인차량보관소 활용을 위해 송파구 주차관리과 및 시설관리공단 요구사항   협의진행(서울시 도로계획과 ↔ 송파구 주차관리과,시설관리공단)중이며, 결과를 설계에 반영하고 인허가 절차수행에 따라 준공기한 연기가 필요함

→ 현재 견인차량 보관소 활용에 따른 요구사항

- 견인차량 보관소 시설물 재배치

- 견인차량 보관소 사무실 신축

- 사무실 내 민원실,소장실,휴게시설 설치

- 사무실 공기순환 및 에어컨 시스템 설치

- 근무자 데스크 설치

- 기존 화장실 위치 및 컨테이너 2개소 위치 이동

- 보행자 이용 동선변경으로 계단 신규설치

- 주변 경계 휀스 설치

- 내부 전기시설 및 CCTV, 출입고시 차량번호인식 시스템 설치

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 향후계획

◦ '17. 5.10. : 용역완료 보고

◦ '17. 5.31. : 설계준공

붙임 : 용역기간 연장요청 공문 1부.  끝.