미래형 공영도매시장을 구현하는 유통 혁신 리더

		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	채소2동 건립공사 가설휀스 철거 및 주변부 공사 계획 보고

1. GMR-LT-24-03-030(2024-03-07), 극건(가락) 제2403009호 (2024-03-06)호와 관련입니다.

2. 상기 대호과 관련하여 채소2동 건립공사 현장 가설휀스(남측) 철거 및 주변부 토목, 조경공사 일정계획을 다음과 같이 보고합니다.

○ 작업일정

위치	작업일정	작업내용	비고
*서측(물정화장~서1문)
*동측(중앙로변)
*남측(수산배송도로)
북측(임시주차장)

○ 작업방법: 이미지 휀스 설치 ⇒ 가설휀스 철거 ⇒ 하수도 공사 및 도로포장

※ 준공 시 까지 공사현장 경계확보를 위한 이미지 휀스 설치(동,남측)
※ 안전사고 예방을 위한 공사장 가설휀스 외부(3m) 작업공간 확보 및 탄력적 운영

가설휀스 철거 전(현황)	가설휀스 철거 후 이미지 휀스(높이1.8m) 설치

○ 작업 일정(계획)

구분	3월				4월				5월				6월
	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
서측 (물정화장~서1문)
동측 (중앙로)
남측 (수산배송도로)
북측 (임시주차장)

※ 상기 일정은 현장 여건에 따라 조정될 수 있음.

○ 유관부서 및 유통인 협조요청: 문서 발송 및 안내문 배포

- 남측(수산배송도로 채소2동 측 주차장): 차량, 적치물, 쓰레기수거장 이동 조치

- 서측(물정화장~서1문) 및 동측(중앙로): 차량 및 이용자 통행 부분 통제

끝.

.

부장						팀장				건설안전본부장		03/11
협조자	차장		박지원

시행			건설공사팀-421				(2024.03.11.)			접수				()
우												/
전화					전송			/						/	공개
청렴, 당신과 나의 깨끗한 약속입니다.