문서번호	토목부-26140
결재일자	2015.12.8.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
협조

책임감리용역 설계변경 검토보고(총차 7회, 제5차 1회)

『천호대로(광나루역) 확장공사외 1개소 전면책임감리용역』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

책임감리용역 설계변경 검토보고(총차7회, 제5차 1회)

「천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 전면책임감리용역」

천호대로(광나루역) 확장공사를 장기계속공사로 시행하고 있으나, 사업비 부족으로 준공기한을 연장하였는바, 이에 책임감리용역도 설계변경이 필요하여 보고드림.

※ 감리비 : 3,305,100천원→4,379,000천원, 5차분 용역기간 : ‘15.4.1.~’15.12.31.→‘15.4.1.~16.12.31.

1		관련근거

❍ 수성 제2015-4393(‘15.12. 4.) : 감리용역 설계변경 요청(전체7회, 5차1회)

2		용역개요

❍ 용역명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

❍ 공사규모 :

- 폭 6차로 → 10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)

❍ 용역기간 : 2010.11. 1. ~ 2018. 1.31.(5차분 2015. 4. 1.~2015.12.31.)

❍ 용 역 비 : 3,305,100천원

❍ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링 대표이사 박미례

3		실정보고 내용

❍ 본 용역의 계약기간 변경으로 감리원 조정 및 감리비 증액을 위한 설계변경이 필요함

❍ 설계변경 내용

구 분	도급비(천원)		용역기간		비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경
총 차	3,305,100	4,379,000	‘10.11. 1. ~‘18. 1.31.	변경없음
제3차	595,000	1,668,900	‘15. 4. 1. ~15.12.31.	‘15. 4. 1. ~16.12.31.

❍ 감리원 조정 내역

- 총차 7회 변경

공 종	단 위	당 초	변 경	증·감	비 고
수석감리사	개월	59.86	70.00	증10.14
감리사	개월	5.50	5.50	-
감리사보	개월	168.91	244.87	증75.96
기술지원감리원	개월	55.43	65.16	증9.73
현지사무원	개월	58.86	69.00	증10.14

- 제 5차 1회 변경

공 종	단 위	당 초	변 경	증·감	비 고
수석감리사	개월	8.68	19.24	10.56
감리사	개월	-	-	-
감리사보	개월	38.04	114.00	75.96
기술지원감리원	개월	8.68	19.24	10.56
현지사무원	개월	8.68	19.24	10.56

4		검토의견

❍ 본 용역의 용역기간 연장에 따른 감리원 추가 배치 및 감리비 증액분을 반영한 설계변경을 시행하여 감리용역 추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 설계변경 내역서 (총차 7회) 1부.

2. 설계변경 내역서 (제5차 1회)1부.  끝.