개포디지털혁신파크조성

구분	시장 관리사업	추진 단계	실행	추진 부서	경제진흥본부 (디지털산업과)

□ 사업개요

○ 위 치 : 강남구 개포동 개포로 416 (舊개포외국인학교 부지) ○ 대지면적 : 16,077.9㎡ ○ 건물현황 : 3개동(신관, 본관, 체육관) 6,178.85㎡, 옥외수영장 375㎡
	<개포 외국인학교 부지>

○ 사업기간 : 2014. ~ 2016.

○ 사업내용 : 기존 시설을 리모델링, ICT 중심의 융․복합공간으로 조성

○ 사 업 비(‘15년) : 7,366백만원(시설 리모델링 및 운영 준비 비용 등)

□ 추진현황

○ 모바일융합공간 조성 추진계획 수립 : ‘14.1.27(1부시장 방침)

○ 모바일융합공간 조성 자문위원회 구성․운영 : ‘14.2~‘15.1월(총 3회)

○ 모바일융합공간 타당성 조사 용역 : ‘14.3.21~’14.9.20

○ 시 투자심사위원회 심사 : ‘14.9.30

○ 지구단위계획 변경 및 기본계획 수립 용역 : ‘14.10월~’15.5월

- 착수보고(‘14.10.29), 1차 중간보고(‘15.1.22), 2차중간보고(’15.3.16)

- 지구단위계획변경안(학교용도 폐지) 도시계획위원회 통과(’14.12.24)

○ 정밀안전진단 실시 : ‘14.11월~‘15.1월

○ 건축 리모델링 설계 및 공사 의뢰(→도시기반시설본부)  : ’15.3.12

○ 개포디지털혁신파크운영자문위원회 개최 : ’15.3.16, ‘15.5.8

○ 건축 리모델링 설계공모 공고 : ‘15.5.15

□ 사업성과

○ 학생, 창업가, 시민 등에 대한 다양한 창조교육을 통해 창업아이디어 개발 등 혁신적 문제해결능력을 증진시키고,

○ 스타트업에 대한 테스트베드 역할을 수행하는 디지털혁신 공간 조성 추진 중

	공간구성(안)
‣신 관 : 디지털관련 창조혁신교육, 코워킹룸, 커뮤니티룸, 테크숍 ‣본 관 : 스타트업 혁신센터, IT융합연구소 ‣체육관 : 글로벌네트워킹공간(창업관련 국제회의, 데모데이, 해커톤 등)

□ 향후계획

○ 건축 리모델링 설계 및 공사 시행              : ’15.5월~

- 공사준공기한은 도기본의 사전검토결과(‘15.11월→’16.9월)를 고려,

단축방안 마련

○ 개포 디지털 혁신파크 기본계획 수립            : ’15.6월

- 공간활용계획, 프로그램, 운영주체 등 시설전반의 조성·운영방안 마련

□ 성과목표 (누계)

성과지표명(단위)	비중 (%)	2014년		2015년		2016년
		6월	12월	6월	12월	6월	12월
개포디지털혁신파크조성	100	0	5	40	45	8	2

□ 월별 추진일정

월별	추 진 내 용
1월	정밀안전진단 용역 실시 기본계획 수립용역 1차 중간보고회 개최
2월	개포디지털혁신파크 운영 자문위원회 구성
3월	건축 리모델링 설계 및 공사 시행 의뢰 기본계획 수립용역 2차 중간보고회 (개포디지털혁신파크 운영 자문위원회 개최, 1차)
4월	건축 리모델링 공사 설계공모 개포디지털혁신파크 운영 자문위원회 개최(2차) 지구단위계획 변경 및 기본계획 수립 용역 완료(최종보고회) 개포디지털 혁신파크 MP선정
5월	건축 리모델링 공사 설계공모(계속) 개포디지털혁신파크 조성 기본계획(안) 마련
6월	건축 리모델링 공사 설계공모 준공 개포디지털혁신파크 운영 자문위원회 개최(3차) 개포디지털혁신파크 조성 기본계획 수립
7월	건축 리모델링 공사 설계 입주기관 모집 공고
8월	건축 리모델링 공사 설계(계속) 입주기관 모집 공고(계속)
9월	건축 리모델링 공사 설계 준공 입주기관 심사 및 선정
10월	건축 리모델링 공사 시행 입주기관 협약체결
11월	건축 리모델링 공사 시행(계속) 개포디지털혁신파크 세부 운영계획(안) 마련 개포디지털혁신파크 운영 자문위원회 개최(4차)
12월	건축 리모델링 공사 시행(계속) 개포디지털혁신파크 세부 운영계획 수립