문서번호	교통운영과-12212
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	BRT팀장		교통운영과장		보행친화기획관		도시교통실장
협 조
	버스정책과장
	교통지도과장
	교통정보과장
	토목부장

천호대로(천호지하차도) 중앙버스전용차로 개통 계획

2020. 7.

도시교통실

(교통운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

천호대로(천호지하차도) 중앙버스전용차로 개통 계획

천호대로 중앙버스전용차로 구간 중 단절구간인 천호대교 남단~강동구 강동역 간 중앙버스전용차로 공사가 8월 완료예정으로 있어 운영전 사전점검 등 중앙버스전용차로 개통에 만전을 기하고자 함.

1		사업현황

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 천호대로(천호지하차도) 중앙버스전용차로 설치

○ 사업구간 : 천호대교 남단 ~ 강동구 강동역

○ 사업규모 : 중앙버스전용차로 1.2km, 중앙정류소 2개소(도심1, 외곽1)

○ 기    간 : ’18. 1. ~ ’20. 8.

○ 사 업 비 : 1,150백만원

□ 추진 경위

○ ’18.05.	: 실시설계 완료

○ ’18.12.	: 공사계약 (천호지하차도 평면화 및 중앙버스전용차로 설치공사 병행시행)

○ ’19.02.~09.	: 천호지하차도 지하공간 활용 검토 (도로계획과)

○ ’19.10.~’20.08.	: 공사시행(8월 준공예정)

2		개통 준비계획

□ *******************************

□ 주요 준비사항 및 일정

준 비 사 항			일 정	추진부서
· 버스운행계획 수립 (정류소 ID 및 명칭 부여, 운행명령, 노선도 부착)			************	버스정책과
· BIT 설치 및 입력내용 확인	BIT 설치		*************	교통정보과
	입력내용 확인		************
· 관계기관 사전 현장 합동점검			************	교통운영과 도시기반시설본부 등
· 대시민 홍보	안내간판 설치		************	도시기반시설본부
	보도자료 배포, 홈페이지 등		************	교통운영과
· 중앙버스전용차로 신설 고시 (시보게재)			************	교통운영과
· 운수종사자 교육		운수종사자	********************	버스정책과
· 현장비상근무			********************	교통운영과
· 모니터링			********************	교통운영과 / 용역사

3		준비사항 세부시행 계획

대시민 홍보

○ 보도자료 배포, 인터넷, VMS홍보 : ***************

○ 홍보용 안내간판 설치(도시기반시설본부) :**************

- 설치수량 : 총 71개소

연번	구 분	수 량	규 격	비 고
총 계		71
1	중앙정류소 운행노선 안내	6	1.2×2.4m
2	가로변 정류소 폐지 및 운행노선 안내	21	0.9×1.8m
3	개통 홍보(대형 입간판)	20	1.2×2.4m
4	개통 홍보(가로배너)	20	1.0×0.4m
5	무단횡단금지 안내	4	0.9×1.0m

관계기관 합동점검

○ 버스전용차로 개통 관계기관 사전 현장 합동점검

- 일    시 : *************************

- 관계기관

□ 서울시 교통운영과, 버스정책과, 교통정보과, 도시기반시설본부

□ 서울지방경찰청(교통관리과, 신호운영실), 강동경찰서(교통과)

- 점검내용 : 버스전용차로 개통에 따른 차선, 표지 등 교통안전시설, 승강장, 노선도 등 버스안내표지, 기타 시민홍보 안내문 등 전반

운수회사 관련자 교육(버스정책과)

○ 1차 교육 : 시 → 운수회사 노선 담당자 교육 시행

- 대 상 자 : 운수업체별 노선 담당자

- 일    시 : **********************

- 교육주관 : 버스정책과

- 교육내용 : 교통체계 변경사항, 중앙버스전용차로 운행요령 및 안전운행 준수사항 등

○ 2차 교육 : 운수회사별 자체교육 시행

- 대 상 자 : 운행노선 버스 운전기사

- 일    시 : *******************

- 교육주관 : 버스운수 업체별 시행(1차 교육 받은 노선담당자 전파 교육)

- 교육내용 : 1차 교육내용 전파 교육시행

현장 비상근무

○ 현장 상황에 대응 하기 위한 교통운영과 직원 비상근무 시행

- 기 간 :***************************

- 상황반

· 인 원 : 3명(교통운영과장, BRT팀장, 담당자)

· 내 용 : 교통상황 관리 및 보고, 조치계획 수립 등

- 현장 대응반

· 인 원 : 23명(2인 1조, 주·야간 비상근무 시행) : 근무조 별첨

· 내 용 : 교통상황 점검 및 보고, 개선사항 검토 등

○ 모범운전자 현장 교통관리 배치(강동경찰서)

- 기 간 :**************************

- 장 소 : 천호사거리 등 주요 교차로

- 배 치 : 인원 및 위치 등 강동경찰서 협의를 통해 추후 확정

4		행정사항

○ 분야별 부서(기관) 협조 요청 : 붙임 1. 2 참조

○ 현장근무에 따른 시간외수당 등 인정

- 초과근무자는 별도 사무실 테그 없이 초과근무 인정

- 수요일과 금요일 근무자에 최대 4시간까지 초과근무 인정

- 주말근무자의 경우 초과근무 4시간 인정 또는 8시간이상 근무시 대체휴무를 선택(‘20년 9월중 대체휴무 사용 가능)

붙임 : 1. 분야별 세부추진 일정 1부.

2. 부서(기관)별 협조사항 1부.  끝

분야별 세부 추진 일정

붙임 1

주 요 내 용		완료일	주관부서	비 고
정류소 이전에 따른 준비
	버스노선 확정 및 운행개선명령	****	버스정책과
	사전안내(버스내부 안내문 부착)	****	버스정책과 경기도
	버스 내부 노선도, 안내방송	****
	중앙정류소 정비(명칭 및 노선도 부착)	****	버스정책과
	가로변 정류소 이전 · 폐쇄	****	버스정책과
	BIT 설치 후 입력내용 수정	****	교통정보과
	노선안내 홈페이지 수정	****	교통정보과
2. 대시민 홍보
	안내입간판 제작 및 설치	****	도시기반시설본부
	보도자료 배포	****	교통운영과
	인터넷 홍보(서울시 홈페이지)	****	교통운영과
	교통전광판(VMS)	****	교통정보과
3. 운수종사자 교육
	운수업체별 운행교육 담당자 교육	*******	버스정책과
	노선버스 운전기사 교육(내부교육)	*****	운수회사
4. 현장점검
	사전 합동점검(시,경찰,공단,사업소 등)	****	교통운영과
5. 상황반 및 현장 대응반 운영
	근무인력 확보 및 연락망 구성	****	교통운영과
	상황반 및 현장 대응반 운영	***** ***	교통운영과
6. 현장 교통관리
	주요지점 현장 교통관리	***** ***	강동경찰서
	모범운전자 교통관리원 운영		강동경찰서
7. 불법 주정차 집중 단속		*****	교통지도과 강동구, 송파구

부서(기관)별 협조사항

붙임 2

구분	담당부서(기관)		추 진 업 무
서울시	교통운영과		· 개통준비 관련업무, 관련부서(기관) 연락체계 구축 · 상황실 및 기동반, 현장모니터링 운영 · 민원사항 / 개선사항 접수 및 개선방안 도출 · 서울시홈페이지 홍보
	버스정책과		· 중앙정류소 명칭 및 ID부여 등 관련업무 · 버스노선 조정 및 운행개선 명령 · 가로변 정류소 정비 등 관련업무, 노선도 부착 · 민원사항 / 개선사항 검토 · 조치
	교통정보과		· 교통전광판(VMS) 홍보 · BIT 설치 및 노선안내 홈페이지 수정
	도시기반시설본부		· 공사 및 현장관리, 홍보 입간판 설치 및 철거 · 민원사항 / 개선사항 검토 · 조치
	관할구청		· 민원사항 접수 및 개선사항 검토
서울 지방 경찰청	교통관리과		· 교통체계 변경 관련 협조 및 모니터링
	교통관리과 (신호운영실)		· 각 지점별 차량신호 / 보행신호 운영 등 협조
	강동경찰서		· 모범운전자 및 교통경찰 배치 등 교통안전 관련사항 협조 - 정류소별 노선버스 및 횡단보도 안내, 우회도로 안내 - 교통운영체계 변경에 따른 홍보 및 운전자 계도 - 교통정리 및 무단횡단 방지 계도, 보행자 안전관리 등
관련기관 및 민간업체	버스정책과	경기도	· 경기도 버스노선 조정 및 운행개선 명령 · 버스 내부 안내문 부착 · 버스 내부 노선도 및 안내방송 교체
		운수업체	· 운수업체별 운행요령 및 안전교육 시행
		버스운송조합	· 민원사항 접수 및 개선사항 건의 · 접수민원 전파(상황실)
	도로교통공단		· 각 지점별 차량신호 / 보행신호 운영 모니터링 등 협조