□ 공사명 :비상발전기 교체 Schedule

1.증산지하차도

구 분	교통통제	철거 및 반출		발전기 반입	설치공사 및 시운전	사용전 검사
		철 거	반 출
철거 및 설치	5.28.23:00~ 5.29.05:00	5.28	5.28.23:00~ 5.29.01:00	5.29.01:00~ 5.29.05:00	5.29.10:00~	6.4일 이후(협의 후)
업무수행자	연간단가 (경찰협의)	철거업체		납품업체	연간단가 및 전기안공관리 대행업체	전기안전공사 (대행업체 및 단가업체 입회)

2.퇴계로지하차도

구 분	교통통제	철거 및 반출		발전기 반입	설치공사 및 시운전	사용전 검사
		철 거	반 출
철거 및 설치	5.29.23:00~ 5.31.05:00	5.29	5.29.23:00~ 5.30.01:00	5.30.01:00~ 5.30.05:00	5.31.10:00~	6.4일 이후(협의 후)
업무수행자	연간단가 (경찰협의)	철거업체		납품업체	연간단가 및 전기안공관리 대행업체	전기안전공사 (대행업체 및 단가업체 입회)