철야작업 조정 계획서

▣ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

▣ 시 공 사 : 삼성물산(주), (주)쌍용건설, 매일종합건설(주)

▣ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

▣ 철야작업 조정기간 : 2017.09.14 ~ 2017.09.30 (17일)

▣ 철야작업 조정사유

- 공정준수 및 구조물 철거에 따른 민원 해소를 위해 기승인 받아 시행중인 933정거장 철야

작업에 대하여, 소규모 인력 투입에 따라 감리원 없이 시공사 책임하에 9월 잔여기간에 대한

철야작업을 시행하고자 철야작업 계획을 (변경)조정하고자 함.

▣ 철야작업 조정일(1일~13일 기시행 완료, 14일~30일 조정)

구 분	2017년 09월										비 고
	1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일
933정거장	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	18:00 ~ 07:00

구 분	2017년 09월										비 고
	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일
933정거장	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	18:00 ~ 07:00

구 분	2017년 09월											비 고
	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일
933정거장	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		18:00 ~ 07:00

▣ 철야작업사항 및 근무자

- 별 첨 #1(철야 작업사항 및 근무자)

작성자 : 현장대리인 : 이 현 구  (인)

확인자 : 책임감리원 : 박 명 주  (인)

* 별 첨 #1

철야작업사항 및 근무자

▣ 현장명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

일 시		933정거장 작업사항	담당자	비 고
09.14(목)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.15(금)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.16(토)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.17(일)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.18(월)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.19(화)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.20(수)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.21(목)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.22(금)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.23(토)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.24(일)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	홍동우 선임	18:00 ~ 07:00
09.25(월)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	안병국 선임	18:00 ~ 07:00
09.26(화)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	안병국 선임	18:00 ~ 07:00
09.27(수)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	안병국 선임	18:00 ~ 07:00
09.28(목)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	안병국 선임	18:00 ~ 07:00
09.29(금)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	안병국 선임	18:00 ~ 07:00
09.30(토)	철야	- #7,8 출입구 8호선 구조물 철거	안병국 선임	18:00 ~ 07:00

※ 철야작업 여건에 따라 근무일 변경될 수 있음.

철야작업 계획 보고

○ 목적

- 서울지하철 9호선 3단계 919공구 933정거장 8호선(석촌역) 구조물 철거에

따른 민원 해소를 위한 철야 작업시 소규모 인력 투입이 예상되므로,

- 발주청 지침에 의거 감리원 입회없이 원청사 책임자 입회를 통하여

안전관리 및 품질관리를 철저히 수행하며 철야작업을 시행하고자 함.

○ 관련 근거

- 서울시도시기반시설본부 도시철도 토목부-10923(2013.11.21)

“휴일작업 현장관리 개선방안 주요 내용 알림”

- 입찰안내서 제3장 계약조건(공사계약일반조건)제18조(휴일 및 야간작업),

제3장 계약조건(일괄입찰 등의 공사계약특수조건)제19조(휴일 및 야간작업),

제3장 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건)제46조(휴일 및 야간작업)

○ 철야 작업 내용

구 분	내 용
현 장 명	서울지하철 9호선 919공구 건설공사
작업위치	933정거장 #7,8 출입구
작업내용	#7,8 출입구 8호선 구조물 철거
작업기간	‘17.09.14~’17.09.30 (매일 19시 ~ 익일 07시)
투입인원	보통인부 2~5명
투입장비	굴삭기(03) 1대, 굴삭기(015) 1대
관 리 자	삼성물산 홍동우 선임(14일~24일), 안병국 선임(25일~30일) (변경시 사전 유선 보고 후 익일 결과 보고 예정)

○ 안전관리 대책

- 안전관리 프로세스 준수

· 작업 전 작업계획 수립 및 승인 → 수시 위험성평가 작성 및 승인 →

TBM 실시 및 위험성평가 교육 → 근로자 투입 및 관리자 현장 상주관리

- 안전관리 예방조치

1. 건설장비 충돌/협착 예방 조치

· 건설장비 안전장치(후방카메라, 협착방지봉, 후진경보음) 설치/작동 확인

2. 콘크리트 해체물 비래 방지

· 장비 작업시 접근 통제 및 작업자 개인보호구 착용 철저

3. 작업자 전도 주의

· 이동통로/조도 확보 및 작업 전후 정리정돈 시행

○ 비상연락망(담당자→현장소장→감리단장→발주청)

담당자	소속	직위	전화번호	담당자	소속	직위	전화번호
홍동우 (안병국)	삼성	공사	************* (*************)	박명주	수성	단장	*************
이상도	삼성	소장	*************	정중규	서울시	팀장	*************