<첨부 #1>

예비준공검사 실태점검 결과

□ 총  괄

기 관		점검대상	점 검 결 과(건)
			서류작성	사진첨부	지적사항	출장부등록
계		101	95	16	19	48
중부수도사업소	급수운영과	8	8	5	0	1
	시설관리과	19	19	2	0	7
서부공원녹지사업소	시 설 과	7	7	0	2	0
중부공원녹지사업소	시 설 과	7	7	0	2	3
서부도로사업소	도로보수과	9	9	0	2	3
	시설보수과	2	2	0	0	0
마 포 구	토 목 과	8	8	0	3	8
성 동 구	공원녹지과	5	5	2	2	3
강 동 구	도 로 과	14	14	7	0	13
	푸른도시과	10	10	0	5	10
송 파 구	도 로 과	6	0	0	0	0
서 초 구	재난치수과	6	6	0	3	(감사과 주관)

□ 주요내용

기  관

부 서

주 요  점 검 내 용

중부수도사업소

급수운영과

(시설관리과)

□대부분 연간단가계약 공사로 예비준공검사 이행 양호

→ 대부분 준공검사 사진이 첨부됨

□일부 건은 출장명령부가 미등록 되어 있음

☞ 건의사항

- 연간단가계약 공사의 경우 기성검사시 제외 요청

→ 건별 작업지시로 공사규모 작고, 기성검사를 실시하고 있으므로 최종 준공시에만 실시 건의

서부공원녹지사업소

시설과

□대상 7건중 6건이 시설공단 감독 위탁 공사로 시설공단 주관으로 예비준공검사 실시

□내부 보고서 미작성, 출장명령부 미등록 등 사업소에서 합동점검에 참여한 근거 미흡

중부공원녹지사업소

시설과

□예비준공검사 실시 및 내부 보고서 작성

☞ 건의사항

- 일상유지보수공사(단가계약), 소액공사, 단기공사 제외

→ 차수별 작업, 기성 준공후 신속한 교통개방, 시설물사용 등으로 예비준공검사 촉박, 따라서 형식적 운영 가능성

서부도로사업소

도로보수과

(시설보수과)

□대부분 예비준공검사를 실시하고 있으나, 일부 단가계약 공사에 대해서는 미실시(시설보수과)

☞ 건의사항

- 연간단가공사의 경우 차수 준공이 많이 발생하고 있어 공사규모 등을 고려하여 선별적으로 시행 검토

마포구

토목과

□예비준공검사 실시계획 수립, 결과보고 등 전반적으로 양호

☞ 건의사항

- 연간단가공사는 차수별 기성지급시 검사를 하고 있으므로, 최종 준공전 예비준공검사 실시 또는 제외

- 소규모공사(공기 1달미만, 3천만원 이하) 제외

성동구

공원녹지과

□예비준공검사시 관련부서 합동점검 실시

☞ 건의사항

- 예비준공검사 명령부 작성보다, 하자 및 공사관리대장 비고란이나, 준공검사조서 참고란 등에 기록토록 건의

- 소액공사, 단기공사(1개월미만 등) 제외 건의

→ 예비준공검사의 실효성 확보 곤란

강동구

도로과

(푸른도시과)

□자체 방침(구청장)에 따라 예비준공검사 실시(재무과 주관)

- 검사시기 : 공사기간에 따라 준공전 7일~1개월전

- 검사대상 : 모든 공사

- 검사조서 전자서식 마련, 검사자 2명이상

- 예비준공검사 조서를 재무과에서 확인

※ 예비준공검사(관련부서 합동)→실시결과보고(검사조서 재무과 제출)→준공검사(예비준공검사 보완여부 확인)→이행실태 확인(감사과)

송파구

도로과

□자체 방침(부구청장)에 따라 예비준공검사 실시(감사과 주관)

- 검사시기 : 공정률 95% 이상 진행시

- 검사대상 : 1억원이상, 연간단가 제외

- 예비준공검사시 주민참여감독자 참여(의견서 제출) 등

※ 일상감사시 예비준공검사대상 통보(감사과)→예비준공검사 실시(주민참여감독자 위촉, 공사와 관계없는 동일 직렬 공무원을 검사자로 지정)

서초구

재난치수과

□자체 방침(부구청장)에 따라 실시(감사과 주관)

- 예비준공검사 대신 감사담당관 주관 현장점검으로 대체

- 검사대상 : 일반 - 2억원이상, 전문 - 1억원이상

- 검사시기 : 공정률 30%, 95% 단계

☞ 건의사항

- 연간단가공사의 기성검사시 제외 검토

※ 점검의뢰(공정률 30%, 95%)→합동점검 및 결과통보(감사과)→공사준공

<첨부 #2>

예 비 준 공 검 사 조 서

문서번호
수 신 자
접수번호

결재

공 사 명
계 약 자			준공예정일
구 분		지 적 사 항		시정․조치사항
시공부서	본 공사
	부대공사
관리부서
감 리 원
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 년 월 일 과 직 성명 (서명) 과 직 성명 (서명) 과 직 성명 (서명) 과 직 성명 (서명) 과 직 성명 (서명) 과 직 성명 (서명) ○○○○○(분임)경리관 귀하

<첨부 #3>

예비준공검사 실시 현황(○/4 분기)

연번	발주기관 (부서)	공 사 명	준공일 (준공예정일)	예비준공검사 실시 여부
				실 시			미실시 사유
				일자	지적건수	주요지적사례

<첨부 #4>

예비준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명
	발주부서		계 약 자
	공사기간	~	계약금액
	예비준공검사일		준공일자

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비준공검사 실시여부 ‣ 예비준공검사 이행사항 적정여부 - 준공일과 비교하여 예비준공검사일 적정여부 - 예비준공검사 서류 작성(사진촬영)여부 - 예비준공검사시 지적사항 유․무
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당
현장점검	‣ 하자발생 여부 ‣ 품질관리 상태 ‣ 기타 시민불편사항 등	※ 지적사항 사진 첨부

2013.  5.

【확 인 자】    소속 :           직급           성명 :         (인)

【점 검 자】    소속 :           직급           성명 :         (인)

<첨부 #4-1>

현  장  사  진

□ 공사명 :
사진설명		【사진 1】

□ 공사명 :
사진설명		【사진 2】