공 사 일 정 계 획

[상수관로 3단계 이설공사, C-LINE 부단수접합]

□ 공사개요

▶	개 요	:	상수관로 3단계 이설공사(C-LINE) 시종점부 부단수접합
▶	공사구간	:	신설관로 D700~D1000mm, L=580m
▶	공사내용	:	부단수접합 2개소(D1350xD700mm, D1350xD1000mm) 담수및세척, 신설관로 점검 등
▶	공사기간	:	'15.09.09 ~ 09.16

□ 공사일정

▶'15.09.09 14:00 : 현장점검 및 아차산3중블록 소출수 해결을 위한 공급관로 연결 플랜지 설치, 퇴수관로 연결, 시점부 공기밸브 설치 등

D1000(L=465m), D700(L=115m), Q=542M3

▶'15.09.10 14:00 : 신설관로 내부 세척을 위한 담수 시행

▶'15.09.10~09.13 : 관로 담수유지 및 누수 등 관상태 확인

▶'15.09.14 10:30 : 관세척 및 퇴수, 시점부 분기관(D700mm) 작업

▶'15.09.15~09.16 : 종점부 연결관 작업

▶'15.09.16 10:30 : 전구간 관로점검 및 관말지역 수압Check

기존관(D1350mm) 절단 및 맹판설치

▶'15.09.17~      : 기존관(D1350mm) 철거작업 및 3단계이설공사 완료보고

▶'15.09.20~      : 공사완료 후 도로포장 시행(우회도로 형성)