계획 1		오리~수원 복선전철 망포~수원간 개통(‘13.11.30 개통)

□ 노선약도

□ 공정추진 현황

ㅇ 공정현황 : ‘13. 4월말 현재 84%

구 분	계	노반	궤도	건축	전력	신호	통신	터널설비
완료예정일	´13.11월	´13.10월	´13.9월	´13.12월	´13.11월	´13.11월	´13.11월	´13.11월
공정율(현재)	84%	96%	95%	25%	21%	32%	30%	32%

□ 개통계획(잠정)

개통 S.O.P 주요업무		일 정	비 고
개통계획 수립		‘13. 8. 30	국토부보고 및 철도공사 통보
종합시험운행	사전점검	‘13. 10. 14
	시설물검증시험	‘13. 10.29~10.31(3일)
	영업시운전	‘13. 11. 4~11.25(22일)
개 통 (예정)		‘13. 11. 30	개통행사 ‘13.11.29

※ S.O.P : Standard Operating Procedure(표준운영절차)

* 수송계획처 및 철도공사 협의 결과에 따라 일정 변경 가능

✠ 주요일정 : 노반출입구 완료(‘13.7.20), 역사내 수전(’13.9.20), 전차선 가압(‘13.1025)

계획 2		경춘선 묵현역사 개통(11.30)

□ 노선도

□ 공사개요

❍ 위    치 : 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 일대

❍ 공사기간 : 착공일로부터 15개월

❍ 연 면 적 : 955㎡ / 지상역 2층, 철골+철근콘크리트조

주차대수 : 43대(장애인 4대 포함)

❍ 홈 지 붕 : 1,700㎡ (5m×170m×2개소, 상대식)

❍ 운행횟수 : 왕복 143회(8량 편성, 2019년 기준)

❍ 공 사 비 : 59억(건축, 노반, 궤도)

□ 향후추진계획

❍ 용지매수 : 6월~8월 협의매수

❍ 공사 실 착공 6월중

❍ 6개월 점검 : 2013.01.30

❍ 개통계획수립(D-3개월) : 2013.08.30

❍ 이용자 점검(D-10) :  2013.11.10

❍ 개통예정일(잠정) :  2013. 11.30(예정)

계획 3		경춘선 신내역사 개통 (12.21)

□ 노선약도

□ 사업개요

(사업내용) 경춘선 망우~금곡간(17.9㎞) 단선→복선전철화

(사업기간) 1997~2013년

(총사업비) 618,254백만원(건축공사 3,800백만원)

(사업효과) 선로용량 증가(30회→101회/일 편도)

(승강인원) 27,632명/일(‘21년기준 : 승차 13,816명, 하차 13,816명)

□ 건축공사 개요

(위  치) 서울시 중랑구 망우동 320번지 일대(신내차량기지 내)

(역  사) 철근콘크리트조 선하역사 3층, 연면적 1,818㎡

(승강장) 상대식 6m×170m×2개소

□ 추진경위 및 향후계획

○ ‘11.10.26 : 신내역사 건축공사 착공

○ ‘12.08.31 : 사업실시계획(변경) 승인

○ ‘12.12.28 : 개발행위허가 승인

○ ‘13.01.16 : 공사 본격추진

○ ‘13.03.26 : 개통 6개월 전 점검

○ ‘13.12.21 : 신내역사 개통 예정(잠정)