Ⅰ-

1

제  장

총    설

2030하수도정비 기본계획

Ⅰ-

1.1 계획의 목적 및 범위

1.2 계획의 지표

1.3 하수관로 현황 및 계획

1.4 하수처리시설 현황 및 계획

1.5 재정계획

2030하수도정비 기본계획

제1장

총   론

<표 1.4-3> 서남 물재생센터 시설현대화 계획

서 남	사업 규모	사업기간(년)	사업비(억원)	상부면적(천㎡)	공원부지(천㎡)
1단계	36만㎥/일	2018	1단계 사업에 대한 사후평가 및 2단계 타당성 검토
2단계	63만㎥/일	2019 ~ 2024	5,250	88	154
		2024	2단계 사업에 대한 사후평가 및 3단계 타당성 검토
3단계	64만㎥/일	2025 ~ 2030	5,330	88	154

1.4.3 총인처리시설 설치계획

<표 1.4-4> 처리구역별 주요시설계획

구 분	사 업 내 용	주 요 시 설	비 고
중 랑	○총인처리시설 신설설치 ○유·출입관로 설치 ○총인처리시설 유입 펌프장설치 ○하수찌꺼기처리시설 보완	○총인처리시설 Q=41.2만㎥/일 ○유입펌프장 1식 ○유·출입관로 ▣ 4.2×1.8×1련 ~ 10.0×1.8×1련, L= 329.7m
난 지		○총인처리시설 Q=32.9만㎥/일 ○유입펌프장 1식 ○유·출입관로 D1350 ~ D2200mm, L=814m
탄 천		○총인처리시설 Q=45만㎥/일 ○유·출입관로 ▣ 2.0×2.0×1련, L= 292.5m
서 남		○총인처리시설 시설용량 Q=70만㎥/일 ○유·출입관로 ▣ D800mm ~ D2400mm, L= 547m

주1) 서울시 4개물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본계획 완료(2014.10)

주2) “중랑”,“난지”,“탄천”,“서남”물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 진행중(2015.7~2016.12)으로 시설용량 및 수질은 기본설계안을 반영함

1.4.4 초기우수처리 시설 설치계획

<표 1.4-5> 4개 물재생센터 초기우수처리시설 단계별 설치계획

구 분		기존대책1)		변 경		비 고
		시설용량(㎥/일)	사업시기(년)	시설용량(㎥/일)	사업시기(년)
중 랑	1단계	500,000	2009 ~ 2015	500,000	2009 ~ 2017	시공중
	2단계	2,510,000	2016 ~ 2022	3,460,000	2018 ~ 2024	기존 460,000㎥/일 시설포함
	3단계	950,000	2023 ~ 2028	-	2025 ~ 2030
	소 계	3,960,000	2009 ~ 2028	3,960,000	2009 ~ 2030	초기우수량 (3Q'-Q)
난 지		2,100,000	2019 ~ 2030	2,100,000	2019 ~ 2025	초기우수량 (3Q'-Q)
탄 천		2,390,000	2016 ~ 2023	2,390,000	2016 ~ 2023	초기우수량 (3Q'-Q)
서 남	1단계	720,000	2009 ~ 2018	720,000	2009 ~ 2018	시공중
	2단계	1,600,000	2019 ~ 2025	3,100,000	2019 ~ 2024
	3단계	1,500,000	2026 ~ 2030	-	2025 ~ 2030
	소 계	3,820,000	2009 ~ 2030	3,820,000	2009 ~ 2030	초기우수량 (3Q'-Q)
계		12,270,000	2009 ~ 2030	12,270,000	2009 ~ 2030

주1) 서울시 4개물재생센터 초기우수처리시설 설치사업 기본계획(2013.8) 참고

주2) 간이공공하수처리시설 서울시(Ⅲ지역) 방류수 수질기준 적용시기에 따라 설치시기 조정계획

주3) 중랑, 서남물재생센터 시설현대화사업 병행시행(현대화사업 지연에 따른 투자시기 조정계획)