첨부2		‘17년 민방위 비상급수시설 확충사업 추진 현황

□ 비상급수시설 예산집행 현황                             (단위: 백만원)

시도	시설·장비명 (위 치)	예산액			계약액 (원인 행위액)	집행액			집행률 (%)
		계	국 비	지방비		계	국비	지방비
서울시	종로구 동묘역, 종로구, 독립문역	137		137	126	126		126	91.9
서울시	성동구 성수1가 685-715 서울숲공원	65	19.5	45.5	62	62	18.6	43.4	95.4
서울시	성북구 석관동 88-5	65		65	55.5	55.5		55.5	85.4
서울시	마포구 상암동 1746 상암11단지	65		65	55	55		55	84.6
서울시	양천구 신정로14길 13	65		65	59	59		59	90.1
서울시	강서구 가양1동 주민센터	85		79	79	79		79	92.9
서울시	구로구 궁동42-4 궁동생태공원	65		65	64.7	64.7		64.7	99.5
서울시	동작구사당동산32-60까치산마을공원	65	19.5	45.5	64.9	64.9	19.5	45.4	99.8
서울시	관악구 보라매동 산 118-6 당곡고등학교	73		73	65	65		65	89.1
서울시	강동구 둔촌동 일자산	85		85	65	65		65	76.5

□ 비상급수시설별 추진 공정

시도	시설명 (위 치)	계획	공정관리							비 고
		규모[㎡]	계획수립	부지확보	설계발주	설계완료	(공사)발주	착공	준공(납품)
서울시	종로구 동묘역, 종로구, 독립문역	2600	1월	1월	1월	1월	1월	2월	6월	3개소
서울시	성동구 성수1가 685-715 서울숲공원	100	1월	7월	8월	8월	9월	10월	10월
서울시	성북구 석관동 88-5	150	1월	9월	9월	9월	9월	10월	12월
서울시	마포구 상암동 1746 상암11단지	90	1월	7월	7월	7월	7월	8월	12월
서울시	양천구 신정로14길 13	150	1월	7월	7월	7월	8월	9월	10월
서울시	강서구 가양1동 주민센터	140	1월	9월	9월	9월	9월	9월	12월
서울시	구로구 궁동42-4 궁동생태공원	102	1월	5월	5월	5월	5월	5월	7월
서울시	동작구 사당동 산32-60	112	1월	3월	6월	6월	6월	9월	11월
서울시	관악구 보라매동 산 118-6 당곡고등학교	80	1월	8월	8월	8월	8월	8월	9월
서울시	강동구 둔촌동 일자산	80	1월	9월	9월	9월	10월	10월	12월

□ 문제점 및 건의사항

○ 비상급수시설 개발 부지 협의 시 공공기관(공원, 학교, 공기관 등)에서도 기피 시설로 거부하는 경우가 대다수이므로

○ 부지 확보가 용이하도록 민방위기본법 및 관련 지침 등을 개정할 필요가 있음

※ 학교 등에 설치된 기존 민방위 비상급수시설도 철거 및 이전 요청이 있어 향후 확보에 어려움이 있음

□ 향후 계획

○ 2018년 비상급수시설 확충 사업 추진

- 확충 개소수   : 13개소

- 시비 확보비용 : 854,000천원

- 국비 지원비용 :  19,500천원(1개소)