[첨부1]

건설사업관리정보시스템(One-pmis) 시스템운영 평가(제3차) 대상사업

순번	부서	사업명	착수일	준공예정일	비고
1	토목부	강남순환도시고속도로 건설(4공구)	2001-12-29	2014-05-19
2	토목부	강남순환도시고속도로 건설(5공구)	2007-06-29	2014-05-19
3	토목부	강남순환도시고속도로 건설(6-1공구)	2007-06-29	2014-05-31
4	토목부	강남순환도시고속도로 건설(6-2공구)	2007-06-29	2014-05-31
5	토목부	강남순환도시고속도로 건설(7-1공구)	2007-06-29	2014-05-31
6	토목부	강남순환도시고속도로 건설(7-2공구)	2007-06-29	2014-05-31
7	토목부	강남순환도시고속도로 건설(8공구)	2002-07-03	2014-05-30
8	토목부	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	2008-10-15	2013-12-31
9	토목부	구리암사대교 건설공사	2006-03-23	2013-12-31
10	토목부	남부순환로(개봉역주변) 구조개선	2007-09-03	2013-06-30
11	토목부	남부순환로~오정대로삼거리간 도로개설공사	2010-09-01	2013-09-17
12	토목부	도림교확장공사	2012-06-01	2013-05-31
13	토목부	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	2012-06-13	2014-06-30
14	토목부	동부간선도로 확장공사(2공구)	2008-12-26	2015-12-31
15	토목부	동부간선도로 확장공사(3공구)	2008-02-12	2015-12-31
16	토목부	방화대교 남단 접속도로 건설	2005-10-05	2013-05-31
17	토목부	서부트럭 터미널앞 지하차도 건설공사	2008-02-29	2013-04-18
18	토목부	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	2010-12-01	2013-12-31
19	토목부	선사로~고덕지구간 도로확장공사	2008-12-31	2013-12-31
20	토목부	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	2010-10-08	2017-12-31
21	토목부	양화대교 구조개선공사	2010-02-22	2013-02-28
22	토목부	용마터널건설 (민간투자시설사업)	2009-11-13	2014-11-20
23	토목부	월드컵대교건설공사	2010-03-18	2015-08-22
24	토목부	율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업	2010-09-30	2013-12-31
25	토목부	응봉교확장 및 성능개선공사	2008-10-17	2013-12-31
26	토목부	잠실사거리 지하광장 조성공사	2010-11-23	2013-12-30
27	토목부	천호대로(광나루역) 확장 공사	2010-09-30	2014-02-20
28	건축부	IT-Complex 건립공사	2009-04-02	2014-10-06
29	건축부	강북 시립미술관 건립공사	2011-02-10	2013-05-16
30	건축부	글로벌클러스터빌딩 건립공사	2010-06-18	2013-01-24
31	건축부	서남권 돔야구장 건립공사(T/K)	2009-02-04	2013-12-31
32	건축부	숭례문 방재관리시스템 설치공사	2012-08-24	2013-04-20	단기
33	건축부	운현궁 보수정비공사	2012-11-26	2013-03-30	단기
34	건축부	장애인 행복서비스센터 건립공사	2012-01-26	2013-08-07
35	건축부	장충체육관 리모델링 공사	2012-05-30	2013-10-21
36	설비부	난지 물재생센터 고도처리시설 설치사업(T/K)	2009-07-30	2013-02-28
37	설비부	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사	2011-10-24	2013-10-31
38	설비부	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	2009-11-09	2015-08-09
39	설비부	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	2012-11-13	2015-02-02
40	설비부	중랑 물재생센터 고도처리 및 시설 현대화 사업(T/K)	2009-02-12	2014-01-18
41	설비부	탄천 물재생센터 고도처리시설 설치사업(T/K)	2009-01-09	2013-04-30
42	공공시설부	동대문디자인플라자＆파크건설공사	2009-03-30	2013-07-31
43	공공시설부	동대문디자인플라자＆파크건설전기공사	2009-03-31	2013-07-31
44	공공시설부	동대문디자인플라자＆파크건설 정보통신공사	2009-02-26	2013-07-31
45	도시철도공무부	경전철 우이~신설 1공구 건설공사	2009-09-15	2014-09-14
46	도시철도공무부	경전철 우이~신설 2공구 건설공사	2009-09-15	2014-09-14
47	도시철도공무부	경전철 우이~신설 3공구 건설공사	2009-09-15	2014-09-14
48	도시철도공무부	경전철 우이~신설 4공구 건설공사	2009-09-15	2014-09-14
49	도시철도공무부	서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K)	2010-09-15	2016-03-17
50	도시철도공무부	서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사(T/K)	2010-09-17	2016-03-21
51	도시철도토목부	서울지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사(건축)	2012-11-01	2014-02-13	턴키
52	도시철도토목부	서울지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사(T/K)	2008-05-30	2014-02-01
53	도시철도토목부	서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사(T/K)	2008-05-30	2014-02-01
54	도시철도토목부	서울지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사(T/K)	2008-05-30	2014-02-01
55	도시철도토목부	서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K)	2010-02-19	2016-02-17
56	도시철도토목부	서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K)	2009-12-30	2015-12-29
57	도시철도토목부	서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K)	2009-12-30	2015-12-29
58	도시철도토목부	서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K)	2009-12-30	2015-12-29
59	도시철도설비부	경전철 우이~신설 송변전 건설공사	2009-09-15	2014-09-14
60	도시철도설비부	경전철 우이~신설 신호 건설공사	2009-09-15	2014-09-14
61	도시철도설비부	경전철 우이~신설 전차선 건설공사	2009-09-15	2014-09-14
62	도시철도설비부	경전철 우이~신설 통신 건설공사	2009-09-15	2014-09-14
63	도시철도설비부	경전철 우이~신설 SE	2009-09-15	2014-09-14

[첨부2]

2012년 4/4분기 One-PMIS 운평평가 항목 및 배점

부서별 평가 부문

평가항목	평가비중	평 가 개 요
활용 실적	40%	- '행정정보연계 문서실적'부서별 평가 - 공사관련자료 시스템내 보관여부 검토
부진 사업	50%	- 90%미만 부진공정 조치 평가
부서관심도	10%	- 부서장 등 사용자 접속 실적 평가

계약자별 평가 부문

평가항목	평가비중	평 가 개 요
1,2차 평가 반 영	20%	- 1,2차 평가내용 반영
공사 개요	20%	- 공사개요 입력자료 오류 평가 (건설알림이 공개자료 체크 여부)
공정 보고	20%	- 건설알림이 공개 '공정진척보고' 누락건수 평가
웹 카메라	20%	- 웹카메라 설치현장에 대한 웹카메라 고장 건수 평가 - 웹카메라 미설치 현장 공정보고 합산
공정 개정	20%	- 공종(엑티비티)관리 충실도 평가

평가항목 배점표

❍ 부서별 평가

구 분	항 목	배점	등 급				비 고
			탁월	우 수	보 통	미 흡
부서별 (10점)	사업별 평균 활용실적 (행정정보연계)	4	4	3.8	3.6	3.4
			(91~120건)	(61~90건)	(31~60건)	(0~30건)
	부진사업 비율 (공정율 90%미만)	5	5	4.7	4.4	4.1
			(0~25%)	(26~50%)	(51~75%)	(76~100%)
	부서관심도 (시스템 접속횟수)	1	1	0.9	0.8	0.7
			(30회이상)	(21~30회)	(11~20회)	(0~10회)

※ 부서별 평가는 사업 건수의 경중을 감안하여 건수비례 가중치 부여(1~4%)

사업건수	1~5건	6~10건	11~15건	16~20건 이상	20건 이상
가 중 점	0%	1%	2%	3%	4%

❍ 계약자 평가

구 분	항 목	배 점	등 급			비 고
			우 수	보 통	미 흡
계약자별 (10점)	1차평가	1	1	0.9	0.8
	2차평가	1	1	0.9	0.8
	공사 개요	2	2	1.8	1.6
	공정 보고	2	2	1.8	1.6
	웹 카메라	2	2	1.8	1.6
	공정 개정	2	2	1.8	1.6

[첨부3-1] 기관(부서별 평가총괄표

기관(부서)별 평가 총괄표

부서명 (사업건수)	사업 건수	순위		사업건수보정		기관(부서)평가 점수											비고
				종합 점수	가중치	계 (10)		활용실적				부진사업			접속실적
								건수	평균	점수 (4)		건수	평균	점수 (5)	건수	점수 (1)
합 계	63
토 목 부 (27건)	27				4%												1
건 축 부 (8건)	8				1%												2
설 비 부 (6건)	6				1%												3
공공시설부 (3건)	3				0%												4
도철공무부 (6건)	6				1%												5
도철토목부 (8건)	8				1%												6
도철설비부 (5건)	5				0%												7
※ 사업 건수 보정 가중치
1~5건			6~10건				11~15건				16~20건 이상				20건 이상
0%			1%				2%				3%				4%

[첨부3-2] 간부활용실적

One-PMIS 간부활용현황

2013. 1.14 현재

연번	본부 직책명	성 명	아이디	총 접속횟수	최근접속일	비고
	접속총횟수
1	본부장
2	시설국장
3	시책사업추진단장
4	도시철도국장
5	건설총괄부장
6	토목부장
7	건축부장
8	설비부장
9	공공사업부장
10	도철설계부장
11	경전철 추진반장
12	도철공무부장
13	도철토목부장
14	도철건축부장
15	도철설비부장
16	기획예산과장
17	토목총괄과장
18	건축총괄과장
19	열빛총괄과장
20	총괄과장
21	계획과장
22	계획과장
23	공정관리과장
24	9호선2과장
25	건축계획과장
26	송변전과장

[첨부4] 단위사업별 평가 총괄표

건설사업관리정보시스템(One-pmis) 시스템운영 평가(제3차) 평가 총괄

연번	사업명	계 (10)	1,2차평가		공사개요(억원)			공종개정		웹카메라		미설치	공정보고			부서평가 부진사업				비고
			1차 (1)	2차 (1)	사업비	도급액	점수 (2)	공종	점수 (2)	고장일수	점수 (2)	점수 2	기준보고	최종보고	점수 (2)	계획	실적	진척	점수
1	강남순환도시고속도로 건설(4공구)	0			3,037	1,609		201					결재완료	2013-01-15		16.45	16	97
2	강남순환도시고속도로 건설(5공구)	0			3,947	3,947		110					결재완료	2012-12-31		62.47	56.33	90
3	강남순환도시고속도로 건설(6-1공구)	0			1,423	1,423		101					결재완료	2013-01-15		76.24	58.56	77
4	강남순환도시고속도로 건설(6-2공구)	0			1,151	민자		100					작성중	2012-12-31		76.43	64.8	85
5	강남순환도시고속도로 건설(7-1공구)	0			965	민자		100					결재완료	2013-01-15		68.71	40.11	58
6	강남순환도시고속도로 건설(7-2공구)	0			1,820	1,820		112					결재완료	2012-12-31		97.05	47.86	49
7	강남순환도시고속도로 건설(8공구)	0			3,681	2,216		115					결재완료	2012-12-31		13.93	12.67	91
8	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	0			1,135	0		1					결재완료	2012-12-31		50.47	52.4	104
9	구리암사대교 건설공사	0			3,645	1,864		33					결재완료	2012-12-31		80.05	79	99
10	남부순환로(개봉역주변) 구조개선	0			586	0		12					결재완료	2012-12-31		71.81	70.58	98
11	남부순환로~오정대로삼거리간 도로개설공사	0			908	0		1					결재완료	2012-12-31		12	17.64	147
12	도림교확장공사	0			37	19		112					미작성	2012-10-15		58.75	0	0
13	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	0			240	110		16					미작성			4.18	0	0
14	동부간선도로 확장공사(2공구)	0			1,921	1,147		1					결재완료	2013-01-15		25.11	25.12	100
15	동부간선도로 확장공사(3공구)	0			794	472		1					결재완료	2012-12-31		42.57	42.3	99
16	방화대교 남단 접속도로 건설	0			1,098	661		1					결재완료	2013-01-15		92.4	89.9	97
17	서부트럭 터미널앞 지하차도 건설공사	0			820	653		12					결재완료	2012-12-31		88.47	79.98	90
18	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	0			273	177		8					작성중	2012-12-31		34.62	33.8	98
19	선사로~고덕지구간 도로확장공사	0			1,272	347		1					작성중	2012-12-31		39.3	37.02	94
20	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	0			2,089	149		1					결재완료	2012-12-31		10.54	10.9	103
21	양화대교 구조개선공사	0			415	0		1					결재완료	2012-12-31		100	99.3	99
22	용마터널건설 (민간투자시설사업)	0			1,864	민자		25					결재완료	2012-12-31		58.34	55.71	95
23	월드컵대교건설공사	0			3,550	1,710		1					결재완료	2012-12-31		13	13.03	100
24	율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업	0			854	250		33					결재완료	2012-12-31		26.73	26.07	98
25	응봉교확장 및 성능개선공사	0			786	401		1					결재완료	2013-01-15		69.8	67.13	96
26	잠실사거리 지하광장 조성공사	0			383	383		1					결재완료	2012-12-31		39.94	38.1	95
27	천호대로(광나루역) 확장 공사	0			809	0		1					결재완료	2012-12-31		26.5	30.4	115
28	IT-Complex 건립공사	0			2,026	0		5					결재완료	2012-12-31		55.11	46	83
29	강북 시립미술관 건립공사	0			562	230		104					결재완료	2012-12-31		80.72	80.73	100
30	글로벌클러스터빌딩 건립공사	0			296	167		1					결재완료	2012-12-31		100	96.15	96
31	서남권 돔야구장 건립공사(T/K)	0			1,583	0		106					결재완료	2013-01-15		68.25	63.1	92
32	숭례문 방재관리시스템 설치공사	0			11	11		0					미작성			0	0			단기
33	운현궁 보수정비공사	0			1	1		0					미작성			0	0			단기
34	장애인 행복서비스센터 건립공사	0			49	31		1					결재완료	2013-01-15		29.84	29.81	100
35	장충체육관 리모델링 공사	0			104	104		24					결재완료	2012-12-31		11.98	11.31	94
36	탄천 물재생센터 고도처리시설 설치사업(T/K)	0			879	879		1					결재완료	2012-12-31		97.51	93.47	96
37	중랑 물재생센터 고도처리 및 시설 현대화 사업(T/K)	0			3,272	2,997		1					결재완료	2012-12-31		43.72	50.58	116
38	난지 물재생센터 고도처리시설 설치사업(T/K)	0			443	443		108					결재완료	2012-12-31		99.32	94.32	95
39	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	0			3,060	2,786		312					결재완료	2013-01-15		20.87	19.51	93
40	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사	0			67	67		16					결재완료	2012-12-31		35.16	33.62	96
41	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	0			750	635		33					결재완료	2012-12-31		0.27	0.37	137
42	동대문디자인플라자＆파크건설공사	0			2,858	2,736		1					결재완료	2013-01-15		87.82	87.82	100
43	동대문디자인플라자＆파크건설전기공사	0			337	258		1					결재완료	2012-12-31		62.87	62.87	100
44	동대문디자인플라자＆파크건설 정보통신공사	0			163	64		1					결재완료	2012-12-31		76.82	73.57	96
45	경전철 우이~신설 1공구 건설공사	0			1,250	1,250		143					결재완료	2012-12-31		67.31	56.43	84
46	경전철 우이~신설 2공구 건설공사	0			1,157	1,157		157					작성중	2012-12-31		67.22	47.1	70
47	경전철 우이~신설 3공구 건설공사	0			1,130	967		112					결재완료	2012-12-31		68.51	44.33	65
48	경전철 우이~신설 4공구 건설공사	0			1,006	1,006		109					결재완료	2013-01-15		69.98	53.81	77
49	서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K)	0			1,345	1,280		484					결재완료	2012-12-31		14.55	14.35	99
50	서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사(T/K)	0			1,056	963		1					결재완료	2012-12-31		14.71	14.57	99
51	서울지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사(T/K)	0			996	996		1225					결재완료	2012-12-31		71	69.44	98
52	서울지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사(건축)	0			57	57		0					작성중	2012-12-31		0	0			턴키
53	서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사(T/K)	0			1,506	1,506		3118					결재완료	2013-01-15		65.7	65	99
54	서울지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사(T/K)	0			1,132	0		23					결재완료	2013-02-28		64.4	62.44	97
55	서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K)	0			2,041	2,041		302					결재완료	2012-12-31		19.64	19.05	97
56	서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K)	0			1,579	1,532		313					결재완료	2013-01-15		20	20.59	103
57	서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K)	0			2,082	1,708		257					결재완료	2012-12-31		20.38	20.26	99
58	서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K)	0			1,377	1,377		311					결재완료	2012-12-31		20.05	18.91	94
59	경전철 우이~신설 SE	0			46	46		86					결재완료	2012-12-31		42.86	12.7	30
60	경전철 우이~신설 송변전 건설공사	0			157	157		12					결재완료	2013-01-15		44.06	10	23
61	경전철 우이~신설 신호 건설공사	0			382	382		186					결재완료	2012-12-31		43.18	10	23
62	경전철 우이~신설 전차선 건설공사	0			96	96		13					결재완료	2013-01-15		20	8	40
63	경전철 우이~신설 통신 건설공사	0			213	213		176					결재완료	2013-01-15		29.48	0

[첨부5] 기배부

건설알림이 및 건설사업관리시스템(One-PMIS) 사업별 자체 점검표

사 업 명		점 검 일
시행기관		행정구역
점 검 자

□ 항목별 자체 점검결과 및 조치내역

분야	자체 점 검 항 목 별 결 과		보완․조치내역	비고
	점검항목	자체 점검결과
공사개요	1. 위치			필수
	2. 기간			필수
	3. 시행기관			필수
	4. 감리사			-
	5. 시공사			필수
	6. 사업비			필수
	7. 도급액			필수
	8. 조감도			필수
	9. D-Day			D-Day일
	10.공정현황			달성 %
계약현황	11.도급현황			필수
	12.하도급현황			해당 없을 경우 "없음"
집행현황	13.도급현황			최근 회수
	14.하도급현황			해당 없을 경우 "없음"
공정사진	15.최신자료 게시일			최신사진 게시일 기재
웹카메라	설치, 정상운영여부			설치된 경우 수량 기재
공정산정기초	적정 엑티비티 검토			One-PMIS
공정보고	공정진척보고
공정	부진사업 검토
자료관리	설계도서 및 내역보관 검토

※ 지적이상 적출 후 조치된 내역 기재하고 자체점검결과 건설총괄부 송부

[첨부6-1]

1차 평가 결과

1차 101개 사업  '12. 7. 19 ~ 7. 25 (결과보고 7.27)

구 분	사 업 명
우수 (9)	- 경전철 우이~신설 SE - 경전철 우이~신설 송변전 - 경전철 우이~신설 신호 - 경전철 우이~신설 전차선 - 경전철 우이~신설 통신 - 서울지하철 7호선 연장 704공구 (통신) - 서울지하철 7호선 연장 서울~부천구간 전차선 - 서울지하철 7호선 연장 서울~부천구간 신호설비 - 서울지하철 7호선 연장 서울~부천구간 정보통신
미흡 (6)	- 강남순환도시고속도로 6-2공구 - 우이천 하천정비 - 도림천상류 관악산 저류조 - 도림교 확장공사 - 장충체육관 리모델링 - 난지 물재생센터 고도처리시설

[첨부6-2]

2차 평가 결과

2차  97개 사업  '12. 9.  3 ~ 9. 12 (결과보고 9.14)

구 분	사 업 명
우 수 (19개현장)	-공항로등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선 공사 -경전철 우이~신설 건설공사 -서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 -서울지하철 9호선 915,918,919,920,921,922공구 -서울지하철 7호선 연장 701,702,703,704공구 건설공사
미흡 (16개현장)	-강남순환도시고속도로 건설 4,5,6-2,7-2, 8공구 -우면산 산사태 복구공사(1, 2, 3공구) -헌릉로(세곡임대주택단지~헌릉IC)확장공사 -중랑천수계 친수유량 공급관로부설공사(1,2공구) -장충체육관 리모델링 공사 -난지 물재생센터 고도처리시설 설치사업(T/K) -경전철 우이~신설 통신 건설공사 -서울지하철 7호선 연장 704공구 건설공사(기계,통신)