청계천 무명교 신설(확장) 검토

청계천 하류에 폭이 협소한 무명교량으로 보행자와 자전거 이용자가 혼재된 상태로 이용되고 있어, 보행환경 개선 및 안전사고 예방을 위한 보행 교량   신설(확장)에 대한 검토임.

□ 관련근거

○ 성동구 치수과-652(2021.1.15.) : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사 관련 협조요청

⇒ 중랑천 합류부 청계천 하류부에 위치한 무명교를 신설(확장)하여 자전거 도로와 보행로 분리 요청.

□ 무명교 현황

○ 위치 : 청계천 하류(성동구)

○ 규모 및 형식 : B=4.0m, L=95.0m, RC 라멘교

○ 설치연도 : 20년 이상(추정)

○ 이용현황 : 폭이 협소한 교량으로 보행자와 자전거 이용자 혼재되어 이용하고 있어 보행 환경이 열악한 상태임

□ 교량 신설, 확장(안)

구분	1안(신설)	2안(기존 교량 확장)
내용	기존 교량 활용 신설교량 추가	기존 교량 확장
형식
구조	- 상부 : 강재 거더 - 하부 : 강관 말뚝	- 상부 : 강재 브라켓
규모	- B=3m, L=100m	- B=3m, L=100m
장단점	시공성, 안정성 및 품질확보 기존 교량 이용자 안전확보	공사비 저렴 및 공사기간이 짧음. 기존 교량 슬래브의 단부가 얇아 앙카 시공시 안정성 취약 확장공사중 기존 교량 이용자 불편초래 및 안전사고 위험
공사 기간	6개월	4개월
소요 예산	12억원	6억원
검토 의견	- 시공성, 품질관리 및 안정성 확보 등에 유리한 1안(신설)이 적정한 것으로 검토됨	기존 교량 노후, 교량재질 상이 등 안정성 확보에 어려움이 있어 부적정.
검토안	○

□ 검토의견

○ 상기 검토내용과 같이 교량을 신설(추가)하는 것이 합리적이라 판단됨.

※  다만, 중랑천 생태회복 및 친수문화조성공사를 계획, 총괄 추진하고 있는

본청 소관부서(하천관리과)의 공사방법 및 시행방안 결정이 필요.