문서번호	복원사업담당관-945
보존기간	3년
결재일자	2005.03.11.
공개여부	공개
방침번호	청계천복원추진본부장 방침 제(52)호

★담당자	복원사업담당관	복원사업단장	청계천복원추진본부장
협 조
	3팀장
	하천관리팀장

청계천 유지용수 공급시설 운영관련

현안사항 회의 결과 보고

청계천복원추진본부

(복원사업담당관)

청계천 유지용수 공급시설 운영관련

현안사항 회의 결과 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 회의개요

○ 일     시 : 2005. 3. 8(화) 14:00

○ 장     소 : 청계천복원 추진본부 2층 회의실

○ 참 석 자 : 사업담당관, 하천관리팀장, 공사3담당관(김훤기 이재성)

뚝도정수사업소 보수과장(강명원), 서울숲추진반 건축팀장(권영섭)

시설관리공단 인수팀장(민병찬)

○ 회의안건

- 시운전 일정계획에 따른 문제점 검토

․ 전기설비 사용을 위한 사용료 정산방안(모자계량방식 제외에 따른 사용료 정산)

․ 전기설비 안전관리자 선임(수전개시 시점부터 안전관리자 선임 요청)

․ 공사 준공이후 비용정산 방안(사용전력량, 슬러지처리)

- 서울숲 용수공급에 따른 문제점 검토

․ 전력사용량 및 용수사용량 정산방안

․ 청계천과 물공급 시기 차이로 서울숲 우선 물공급시 공급설비 관리방안

□ 회의결과

○ 뚝도정수장 유지용수 공급시설

- 공사중이라 모자계량방식을 채택할 수없음에 따라 전기사용료는 각 시설의 설비용량 비율에 따라 기본요금을 적용하고 전력요금은 적산전력량계에 의거 사용량에 따라 요금 정산

전기요금 = 기본요금(피크치요금) + 전력량요금(사용량요금)

․ 기본요금(피크치요금) : 설비용량에 따른 비율정산

․ 전력량요금(사용요금) : 적산전력량계에 의한 요금정산

※ 시설관리공단 위탁관리 이후에는 별도 한전과 협의 모자계량방식 채택 검토(공단)

- 전기안전관리자는 공사기간중에는 공사3담당관에서 전기안전관리자를 선임하고 준공후 시설물을 인계받은 시설관리공단에서 선임을 원칙(공사중이라도 시설관리공단 직원 선임 가능시 공단과 협의 결정)으로 하고, 책임분계점은 계통상 확실한 구분이 곤란하므로 도면에 표시하여 결정

→ 공사3담당관이 뚝도정수수장과 협의 결정하여 공문시행

- 활성탄 및 슬러지 처리비용 정산은 사용량을 기준으로 정산

․ 활성탄 투입비용 : 활성탄 사용량 기준 정산

․ 슬러지 처리비용 : 원수 사용량 기준 정산

- 공급설비에 대한 기술습득 및 서울숲 물공급을 위하여 시운전시부터 시설관리공단 관리직원 합동근무 추진(최소인원 투입(주간), 향후 유지용수 공급에 대비)

※ 공사 준공시까지 유지용수 설비에 대하여 시공사에서 관리될 수 있도록 조치

- 경비인원 배치 (공사3담당관 → 시공사 통보)

- 시운전이후 준공시까지 유지용수 공급계획(상시유량 공급시기) 결정후 추가비용 정산방안 검토

○ 서울숲 용수 공급시설

- 서울숲은 2005.6월초에 개장 예정이고, 용수공급 시기는 공정상 4월중순 이후로 예상됨.(공급시기는 서울숲에서 세부계획 수립후 별도 요청)

- 서울숲 용수공급시설은 서울숲에서 무인 원격제어될 수 있도록 구성.

- 용수 사용료 정산은 용수에 대한 단위단가(ton당)를 산출하여 용수사용량으로

비용을 정산하는 방안으로 추진(상수도 요금 적용 검토 680원/톤당)

※ 중랑하수처리장 고도처리수도 동일방법으로 정산 추진

□ 향후계획

○ 회의결과와 같이 추진

# 덧붙임 : 참석자 명단 1부.