청광종합건설(주)

서울시 강남구 언주로 550 청광빌딩(역삼동688-5)

TEL : 02-576-3045  FAX : 02-3461-6334

문서번호	청광토목 제 15- 09호	시행일자	2015. 09.24
수 신	서울특별시 중랑물재생센터
참 조	물재생과, 관리과
제 목	제2처리장 유량조정 및 침전조 설치공사의 금차(1차)분 공기연장 건

1. 귀 센터의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 센터에서 발주하여 계약한 「제2처리장 유량조정 및 침전조 설치공사」의  발주처 계     획 변경으로 절대공기가 부족하여 금차분 준공기간을 아래와 같이 연장 요청 합니다.

- 아       래 -

구 분	금 차 분	비 고
당초 공사기간	2014. 12. 29 ~ 2015. 09. 30	총 차분 공사기간 2014. 12. 26 ~ 2015. 12. 20
변경 공사기간	2014. 12. 29 ~ 2015. 12. 20

끝.