			마포구 사무전결처리 규칙 제5조에 의거 복지교육국장 전결을 확인함
문서번호	교육청소년과-5216		★주무관		청소년지원팀장		교육청소년과장		복지교육국장
문서공개	공개
보존기간	5년
결재일자	2017.04.07.
			협조
“함께 꿈꾸는 마포, 교육문화도시로 가자”
청소년들이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 시설 조성 계획
2017.4.
복지교육국 (교육청소년과)

청소년들이 안심하고 이용할 수 있는 시설 조성 계획

준공 후 28년이 경과하여 안전성 문제가 제기되고 있는 구립 망원청소년문화센터 외벽 및 옥상에 대한 보수를 통하여 청소년들이 안심하고 이용할 수 있는 시설을 조성하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□ 청소년기본법 제5조(청소년의 권리와 책임)

□ 청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치·운영)

□ 2017년 서울시 주민참여예산 선정결과(재정관리담당관-10382)

Ⅱ		시설 현황

□ 소 재 지 : 월드컵로 25길 164(망원동)

□ 시설규모 : 지하1층/지상3층, 974㎡

□ 문 제 점

○ 1989년 준공하여 현재 망원동 일대 청소년들의 자치활동 및 문화활동 공간으로 연인원 10만여명의 청소년 및 지역주민이 이용하는 다중시설임

○ 2015년 이후 시설물의 구조적인 문제점이 드러나기 시작하여 한국청소년활동안전센터에 컨설팅을 의뢰한 결과 토목분야 C등급 판정을 받아 시설개보수가 필요한 상황임

Ⅲ		공사 개요

□ 공사 시기 : 2017. 6월 이전

□ 공사 내용

○ 외벽(벽돌면) 4개면 방수 및 도장

- 외벽 마감·줄눈 손상이 심하여 우기 시 시설 내부로 우수유입

○ 옥상 전체 미장 및 방수

- 옥상 바닥 및 도장 파손으로 우기 시 시설 내부로 우수 유입 우려가 있음

○ 배수관 전체 교체

- 배수관 노후 및 파손으로 배수가 원활하지 않음

□ 현장사진

Ⅳ		소요 예산

□ 40,000천원(서울시 주민참여예산)

(단위:천원)

구분	내용	금액	비고
외벽	외벽(869㎡) 방수·도장 배수관 교체	27,000
옥상	옥상 미장(42㎡) 및 방수(221㎡)	13,000

Ⅴ		추진 일정

□ 예산 교부신청 및 간주처리 : 2017. 4월 중

□ 공사 발주 및 착공  : 2017. 5월 중

붙임 : 2017년 서울시 주민참여예산사업 선정결과 공문.  끝.