<서식 1>

우이119안전센터 재건축 계획서

□ 사 업 명 : 우이119안전센터 재건축공사

□ 추진목적

○ 준공 후 30년이 경과 된 노후 건축물로서  정밀안전진단결과 D급 판정으로 3교대 조직 개편에 따른 사무공간 부족 등 열악한 근무환경을 개선하고, 공공청사의 안전성을 확보 대시민 소방서비스 향상을 위하여 119안전센터를 재건축 하고자 함

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2015.1월 ~2015.12월

○ 사업내용(위치, 면적 등)

-위   치 : 강북구 삼각산로 111(수유동 605-347)

-규   모 : 3/1층 연면적 700㎡내외 재건축

-내   용 : 사무공간 확보, 직원 편의시설 확보, 민원휴게시설확보

○ 사 업 비 : 1,943백만원

□ 추진계획

○ 연차별 사업비

(단위 : 백만원)

총 사업비	2015년	2016년	2017년	2018년
1,943	1,943

○ 당해연도 추진일정 및 사업비

추진내용 (단위 : 백만원)	1/4	2/4	3/4	4/4
1,943	89	1,141	400	313

□ 기대효과

○노후 소방청사 재건축으로 공공청사 안전성 확보

○3교대 조직개편에 대비한 부족한 사무 공간 확보

<서식 2>

재산매입,신․증축 검토 의뢰서

1. 사업의 구분

사업구분	■ 시 사업 □ 자치구 지원사업 □ 특별교부금 사업
신규 및 연차사업구분	■ 신규사업 □ 연차사업
사업비 구분	■ 사업비 100억원 미만 □ 사업비 100억원 이상 □ 사업비 500억원이상 □ 사업비 1,000억원이상

2. 사업개요

사 업 명	우이119안전센터재건축공사	사업기관(부서)	강북소방서(소방행정과)
사업기간(개월)	2015.1 ~ 2015.12(12개월)	총사업비(천원)	1,943,566
사업목적	❍사업취지 : 노후 소방청사 재건축으로 공공청사 안전성 확보 ❍필 요 성 : 3교대 조직개편에 대비한 부족한 사무 공간 확보 ❍기대효과 :소방청사 기능 확보로 대 시민 소방서비스 향상 및 안전사회 기여
사업내용	❍사업위치 : 강북구 삼각산로 111 ❍사업규모 : 부지면적 : 960㎡, 건물면적 : 700㎡(지하1 /지상3) ❍세부내용 : 사무공간 확보, 직원 편의시설 확보, 민원인 휴게시설확보, 체험교실 확보 등
예산구분	●당년도집행 ❍차년도예산
사업비	❍총 계 : 1,943,566천원(토지 : 천원, 건물 : 1,943,566천원)
	❍채원별 : ■ 전액시비 □ 특별교부금 □ 국시비 매칭 □ 기타
	❍회계별 : ■ 일반회계 □ 특별회계 □ 기타

3. 상위계획(마스터플랜)에의 적합성 여부

계 획 명	우이119안전센터 재건축 공사
근거법규	본부 소방행정과-10252(2014.4.21.)호『소방청사개축 등 중기추진계획』
계획취지	노후 소방청사 재건축으로 공공청사 안정성 확보 3교대 조직개편에 대비한 부족한 사무공간 확보

4. 사업비 세부내역

가. 산출내역

구 분	산출기초(천원)	금 액(천원)
총 계		1,943,566천원
￭ 2015년 재건축공사 시설비(자산취득비 등 포함)	○ 시 설 비 : 1,755,766천원 - 건축비 : 2,141,000원*2.6%*700㎡=1,537,666,천원 - 철거 및 부대공사 등 : 465㎡*340,000원 = 158,100천원 - 임시청사(사무동,차고동 등)설치:60,000,000원*1식= 60,000천원 ※ 2013년 에너지절감형 녹색건축물 조성 공사비 가이드라인 기준 적용(2.6% 건설공사비지수 상승률) ○ 설 계 비 : 88,714천원(기술용역타당성심사 반영) - 설 계 비 : 83,693천원 - 설계보상비 : 5,021천원 ○ 감 리 비 : 20,834천원 - 감 리 리 : (1,755,766천원*1.16%=20,366천원)+(20,366천원 *0.424%=86천원)*1.1=22,497천원 ○ 자산취득비 : 50,000천원(사무용집기류 등) ○ 시설부대비 : 8,252천원(1,755,766천원*0.47%=8,252천원) ○ 사무관리비 : 20,000천원(사무실표지판 등 9종)

나. 연도별 소요

(단위 : 천원)

구 분		계	2015년	2016년	2017년	2018년	예산과목
내용별	계	1,943,566	1,943,566
	일반매입
	보상
	기타(공사비 등)	1,943,566	1,943,566
재원별	계	1,943,566	1,943,566
	국비
	시비(특별교부금)	1,943,566	1,943,566
	구비
	지방체
	민자

5. 세부추진계획(예정)

구 분	추진 사항	법적 근거	세부추진 계 획	추진 기간
￭ 2015년 재건축공사 시설비(자산취득비 등 포함) 1,943,566천원
○ 시 설 비 : 1,755,766천원 - 건축비 : 2,141,000원*2.6%*700㎡=1,537,666,200원 - 철거 및 부대공사 등 : 465㎡*340,000원 = 158,100,000원 - 임시청사(사무동,차고동 등)설치 : 60,000,000원*1식 = 60,000,000원 ※ 2013년 에너지절감형 녹색건축물 조성 공사비 가이드라인 기준 적용(2.6% 건설공사비지수 상승률)	-공사입찰공고 -공사업체선정 및 계약 -재건축공사 -준공	본부소방행정과 -10252(2014.4.21.) 호『소방청사 개축 등 중기추진계획』	-임시청사 이전 -기존청사 철거 -공사입공고 -공사업선정 및 계약 -재건축공사 -준공청사 이전	5월~10월
○ 설 계 비 : 88,714천원(기술용역타당성심사 반영) - 설 계 비 : 83,693천원 - 설계보상비 : 5,021천원	-기본설계 및 실시설계	〃	-현상설계공모 및 계약 -설계보상비지급	1월~3월
○ 감 리 비 : 20,834천원 - 감 리 비 : (1,755,766천원*1.16%=20,366천원) +(20,366천원*0.424%=86천원)*1.1=22,497천원	-공사 감리	〃	-공사 감리계약 및 감리	5월~10월
○ 자산취득비 : 50,000천원(사무용집기류 등)	-사무용집기류 등 구매	〃	-냉장고 등 15종 구매	11월
○시설부대비 : 8,252천원(1,755,766천원*0.47%=8,252천원)	-준공행사비	〃	-준공행사비	12월
○ 사무관리비 : 20,000천원(사무실표지판 등 9종)	-사무실표지판 등 구매	〃	-사무실 표지판 등 9종	11월

6. 기타사항

기타사항
기타참고자료

위     치     도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

현   장   사   진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사진설명	우이119안전센터 공사위치도